Дело № 2-307/19

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

29 января 2019 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе судьи Паншина Д.А.,

при секретаре Никоновой Е.С.,

с участием представителя истца Рудольфа А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Янтарьэнерго» об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Янтарьэнерго» об обязании исполнить в полном объеме обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7720/11/17 от 22.11.2017 в отношении индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: ..., кадастровый номер участка ...; взыскании компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, штрафа, судебной неустойки в размере 1060 рублей в день с момента вынесения решения с дальнейшим удвоением размера.

В судебном заседании представитель ФИО1 на иске настаивал, пояснил, что к настоящему времени условия договор ответчиком по прежнему не выполнены, истцом на принадлежащем ему участке построен индивидуальный жилой дом, который к настоящему времени не электрифицирован, что препятствует его использованию по назначению.

Представитель АО «Янтарьэнерго» просил рассмотреть дело в его отсутствии, в представленном суду отзыве с иском не согласился.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела в их совокупности, суд приходит к следующему.

Установлено, что ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу: ... с кадастровым номером ... общей площадью ..., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (запись в ЕГРП от 22.09.2017).

Каких-либо прав на строения, расположенные на указанном земельном участке, ЕРГН по состоянию на 22.11.2018 зарегистрировано не было.

Между ФИО1 и АО «Янтарьэнерго» был заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 22.11.2017 № 7720/11/17, в соответствии с условиями которого АО «Янтарьэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергии), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ. ФИО1 при этом обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1 договора).

Пунктом 2 договора от 22.11.2017 предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения индивидуального жилого дома, который будет располагаться по адресу: ... (...).

Согласно п. 6 договора от 22.11.2017 АО «Янтарьэнерго» обязалось:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения балансовой принадлежности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

В силу п. 5 договора от 22.11.2017 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

В соответствии с п. 8 договора от 22.11.2017 ФИО1 обязался, в том числе:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Пунктом 10 договора от 22.11.2017 установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Цена договора от 22.11.2017 ФИО1 оплачена в полном объеме.

Согласно п. 3 договора от 22.11.2017 и технических условий № Z-7720/17 для присоединения к электрическим сетям, являющихся неотъемлемой частью договора от 22.11.2017, точкой присоединения является зажим на опоре (№уточнить при подключении) ВЛИ 0,4 кВ Л-новая от ТП 141-12.

Как следует из п. 10.3 технических условий в целях присоединения истца ответчик должен был, в том числе, построить от ТП 141-12 до участка заявителя ВЛИ с СИП 0,4 кВ (трассу ВЛИ, марку и сечение определить проектом, протяженность 370 м).

При этом в соответствии с п. 11 технических условий ФИО1 обязан был осуществить монтаж электросети от точки присоединения (через ЩУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности; на вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью; установить в ЩУ трехфазный прибор учета электроэнергии, классом точности 2,0 и выше.

18.12.2017 администрацией Гурьевского городского округа было выдано ФИО1 разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером ...

Письмом от 16.01.2018 АО «Янтарьэнерго» сообщило ФИО1 об отсутствии замечаний по итогам рассмотрения проектной документации (рабочая документация, шифр 87/17-1-ЭС) в границах земельного участка истца на предмет соответствия техническим условиям.

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ) В силу положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом. При этом суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии с положениями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу ч. 1 ст. 68 указанного Кодекса в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

20.03.2018 ФИО1 обратился к ответчику с уведомлением о выполнении технических условий.

21.03.2018 должностным лицом ответчика в присутствии истца был составлен акт осмотра (обследования) электроустановки истца, построенной в рамках выполнения технических условий № Z-7720/17 к договору от 27.11.2017. Как следует из указанного акта, обязательства АО «Янтарьэнерго», содержащиеся в п. 10 технических условий № Z-7720/17, не выполнены. Замечаний относительно выполнения истцом требований условий № Z-7720/17 акт не содержит.

Выполнение истцом взятых на себя в соответствии с договором от 27.11.2017 обязательств и невыполнение встречных обязательств со стороны ответчика подтверждается также представленными суду фотографическими снимками, технической документацией на прибор учета потребления электрической энергии.

Письмом от 26.03.2018 ответчик уведомил истца о том, что во исполнение договора от 27.11.2017 им был заключен договор подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП 141-12 (инв. № 5144448), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-12 в п. Кумачево Гурьевского район», а также формируется пакет документов для проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв. № 5116278) п. Кумачево Гурьевский ГО – 2-й этап». Также ответчик указал, что планируемый срок завершения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения – II квартал 2018 года.

14.06.2018 истец направил ответчику, в том числе, с требованием об исполнении обязательств по договору от 27.11.2017

Письмом от 28.06.2018 ответчик уведомил истца о том, что планируемый срок завершения мероприятий по договору от 27.11.2017 – III квартал 2018 года. Также ответчик уведомил, что по объекту «Реконструкция ТП 141-12 (инв. №5144448), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-12 в п. Кумачево Гурьевского район» разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ осуществляет ООО «ТК ЭнергоСтрой». По объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв. № 5116278) п. Кумачево Гурьевский ГО – 2-й этап» указано, что по результатам состоявшихся конкурентных процедур с ООО «ТрансКолЭнерго» будет заключен договор подряда на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Также в письме от 28.06.2018 ответчик указал истцу на необходимость выполнения истцом монтажа электросети от точки присоединения (зажим на новой опоре ВЛИ 0,4 кВ Л-новая от ТП 141-12) до ВРУ объекта истца СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. 

При этом как следует из представленных стороной истца фотографических снимков, опора, на которой должна располагаться точка присоединения, к настоящему времени не установлена, следовательно, у истца в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в рамках договора от 27.11.2017 отсутствует возможность осуществить монтаж участка электросети от предусмотренной точки присоединения к ВРУ объекта истца.

В своем отзыве на иск ответчик также не оспаривает, что его обязательства по договору от 27.11.2017 к настоящему времени в полном объеме и надлежащим образом не исполнены.

В силу с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Положениями ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

В силу п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. 780 указанного Кодекса, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.

Согласно положений ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определяется Правилами технологического присоединения.

Также указанные Правила регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее – технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В силу п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанным Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Пунктом 4 Правил технологического присоединения предусмотрено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с указанными Правилами.

Согласно п. 6 указанных Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами.

Установленная п. 7 Правил технологического присоединения процедура технологического присоединения предусматривала после заключения договора то 22.11.2017 в отношении энергопринимающих устройств ФИО1 следующие действия:

- выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности (под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»;

- составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению № 1.

В соответствии с пп. «б» п. 16 указанных Правил договор технологического присоединения должен содержать, в том числе, существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 данных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности.

Истец относится к категории потребителей, указанных в п. 14 Правил технологического присоединения (физическое лицо, максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт включительно, которые используются для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 также утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для данной категории потребителей.

В соответствии с п. 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в п. 14 (к которым относится истец) указанных Правил, распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Пунктом 16(6) Правил технологического присоединения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

- заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

- заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

- заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Указанных обстоятельств в ходе рассмотрения дела не установлено.

Материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения ответчиком взятых на себя обязательств в рамках договора от 22.11.2017, а также надлежащее исполнение истцом обязанностей по указанному договору, исполнение которых возможно в условиях отсутствия надлежащего встречного исполнения со стороны ответчика.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В силу норм ст. 396 Гражданского кодекса РФ, исполняя обязательство в натуре, должник обязан совершить именно то определенное действие, которое в силу обязательства и должен совершить (выполнить работу, предусмотренную договором, и передать кредитору ее результат).

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что истец вправе в судебном порядке требовать от ответчика исполнить обязательства по договору от 22.11.2017.

В целях восстановления нарушенных прав ФИО1, суд полагает необходимым возложить на АО «Янтарьэнерго» обязанность в течение двадцати дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по заключенному с истцом договору от 22.11.2017 в отношении индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: ..., кадастровый номер участка ..., а именно: осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям с учетом рабочей документации (шифр 87/17-1-ЭС), фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения.

Указанный срок суд считает разумным с учетом периода времени, отводившегося ответчику для исполнения условий договора.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащее гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком как сетевой организации прав истца как потребителя на технологическое присоединение его энергопринимающих устройств и дальнейший доступ к услуге по электроснабжению, суд находит требования истца о взыскании компенсации морального вреда основанными на положениях ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», и с учетом характера нарушенного права, периода нарушения прав, степени вины ответчика в нарушении условий договора, степени причиненных истцу моральных страданий, оценивает размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсации равным 1000 рублей.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. При этом, если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

В связи выводом суда об удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 1000, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 500 рублей.

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст.330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

В целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре суд полагает необходимым в случае неисполнения АО «Янтарьэнерго» решения суда об исполнении обязательств по договору от 22.11.2017 в установленный судом срок, суд полагает возможным обязать АО «Янтарьэнерго» выплатить в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. Указанный размер суд находит разумным и справедливым с учетом цены договора от 22.11.2017.

Руководствуясь ст. 194 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Обязать АО «Янтарьэнерго» в течение двадцати дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по заключенному с ФИО1 договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 7720/11/17 от 22.11.2017 в отношении индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, п.Кумачево, кадастровый номер участка ..., а именно: осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям с учетом рабочей документации (шифр 87/17-1-ЭС), фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения.

В случае неисполнения АО «Янтарьэнерго» решения суда в вышеуказанной части в установленный судом срок, обязать АО «Янтарьэнерго» выплатить в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Взыскать с АО «Янтарьэнерго» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 500 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарской городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья - Д.А. Паншин

...