47RS0№-13

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

по делу №

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Киришский городской федеральный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Мельниковой Е.А.,

при секретаре Гороховой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о защите прав потребителей, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор № на строительство дома под ключ (комплектация люкс) на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 1.4 срок выполнения работ 45 рабочих дней с момента завоза материала на участок. Общая стоимость составила 639 000 рублей, из которых 64 000 рублей – стоимость фундамента (оплачивается по факту), 575 000 рублей состоит из следующих платежей: первый платеж – аванс в размере 90 000 рублей, в день заключения договора, второй платеж в размере 370 000 рублей в момент завоза материала на участок заказчика, третий платеж при подписании акта приема-передачи. В соответствии с п.п. 3.2.1, денежные средства истцом оплачены в полном объеме. В связи с тем, что работы не были выполнены в срок и даже не начаты, между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого пункт 14 договора изложили в следующей редакции: «Срок выполнения работ по настоящему договору – не позднее ДД.ММ.ГГГГ». Работы до настоящего времени не выполнены. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия о расторжении договора и дополнительного соглашения, возврате денежных средств, а также оплате неустойки. Претензию ответчик получил ДД.ММ.ГГГГ, однако претензия оставлена без ответа. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ период просрочки выполнения работ составил 151 день. А потому размер неустойки по мнению истца составляет: 460 000 х 3% х 151 дней = 2 083 800 рублей. Поскольку неустойка не может быть больше самого обязательства, то её размер составляет 460 000 рублей. При этом в соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» ответчик должен выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Просит расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 460 000 рублей, неустойку в размере 460 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также штраф в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», расходы по оплате юридических услуг в размере 25 000 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, воспользовался правом на ведение дела через представителя, которая телефонограммой заявленные требования подержала в полном объеме, не возражала против вынесения заочного решения, просила о рассмотрении дела без ее участия.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте слушания дела, о причинах неявки суд не уведомил и доказательств их уважительности не представил, возражений против удовлетворения иска не заявил, что является основанием для рассмотрения дела в отсутствие не явившегося ответчика и в силу ч. 1 ст. 233 ГПК РФ для вынесения заочного решения.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч.1 ст.314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пп.2 ч.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с преамбулой Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ ) "О защите прав потребителей" указанный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг). При этом потребителем является гражданин, не только заказывающий приобретающий или использующий товары (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, но и имеющий намерение заказать или приобрести такие товары (работы, услуги).

С учетом положений статьи 39 названного Закона к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8-12), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении об уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.28 названного закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (ч.1). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (ч.2).

В судебном заседании установлено и документально подтверждено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО1 был заключен договор № (л.д. 9-11).

Согласно п.1.1 Договора подрядчик в установленные договором сроки собственными силами из своих материалов осуществляет работы по строительству дома под ключ (комплектация люкс) в соответствии со спецификацией к указанному договору по заданию и в соответствии с проектом заказчика, на его земельном участке, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях, определенных договором.

Согласно п. 1.2 Договора объект расположен по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п. 1.4 Договора срок выполнения работ определен в течении 45 рабочих дней с момента завоза материалов на участок.

Согласно п. 3.1 Договора общая стоимость работ составляет 639 000 рублей и является твердой. Из них 64 000 рублей - стоимость фундамента (оплачивается по факту), 575 00 рублей оплачивается в следующем порядке: первый платеж – аванс в размере 90 000 рублей - в день заключения договора, второй платеж в размере 370 000 рублей в момент завоза материала на участок заказчика, третий платеж - при подписании акта приема-передачи. 

Истец выполнил свои обязательства по договору и оплатил первый платеж в размере 90 000 рублей и второй платеж в размере 370 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (л.д. 15).

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 14), согласно которого пункт 14 договора был изложен в следующей редакции: «Срок выполнения работ по настоящему договору – не позднее ДД.ММ.ГГГГ»

Ответчик свои обязательства по договору не выполнил, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия, которой истец настаивает на расторжении заключенного договора и возврате денежных средств (л.д.17-19).

В виду того, что ответчиком не было предпринято мер к урегулированию спора, ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с настоящим иском в суд.

Обсуждая требование истца о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании с ответчика переданных денежных средств в сумме 460 000 рублей суд приходит к следующему.

Согласно Договору подрядчик обязался обеспечить из собственных строительных материалов и своими силами изготовление и строительство дома под ключ в соответствии со спецификацией в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

Доказательств исполнения условий договора ответчиком суду не представлено, тогда как истцом представлены доказательства произведенной в счет исполнения договора оплаты денежных средств в сумме 460000 рублей.

При имеющихся обстоятельствах суд находит требования истца о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании с ответчика переданных ему денежных средств в сумме 460 000 рублей подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Обсуждая требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение установленных сроков начала и окончания работ суд приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В соответствии с п.6.1 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.6.2 Договора за необоснованное нарушение сроков выполнения заказчик вправе на основании письменно предъявленной претензии требовать с подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

В соответствии с расчетом истца периодом для начисления неустойки является период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма неустойки составляет 2 083 800 рублей 00 копеек (л.д. 5), но в связи с тем, что сумма взысканной потребителем неустойки (пени) в соответствии с п.4 ч.5 ст.28 Федерального Закона «О защите прав потребителей» не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), истец уменьшил размер неустойки до 460 000 рублей. С названной суммой неустойки суд соглашается и находит ее подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

Опровергающего расчёта со стороны ответчика не представлено, доказательств выплаты истцу причитающихся сумм материалы дела не содержат, соответственно при данных обстоятельствах при определении подлежащей взысканию с ответчика неустойки суд исходит из расчёта истца.

Согласно п. 1 ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Разрешая требования истца о компенсации морального вреда, суд, руководствуясь положениями ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", приходит к выводу о том, что ответчиком допущены нарушения прав истца как потребителя, и, учитывая обстоятельства нарушения прав потребителя, последствия этих нарушений, степень вины как ответчика, так и истца, длительность неисполнения ответчиком требований истца, требования разумности и справедливости при определении размера компенсации, считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку факт нарушения прав потребителя установлен, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать штраф в сумме 465 000 рублей 00 копеек (460 000 рублей + 460 000 рублей 00 копеек+ 10 000 рублей) х 50%.

Суд учитывает то обстоятельство, что гражданский процесс строится на принципе состязательности сторон. Однако ответчик, не являясь в судебное заседание, не воспользовался правом представлять доказательства в обоснование своих возражений, если бы таковые были.

При разрешении требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

Вместе с тем, истцом не предоставлены доказательства несения истцом расходов за оказание юридической помощи, а потому, в указанной части требования удовлетворению не подлежат. Одновременно, суд обращает внимание на то, что истец не лишен права в установленные законом сроки и при предоставлении подтверждающих расходы документов обратиться за взысканием понесенных судебных расходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 12 700 рублей 00 копеек. 

Руководствуясь ст. ст.194,198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично. 

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ФИО1 и дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ФИО1 расторгнуть.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 денежные средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 460 000 рублей 00 копеек, неустойку за неисполнение условий договора за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 460 000 рублей 00 копеек, денежную компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей 00 копеек, штраф в сумме 465 000 рублей, всего взыскать 1 395 000 (один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в Киришский городской суд 

<

адрес> заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Судья: