Дело № 2-3/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2019 года Серебряно-Прудский районный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Молчанова А.Г.,

при секретаре судебного заседания Фуриной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Эксклюзив & М» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Эксклюзив & М» убытков в размере 1442252 рублей, неустойки в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 193903 рублей 86 копеек за период времени с 15 января 2017 года по 20 августа 2018 года, компенсации морального вреда в размере 300000 рублей. Истец мотивирует свои требования тем, что ответчик выполнил обязательства по договору строительного подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ ненадлежащим образом, просил взыскать стоимость невыполненных по договору работ, а также стоимость работ, произведённых с ненадлежащим качеством.

Истец ФИО1 в судебном заседании иск поддержал по изложенным в нём основаниям и пояснил, что не оспаривает выполнение ответчиком 1-го этапа работ, перечисленных в плане-графике выполнения строительства (приложение № 2), которые были им приняты. Второй и третий этапы работ им не принимались, так как были выполнены не в полном объёме и ненадлежащего качества. В крыше из металлочерепицы имеются щели, углы неровные, от фасадных стен отваливается декоративный камень.

Ответчик ООО «Эксклюзив & М» своего представителя в судебное заседание не направило, в силу статьи 165.1 ГК РФ суд считает его извещение надлежащим, так как ответчик уклонился от получения судебного извещения, направленного почтой, о причине неявки представителя не сообщил и не просил об отложении судебного разбирательства, возражений по исковым требованиям не представил.

При таких обстоятельствах на основании статей 165.1 ГК РФ и 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, участие которого при разбирательстве данного дела не признавалось судом обязательным.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, заключение эксперта, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполнятся надлежащим образом, и односторонний отказ от их исполнения не допускается.

В силу статьи 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).

В соответствии со статьёй 739 ГК РФ, в случае ненадлежащего невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503-505 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 503 ГК РФ покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключён договор № №, согласно которому, ООО «Эксклюзив & М» как подрядчик приняло обязательство выполнить по заданию заказчика ФИО1 работу по строительству каркасного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, размером 10000 мм х 15000 мм, на участке в соответствии СП №, и сдать её результат заказчику, а заказчик принял обязательство принять результат работы и оплатить её. Общая стоимость работы по договору была определена в сумме 2166250 рублей. Строительство дома выполняется в соответствии со сметой работ и проектной документацией (Приложение № 1 к договору), в которой сторонами согласована стоимость работ, и с планом-графиком работ (Приложение № 2 к договору), в котором определены сроки выполнения этапов работ, а также общий срок 50 дней – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 1.3 договора, подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своём оборудовании, своими силами и средствами.

В соответствии с пунктом 1.4 договора, сдача этапов работы подрядчиком и приёмка их заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

Пункт 1.5 договора предусматривает подписание сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ, после чего работа считается окончательно выполненной.

Согласно представленным платёжным документам, истец как заказчик строительства дома по договору свои обязательства выполнил и оплатил общую стоимость объекта в установленный договором срок, что ответчиком не оспаривается и подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 722250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 722000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 рублей. Всего истцом выплачено ответчику по договору (722250 + 722000 + 720000 = 2164250).

В свою очередь ответчик как подрядчик по договору не передал объект строительства истцу, акт приёма-сдачи работ в суд не представил.

Согласно спецификации к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет договора – каркасный дом, размером 15 х 10, имеет следующий состав, габариты и комплектацию:

Фундамент - винтовые сваи (108х2000)-42 шт., (89 х 2000) - 2 шт. Облицовка цоколя цcп плиты (дикий камень) песчаник, обвязка по периметру - брус 150 x 150 мм.

Лаги пола - доска 40 x 150 мм.

Черновой пол с шагом 150 мм - доска 25 x 100 мм.

Силовой каркас дома размером 15000 x 10000 мм. Стойки, верхние и нижние лежни, * укосины и вторая верхняя обвязка из доски 40 x 150.

Стропильная система из доски 40 x 150.

Ветро-гидроизоляционная мембрана подкровельного пространства.

Вентиляционная контр обрешётка 25 x 50.

Обрешетка 25 x 100.

Утепление пола, потолка и стен утеплителем Ursa Terra pn 37 (200 мм).

Кровля из металлочерепицы. Конёк по цвету кровли.

С внешней стороны стен дома монтируется влаго-ветрозащитная пленка.

Брусок контробрешётки для вентиляции фасада размером 25 x 50.

Отделка фасада дома имитация бруса (145 х 16) + фасад согласно проекту Дикий камень (песчаник).

Подшивка свесов кровли софитом.

Окна пластиковые фирмы «Гудвин», энергосберегающие с 5-камерным профилем и 2-камерным стеклопакетом, размер 1800 x 1400 мм- 3 шт. (ламинация с 1 стороны). 500 x 500 мм - 1 шт. 1200 х 1400 мм – 1 шт. 1000 x 1400 мм - 1 шт. 2500 х 3100 мм - 1 шт. (ламинация с 2 сторон). 2000 х 2500 мм – 1 шт. (ламинация с двух сторон). Так же откосы и отливы.

Межкомнатные двери-стиль (венге) 800 х 2000 - 6 шт., арка – 2 шт. (венге).

Входная металлическая дверь «Лабиринт» размером 860 x 2100 мм. - 1 шт.

Чистовой пол на 1 этаже дома - шпунтованная доска 27 х 115 мм. + ламинат согласно проекту (гостинная-Венге, 3 и 2 спальни-ясень, топочная - беленый дуб).

Внутренняя отделка стен, перегородок и потолка-стены: Гкл, вагонка, имитация бруса, ламинат. Согласно проекту. Потолоки: натяжные матовые (1 спальня - двухуровневый).

Разводка электропроводки по периметру дома.

Вытяжная система кухни и санузла с декоративной трубой.

Снегозадержатели.

Хозблок (3 х 3).

Согласно локальной сметы на строительство каркасного дома 10 х 15 м, должны были быть выполненные следующие объемы и виды работ на сумму 2166250 рублей.

№ п.п.

наименование работ и затрат

ед. изм.

объём

Фундамент

1

Разборка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)

1000 м3

0,150

2

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-05

1000 м3

0,300

3

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

1 т

1,800

4

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

м

176,000

5

Бетонирование свай

1м3

1,4

6

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

м3 

1,4 

Конструкция пола

7

Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям

1м3

1,140

8

Сборка перекрытий с настилом полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами

100 м2

1,540

9

Линокром ТКП

м2

338,800

10

URSA TERRA 37 PN

м3

25,410

11

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта

м3

7,990

12

Устройство покрытий из плит древесностружечных

100м2

1,540

13

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

100м2

1,540

Стены 

14

Установка элементов каркаса из брусьев

1м3

3,100

15

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

100м2

3,034

16

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен

100м2

30,340

17

URSA TERRA 37 PN

м3

37,840

18

Обшивка каркасных стен досками обшивки

100м2

1,517

19

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм

100м2

2,700

20

Антисептирование водными растворами стен

100м2

4,217

Проемы

21

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м. двухстворчатых

100м2

0,180

22

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 кв.м.

100м2

0,140

23

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1м2

2,300

24

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм

шт.

1,000

Кровля

25

Установка стропил 

1м3

2,300

26

Устройство пароизоляции оклеенной в один слой

100м2

1,820

27

Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01

100м2

1,820

28

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

100м2

1,820

29

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03

100м2

1,820

30

URSA TERRA 37 PN

м3

40,040

31

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы

100м2

1,820

32

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и д.р.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб

100м2

1,720

Электромонтажные работы

33

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100м

4,150

34

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25 х 16 мм

м

415,000

35

Провод в коробах, сечением до 35 кв.м.

100м

4,150

36

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 кв.м.

1000м

0,415

37

Выключатель одноклавишный неутоленного типа при открытой проводке

100шт

0,060

38

Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051-с, цвет бежевый

шт

6,000

39

Розетка штепсельная неутолённого типа при открытой проводке 

100шт

0,150

40

Розетка открытой проводки двухгнездовая с заземлением

шт

15,000

41

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100шт

0,090

42

Светильники потолочные люминесцентные с симметричным зеркальным отражением типа ASM/R 1х36 IP20

шт

3,000

43

Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226

шт

6,000

44

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1шт

1,000

45

Щитки квартирные учетно-распределительные (У) ЩКУ 1-40-23У-31 У3

шт

1,000

С целью подтверждения объёма и качества выполненных ответчиком работ, по ходатайству истца по делу была проведена судебная строительно-техническая экспертиза.

По заключению экспертной организации ООО «Организация независимой помощи обществу» от ДД.ММ.ГГГГ № №, в результате инструментального исследования, фактически по договору были выполнены следующие работы:

№ п.п.

наименование работ и затрат

Стоимость 

(руб., коп.)

выполнение

Фундамент

1

Разборка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)

883,61

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

2

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-05

1530,56

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

3

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2

87750,61

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

4

Бетонирование свай

4829,44

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

Конструкция пола

5

Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям

28408,14

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

6

Сборка перекрытий с настилом полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами

107567,28

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

7

Устройство покрытий из плит древесностружечных

53162,29

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

8

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

103315,65

Выполнено

Стены

9

Установка элементов каркаса из брусьев

47853,98

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

10

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

170533,80

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

11

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен

185309,00

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

12

Обшивка каркасных стен досками обшивки

42894,06

Выполнены

13

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм

232093,79

Выполнены

14

Антисептирование водными растворами стен

18274,37

Подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

Проемы

15

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 двухстворчатых

80705,60

Выполнены

16

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2

22716,06

Выполнены

17

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

2863,43

Выполнены

Кровля

18

Установка стропил 

39542,04

Выполнены

19

Устройство пароизоляции оклеенной в один слой

29041,09

Выполнены

20

Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценки 12-01-015-01

20306,34

Выполнены

21

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

70247,92

Выполнены

22

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03

58515,68

Выполнены

23

Устройство кровель различных типов из металочерепицы

222474,32

Выполнены

24

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и д.р.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб

15003,83-30%=

10502,68

Выполнены, кроме устройства водосточных труб с их изготовлением.

Электромонтажные работы

25

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

26811,82

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

26

Провод в коробах, сечением до 35 мм2

6184,30

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

27

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2

12425,52

Работы выполнены, подтвердить объемы не представляется возможным, так как работы являются скрытыми, исполнительная документация, фиксирующая проведение скрытых работ отсутствует.

28

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

166,14

Выполнены

29

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 

2111,76

Выполнены

30

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

3396,34

Не выполнено

31

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1228,15

Не выполнено

Судебными экспертами установлено, что всего работ было выполнено по договору на общую сумму 1670746 рублей 91 копейку. Заключение судебной экспертизы сторонами не оспорено.

Таким образом, поскольку истцом было оплачено по договору 2164250 рублей, с ответчика подлежит взысканию разница между выплаченной истцом суммой и стоимостью выполненных работ всего 493503 рубля 09 копеек (2164250 - 1670746,91 = 493503,09).

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию, в которой просил в течение 7 дней с момента её получения вернуть неотработанные денежные средства. Сведений о рассмотрении данной претензии ответчик в суд не представил. В объяснении истец указал, что ответа на претензию не получал. Согласно отслеживанию почтового отправления, ДД.ММ.ГГГГ претензия истца была возвращена отправителю.

Поскольку ответчик не выполнил принятые на себя обязательства и не выполнил работу в срок, суд считает требование истца по взысканию неустойки и определённый период её образования обоснованными.

Период просрочки исполнения обязательства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 217 дней (16 дней января + 28 дней февраля + 31 день марта + 30 дней апреля + 31 день мая + 30 дней июня + 31 день июля + 20 дней августа).

Размер подлежащей взысканию неустойки рассчитывается по следующей формуле: 493503,09 (цена невыполненных работ) х 3% х 217 (период просрочки) = 3212704,53.

Однако, поскольку в силу пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, размер неустойки не может превышать 493503 рубля 09 копеек.

Вместе с тем, истец просил взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 193903 рублей 86 копеек, в связи с чем, на основании ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд не вправе по своему усмотрению взыскать больше указанной истцом суммы.

Указанная истцом норма права, а именно статья 395 ГК РФ, неприменима к данным правоотношениям в качестве основания для взыскания неустойки, поскольку отношения сторон регулируются специальным законом – «О защите прав потребителей», имеющим преимущество перед общими нормами.

Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесённых потребителем убытков.

Учитывая положения указанной статьи, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда, поскольку невыполнение работ по договору о строительстве жилого дома, а также необоснованный отказ ответчика в удовлетворении претензии истца нарушают права последнего.

Вышеуказанным бездействием ответчика истцу был причинён моральный вред. Между тем, сумму морального вреда подлежащей компенсации суд считает разумной и справедливой в размере 15000 рублей.

Исходя из положений статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, с ответчика ООО «Эксклюзив & М» в пользу истца ФИО1 подлежит взысканию штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требования потребителя в размере 351203 рублей 48 копеек (493503,09 + 193903,86 + 15000 = 702406,95 х 50 % = 351203,48).

Обстоятельств для снижения суммы штрафа в ходе судебного разбирательства не установлено, и ответчик о снижении суммы штрафа не просил.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых был освобождён истец при подаче иска, подлежат взысканию с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований.

В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счёт средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию сумма государственной пошлины, от уплаты которой был освобождён истец при подаче иска.

По требованиям о компенсации морального вреда и штрафа 300 рублей х 2 = 600 рублей.

По требованию о взыскании цены невыполненной работы – 493503 рубля 09 копеек, и неустойки – 193903 рубля 86 копеек, государственная пошлина составляет 10074 рубля 07 копеек (5200 + 1% от 687406 руб. 95 коп. – 200000 руб.). Всего 10674 рублей 07 копеек (10074 руб. 07 коп. + 600 руб.).

Руководствуясь статьями 56, 98, 103, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эксклюзив & М» в пользу ФИО1 стоимость невыполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № № в размере 493503 (четырёхсот девяноста трёх тысяч пятисот трёх) рублей 09 (девяти) копеек, компенсацию морального вреда в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, неустойку за период времени с 16 января по 20 августа 2018 года в размере 193903 (ста девяноста трёх тысяч девятисот трёх) рублей 86 (восьмидесяти шести) копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 351203 (трёхсот пятидесяти одной тысячи двухсот трёх) рублей 48 (сорока восьми) копеек, а всего 1053610 (один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 43 (сорок три) копейки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «Эксклюзив & М» в бюджет муниципального образования «Городской округ Серебряные Пруды Московской области» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 10674 (десяти тысяч шестисот семидесяти четырёх) рублей 07 (семи) копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме через Серебряно-Прудский районный суд Московской области.

Председательствующий судья А.Г. Молчанов

Полный текст решения изготовлен 21 января 2019 года.