Дело №2-293/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 января 2019 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе: 

председательствующего - судьи Котешко Л.Л. 

при секретаре судебного заседания – Панове А.А. 

с участием представителя ответчика – ФИО1, действующей на основании доверенности, 

в отсутствие истца 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Севастополя гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ПАО "Севастопольгаз" о взыскании неустойки, возложении обязанности совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Ленинский районный суд города Севастополя с исковым заявлением к ответчику, в котором просит взыскать с ПАО «Севастопольгаз» в пользу ФИО2 неустойку в размере 14416 руб., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., а также обязать ПАО «Севастопольгаз» выполнить обязательства по договору № от 01 марта 2017 года.

Исковые требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком 01 марта 2017 года заключен договор №, по условиям которого ПАО «Севастопольгаз» обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома, расположенного на земельном участке, принадлежащем истцу, по 

<

адрес> Согласно п. 1.3 подключение к объекту производится не позднее одного года. Истцом в этот же день была внесена оплата за предоставляемую услугу. Однако до настоящего времени, подключение к сетям газораспределения не выполнено. В связи с чем, истец вынужден обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. 

Истец в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела извещен надлежащим образом, уважительных причин неявки суду не сообщил.

Ответчик в судебном заседании просила в удовлетворении исковых требований отказать, представила письменные возражения. 

С учетом положений ст. 167 ГПК РФ и мнения представителя ответчика, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика. 

Суд, выслушав объяснения и доводы представителя ответчика, проверив и исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично в силу нижеследующего. 

Взаимоотношения между лицом, намеренным подключиться к сетям газораспределения и газораспределительной организацией, урегулированы правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. N 1314 (далее - Правила).

В соответствии с п. 59 Правил №1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Также, в соответствии с п. 60 Правил №1314 по Договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). 

Согласно п. 81 Правил №1314 договор о подключении считается заключенным со дня поступления экземпляра договора о подключении.

В соответствии с пп. "а" п. 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 1 год.

Согласно п. 91 Правил №1314 внесение платы за технологическое присоединение заявителями в случае; подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетдм газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении (технологическом присоединении), измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке: а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении! (технологическом присоединении). 

В соответствии с п. 98 Правил №1314 исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также но подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитальною строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении.

Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего; пункта),. если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению). 

В соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 3 Правил №1314 заключительным этапом осуществления Мероприятий по технологическому присоединению является составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта 1 разграничения эксплуатационной ответственности сторон по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения; (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 01 марта 2017 года между ФИО2 (заявитель) и ПАО «Севастопольгаз» (исполнитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения № (далее – Договор), согласно которому исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома, расположенного на земельном участке, принадлежащем заявителю, по 

<

адрес>, к сети газораспределения, а заявитель обязался оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 1.1 Договора).

Согласно п. 1.2 Договора, подключение объекта к сети газораспределения должно осуществляться в соответствии с техническими условиями от 24 января 2017 года №. 

Как следует из п. 1.3 Договора, подключение объекта к сети газораспределения производится Исполнителем не позднее одного года с момента заключения сторонами настоящего договора при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору.

В соответствии с пунктом 2.1 (2.1.1, 2.1.3-2.1.5) Договора исполнитель обязался:

- на основании технических условий разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения от газопровода, к которому осуществляется подключение, до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка Заявителя.

- надлежащим образом осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения), предусмотренные настоящим Договором и техническими условиями, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее даты подключения, установленной в п. 1.3 настоящего Договора.

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителя о выполнении технических условий проверить выполнение технических условий заявителем.

Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами Договора акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 3.1 Договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 59220 руб. При этом, п. 3.2 Договора предусмотрено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 % (пятьдесят процентов) платы за технологическое присоединение в сумме 29 610,00 рублей (двадцать девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек (с учетом НДС -18 %)) вносится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора о подключении; 50 % (пятьдесят процентов) платы за технологическое присоединение в сумме 29 610,00 рублей (двадцать девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек (с учетом НДС -18 %)) вносится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. По усмотрению Заявителя допускается внесение платы за технологическое присоединение в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

Согласно п. 3.2 Договора, датой исполнения обязательства заявителя по внесению платы за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет исполнителя.

Истцом плата, предусмотренная договором, за технологическое присоединение произведена в сумме 29610 руб., что подтверждается платежными документами от 02 марта 2017 года. 

30 июля 2018 года истцом в адрес ответчика направлена претензия о необходимости исполнения обязательств по подключению (технологическому присоединению) жилого дома. 

Как следует из ответа ответчика истцу от 06 сентября 2018 года, по объекту капитального строительства – 

<

адрес>, разработана проектная документация и получены согласования с организациями города. Для производства работ необходимо получить технические условия ГБУ «Севавтодор» на пересечение дороги по 

<

адрес> данный момент идет процедура согласования, после получения технических условий и открытия ордера на земельные работами силами Предприятия будут выполнены строительно-монтажные работы. 

Судом установлено и не оспаривается представителем ответчика, что ответчиком не исполнены обязательства по подключению жилого дома истца к сетям газораспределения в установленный договором срок. 

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО2 об обязании ответчика осуществить мероприятия по подключению его жилого дома к сетям газораспределения являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком надлежащим образом обязательства по Договору не исполнены, доказательств, подтверждающих, что истец препятствовал ответчику своевременно исполнить условия договора, суду не предоставлено, между тем истец взятые на себя обязательства по Договору исполнил в полном объеме, доказательств обратного, в силу ст.56 ГПК РФ, ответчиком не предоставлено.

Относительно требований о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение договора суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 6.2 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Истцом предоставлен расчет процентов по неустойки, который проверен судом, признан выполненным арифметически верно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, контррасчет ответчиком суду не представлен.

Таким образом, поскольку срок исполнения ответчиком обязательств по Договору истек 01 марта 2018 года, взятые на себя обязательства ответчик своевременно не исполнил, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика ПАО «Севастопольгаз» в пользу истца неустойку за период с 01 марта 2018 года по 28 ноября 2018 года (день пода искового заявления) в размере 14416 руб.

Определяя размер денежной компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с ответчика ПАО «Севастопольгаз» в пользу истца, суд на основании статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", оценив фактические обстоятельства дела, установленное нарушение ответчиком прав истца как потребителя, выразившееся в нарушении срока исполнения Договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения, с учетом длительности неисполнения обязательства, требований разумности и справедливости считает необходимым взыскать компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

Доводы ответчика о том, что истцом не были соблюдены требования, предусмотренные пунктом 2.3.5 Договора, а именно заявитель не уведомил ПАО «Севастопольгаз» о выполнении, со своей стороны, технических условий, являются несостоятельными, поскольку вне зависимости от действий или бездействий заявителя, не исполнившего обязательства со своей стороны, предусмотренные техническими условиями, не могли повлиять на своевременное выполнение ПАО «Севастопольгаз» мероприятий, предусмотренных п/п «а» п.98 Правил, а именно строительства газопровода до точки подключения, со свой стороны.

Руководствуясь ст.ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ПАО "Севастопольгаз" о взыскании неустойки, возложении обязанности совершить определенные действия - удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Севастопольгаз» выполнить обязательства по договору № от 01 марта 2017 года, заключенному между ФИО2 к ПАО "Севастопольгаз".

Взыскать с ПАО «Севастопольгаз» в пользу ФИО2 неустойку в размере 14416 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Севастополя. 

Решение в окончательной форме изготовлено 28.01.2019. 

Председательствующий –