УИД № 77RS0006-02-2024-003110-50

Мотивированное 

решение

 изготовлено 13.03.2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 ноября 2024 года адрес

Дорогомиловский районный суд адрес в составе 

председательствующего судьи Овчинниковой В.И., 

при секретаре судебного заседания фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2468/2024 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» о защите прав потребителя, об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения земельного участка, взыскании неустойки

установил:

ФИО1 обратился с иском к ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42237164 от 06.06.2022, заключенному с ФИО1 в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: адрес, адрес, район адрес, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000038:4464, а также взыскать с ответчика неустойку в размере сумма За каждый день просрочки исполнения решения суда по истечению 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу. Требования мотивированы тем, что по условиям заключенного между сторонами договора ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с максимальной мощностью присоединяемых устройств 15 кВт с уровнем напряжения не выше 0,4 кВ в течении 6 месяцев, то есть не позднее 06.12.2022. Предусмотренная договором плата истцом была внесена. Однако ПАО «Россети Центр» не исполнило принятых на себя обязательств, срок исполнения договора истек. Истец был вынужден обратиться в суд с иском. 

Истец и его представитель в судебное заседание не явились, о месте, дате и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, истец просит рассмотреть дела в свое отсутствие, поддерживает заявленный иск.

Ответчик ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» в судебное заседание не явился, о дне и месте слушания дела извещен надлежащим образом, предоставил письменные возражения по иску, не согласившись с заявленными требованиями. 

В порядке ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Из материалов дела следует, что 06.06.2022 между фио и ПАО «Россети Центр» заключен договор № 42237164 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложением к которому являются технические условия.

В соответствии с условиями данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного распределительного устройства, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 2 договора).

В соответствии с п. 3 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения хозяйственной постройки на земельном участке, расположенном по адресу: адрес, адрес, район адрес, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000038:4464.

В соответствии с п. 5 указанного договора неотъемлемой частью договора являются технические условия, срок действия которых составляет два года со дня заключения договора.

В соответствии с п. 6 указанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяца со дня заключения договора.

В соответствии с п.п. 12, 13 указанного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организации счета (квитанции), размер платы составляет сумма

Как следует из материалов дела, обязательства ФИО1 по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены, что не оспаривалось стороной ответчика и подтверждено квитанцией от 03.06.2022г.

Срок исполнения обязательств ответчика по договору истек 06.06.2022г.

В досудебном порядке обязательства ответчиком не исполнено. 

И до настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены, что не отрицалось стороной ответчика в своих возражениях на иск. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно положениям статьи 27 ФЗ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно аб.2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16 Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев.

При вынесении решения суд принимает во внимание постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по адрес от 03 февраля 2022г. по делу № 069/04/9.21-529/2022.

Письменные возражения ответчика суд находит не обоснованными.

Пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. № 7 “О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств” в соответствии с п. 1 ст. 308 ГК РФ наделяет суд правом, а не обязанностью, присуждать денежные средства на случай неисполнения судебного акта (судебная неустойка).

Суд считает, что применение судебной неустойки по настоящему делу нецелесообразно.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оценив представленные по делу доказательства, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований фио об обязании ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнернго» исполнить обязательства по договору от 06.06.2022 № 422 37164 об осуществлении технологического присоединения, при этом исходил из того, что принятые на себя обязательства по договору ответчиком не исполнены, установленный договором срок исполнения не ставился в зависимость от каких-либо дополнительных условий. 

Суд устанавливает срок для исполнения решения суда в течение 60 дней с момента вступления в законную силу, признав указанный истцом срок 10 дней недостаточным, для исполнения объёма работ, указанных в технологических условиях.

В остальной части иска суд считает необходимым отказать.

Поскольку госпошлина истцом не оплачена, суд взыскивает госпошлину в размере сумма с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 88, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Обязать ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» исполнить обязательства по договору № 42237164 от 06.06.2022, заключенному с ФИО1, об осуществлении технологического присоединения земельного участка по адресу: адрес, адрес, район адрес, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000038:4464 к электрическим сетям в срок 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу,

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Дорогомиловский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Овчинникова В.И.