Судья Жильчинская Л.В. УИД 38RS0036-01-2025-002636-50

Судья – докладчик Скубиева И.В. № 33-449/2026 (33-10518/2025)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 января 2026 г. г.Иркутск

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Скубиевой И.В.,

судей Шабалиной В.О., Кулаковой С.А.,

при секретаре Королевой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2820/2025 по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» о понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки за неисполнение решения суда, по встречному исковому заявлению акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» к ФИО1 о взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины

по апелляционной жалобе акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»

на решение Свердловского районного суда г.Иркутска от 24 июня 2025 г.,

УСТАНОВИЛА:

в обоснование исковых требований ФИО1, уточненных в порядке ст.39 ГПК РФ указано, что между истцом и ответчиком 04.05.2023 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: 

<

адрес изъят>.

В соответствии с условиями договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора; размер платы - 245 980,36 руб.

Договорные обязательства истцом выполнены; ответчиком в установленный договором срок - 12.05.2024 – технологическое присоединение не осуществлено.

Досудебные обращения истца об исполнении ответчиком обусловленных договором обязательств оставлены без удовлетворения со ссылкой на задержку и перенос срока выполнения работ, что послужило основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением, в котором заявлены требования о возложении на ответчика обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 3081/23-ВЭС от 04.12.2023 в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес изъят>; взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 245 980,36 руб., а также с 25.03.2025 до вынесения решения суда; взыскании компенсации морального вреда в размере 10 000 руб.; штрафа в размере 127 990,18 руб.; установлении размера подлежащей уплате в случае неисполнения ответчиком решения суда неустойки по 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 8 дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда.

В обоснование встречного искового заявления АО «ИЭСК» указано, что в нарушении п.5 заключенного между сторонами договора истец уведомление о выполнении технических условий направил в адрес сетевой организации 06.09.2024, то есть за пределами установленного договором срока.

В связи с чем АО «ИЭСК» (ответчик) просит взыскать с ФИО1 (истца) неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренную п.17 договора, в размере 73 794,11 руб. за период с 13.05.2024 по 06.09.2024, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Решением Свердловского районного суда г.Иркутска от 24 июня 2025 г. исковые требования ФИО1 к АО «ИЭСК» удовлетворены: на АО «ИЭСК» возложена обязанность исполнить заключенный с ФИО1 договор № 3081/23-ВЭС, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес изъят>, в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда; с АО «ИЭСК» в пользу ФИО1 взысканы неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору за период с 13.05.2024 по 24.06.2025 в размере 250 899,97 руб., компенсация морального вреда в сумме 3 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 126 949,99 руб.; судебная неустойка за неисполнение решения суда в размере 300 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная по истечении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда; в удовлетворении встречных исковых требований АО «ИЭСК» к ФИО1 отказано; также с АО «ИЭСК» в доход местного бюджета муниципального образования «г.Иркутск» взыскана государственная пошлина в размере 11 257 руб.

В апелляционной жалобе АО «ИЭСК» просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении первоначального искового заявления оказать, указывая, что несвоевременное исполнение сетевой организаций условий договора вызвано уважительными причинами, связанными с увеличением объема запрашиваемой мощности и стремительно растущей нагрузкой на электрические сети. При этом АО «ИЭСК» 09.07.2025 выполнило мероприятия по осуществлению технологического присоединения заявителя.

Полагает, что поскольку ФИО1 в свою очередь также нарушил предусмотренные договором сроки выполнения мероприятий, требования первоначального и встречного исков о взыскании штрафных санкций являются взаимоисключающими.

В письменных возражениях относительно доводов апелляционной жалобы ФИО1 просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Заслушав доклад по делу, пояснения явившихся в судебное заседание лиц, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность оспариваемого решения в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с абз.16 п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ «Об электроэнергетике») по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п.1 ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» и п.п.16, 17 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 – Правила № 861).

Согласно ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (п.1).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с п.1 ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

При разрешении возникшего спора установлено, что земельный участок и расположенный на нем индивидуальный жилой дом по адресу: 

<

адрес изъят> принадлежат на праве собственности ФИО1

Между АО «ИЭСК» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № 3081/23-ВЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт (увеличение отбора мощности с 15 кВт до 45 кВт), с изменением схемы внешнего электроснабжения;

категория надежности III (третья);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями настоящего договора (п.1 договора).

Из положения п.2 договора следует, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома (площадь 263,9 кв.м., количество этажей: 2, расположенного на земельном участке (площадь 494 +/- 8 кв.м.) по адресу: 

<

адрес изъят>.

В соответствии с п.4 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технологических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора.

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (п.21).

Стоимость технологического присоединения составляет 245 980,36 руб., в том числе НДС 40 996,73 руб. (п.10).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п.12).

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% общего размера платы за каждый день просрочки.

В соответствии с п.6 договора сетевая организация обязалась:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях (п.6.1);

- в течение 8 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем (п.6.2);

- принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (п.6.3);

- не позднее 8 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединение и направить его заявителю (п.6.4).

Заявитель в силу п.8 договора, обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе:

- по выполнении возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п.8.1);

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающей технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была предоставлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем уведомления о выполнении технических условий.

Неотъемлемой частью договора являются технические условия № 3081/23-ВЭС для присоединения к электрическим сетям, предусматривающие мероприятия, которые должны быть выполнены сторонами для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства.

Пунктом 10 технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенные в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК».

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.12 договора).

04 мая 2023 г. истцу выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с квитанциями системы «Город» истец в полном объеме исполнил свои обязательства по договору, оплатив стоимость технологического присоединения в сумме 245 980,36 руб. (15.05.2023 - 36 897,05 руб. и 73 794,11 руб., 08.06.2023 - 86 093,13 руб. и 49 196,07 руб.).

Таким образом, договор № 3081/23-ВЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию, то есть 12.05.2023.

02 мая 2024 г. АО «ИЭСК» направило в адрес ФИО1 письмо, из которого следует, что в связи с необходимостью обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях значительного повышения нагрузки на электрические сети сетевой организации в Иркутском районе подключение к электрической сети энергопринимающих устройств по договору об осуществлении технологического присоединения № 3081/23-ВЭС возможно при условии усиления питающей электрической сети после реализации в полном объеме указанных в п.10.1 технических условий к договору мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей в сроки, определенные инвестиционной программой АО «ИЭСК» на период 2024-2029 гг. Все необходимые меры для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя будут приняты по мере выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

06 сентября 2024 г. ФИО1 направил в адрес АО «ИЭСК» уведомление о выполнении технических условий.

30 сентября 2024 г. АО «ИЭСК» составлен акт осмотра (обследования) электроустановки ФИО1, в пункте 6 которого отражено, что технические мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 3081/23-ВЭС, выполнены заявителем.

Как следует из письма АО «ИЭСК» от 18.12.2024, в связи с предельными нагрузками, зафиксированными в предыдущий зимний период по центру питания ПС Хомутово, в котором запланировано технологическое присоединение по договору № 3081/23-ВЭС от 12.05.2023, АО «ИЭСК» рассматривает альтернативные технические решения, предусматривающие перераспределения нагрузки от других питающих подстанций, что исключит риски снижения качества электроснабжения и аварийных отключений. Для выполнения обязательств по договору (увеличение мощности) сетевой организации необходимо выполнить строительство ВЛ-10 кВ – 0,01 км; ВЛ-0,4 кВ – 0,0095 кв., установка СКТП 63 кВА. Данные мероприятия запланированы сетевой организацией к исполнению до 20.10.2025. После выполнения строительно-монтажных мероприятий сетевая организация может исполнить обязательства по названному выше договору.

О выполнении технических условий ФИО1 уведомил АО «ИЭСК» 06.09.2024, направив в адрес сетевой организации соответствующее уведомление.

Удовлетворяя исковые требования первоначального иска, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в установленный договором срок не исполнены, доказательств наличия обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, не представлено, в связи с чем пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в части возложения обязанности на ответчика исполнить технические условия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, установив срок исполнения обязательств в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Признав права истца, как потребителя услуги, нарушенными суд первой инстанции удовлетворил производные исковые требования, взыскав с ответчика в пользу истца неустойку, предусмотренную п.17 заключенного между сторонами договора в размере 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки, составившую за период с 13.05.2024 по 24.06.2025 250 899,97 руб. (245 980,36 руб. * 0,25% * 408 дней), не найдя оснований для применения к заявленному требованию ст.333 ГК РФ, компенсацию морального вреда в соответствии со ст.15 Закона о защите прав потребителей в размере 3 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 126 949,99 руб. в силу п.6 ст.13 ранее названного закона, в соответствии со ст.330 ГК РФ денежную сумму, на случай неисполнения указанного судебного акта в размере 300 руб. за каждый день неисполнения решения суда по истечению месяца с даты вступления решения суда в законную силу.

Также в соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика взысканы расходы по уплате государственной пошлины в муниципальный бюджет г.Иркутска в размере 11 257 руб.

Разрешая требования встречного искового заявления суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения, поскольку истец свои обязанности исполнил надлежащим образом, вместе с тем обязательства сетевой организации до настоящего времени не выполнены, при этом не возможность их исполнения не обусловлена отсутствием действий со стороны заявителя.

Выводы суда подробно мотивированы, основаны на нормах действующего законодательства, подтверждены относимыми и допустимыми доказательствами, доводами апелляционной жалобы под сомнение поставлены быть не могут.

Доводы апелляционной жалобы о том, что несвоевременное исполнение сетевой организаций условий договора вызвано уважительными причинами, связанными с увеличением объема запрашиваемой мощности и стремительно растущей нагрузкой на электрические сети, признаются судебной коллегией несостоятельными, так как указанные обстоятельства входили в предмет оценки сетевой организацией перспектив исполнения договора осуществления технологического присоединения на этапе разработки технических условий и составления проекта типового договора, до его подписания заявителем, путем установления всех обстоятельств осуществления технологического присоединения и в случае существования каких либо сложно-устранимых затруднений исполнения договора со стороны ответчика должны были быть включены в перечень технических условий и учтены при определении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Отклоняются судебной коллегией и доводы апелляционной жалобы о неправомерном отказе в удовлетворении встречных требований учитывая, что несвоевременное исполнение заявителем своей обязанности по выполнению технических условий не явилось причиной ненадлежащего исполнения сетевой организацией, являющейся профессиональным участником настоящих правоотношений, своих обязательств по технологическому присоединению, и не повлекло для АО «ИЭСК» неблагоприятных последствий, побуждающих к их компенсации.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого решения в пределах доводов апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст.ст.328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского районного суда г.Иркутска от 24 июня 2025 г. по данному гражданскому делу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Судья-председательствующий И.В.Скубиева

Судьи В.О.Шабалина

С.А.Кулакова

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 28.01.2026.