УИД 04RS0010-01-2024-001488-80

Дело № 2-1145/2024

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

с. Иволгинск 19 августа 2024 г.

Иволгинский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Харимаевой Н.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кустовой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Сибирь к Пак Р.С-Н. о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «РоссетиСибирь», обращаясь в суд к Пак Р.С.-Н., просит взыскать с ответчика задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ. № в размере 325781,86 руб., неустойку в размере 103480,66 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 7493 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что между ПАО «РоссетиСибирь» и Пак Р.С.-Н. заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ. № об осуществлении технологического присоединения, согласно которому истец принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а ответчик обязуется выполнить технические условия к договору и оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Размер платы за технологическое присоединение составляет 378321,70 руб., которые ответчик не оплатил. В нарушение условий договора ответчик свои обязанности не исполнил, сетевую организацию о выполнении им технических условий в согласованный срок по договору не уведомлял, с просьбой о продлении срока не обращался. Заключенный договор был исполнен ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ. Подпунктом «в» пункта 16 Правил осуществления технологического присоединения, установленных Постановлением Правительства РФ № 816 предусматривает, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном данным абзацем порядок за год просрочки. Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий в части оплаты составил 103480,66 руб. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без внимания.

В судебное заседание представитель истца ПАО «РоссетиСибирь» по доверенности ФИО1 в судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в его отсутствие, о чем направил в суд заявление, исковые требования поддерживает в полом объеме, просит их удовлетворить.

Ответчик Пак Р.С.-Н. надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Суд в соответствии со ст. ст. 167, 233 ГПК РФ рассмотрел дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст.309,310ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. п. 1, 2 ст.401ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно положениям ст.450ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Пак Р.С.-Н. является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. между ПАО «Россети Сибирь» и Пак Р.С.-Н. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТП 160 КВА для электроснабжения агрологистического комплекса, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВт;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Пак Р.С.-Н. обязался оплатить расходы на технологическое присоединение, необходимые для электроснабжения объекта.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 5 договора, составляет 1 год со дня заключения договора.

В соответствии с разделом 2 договора ПАО «Россети Сибирь» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по данному договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Кроме того, в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку их выполнения, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора; а также не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Ответчик Пак Р.С.-Н. в свою очередь, обязался надлежащим образом исполнить обязательства по заключенному договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участков, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханизме и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию и направления в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора; получить разрешение уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации, надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которой применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Технические условия являлись неотъемлемой частью договора, срок их действия составлял 3 года со дня заключения договора.

Согласно п. 10 размер платы за технологическое присоединение составляет 378821,70 руб.

Пунктом 11 договора, определен порядок внесения платы за технологическое присоединение:

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 37832,17 руб. вносятся в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 113496,51 руб. вносятся в течение 60 календарных дней с даты заключения договора;

- 20% платы за технологическое присоединение в размере 75664,34 руб. вносятся в течение180 календарных дней с даты заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 113496,51 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 37832,17 руб. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Обязательства ПАО «Россети Сибирь» исполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №. 

ДД.ММ.ГГГГ. истцом Пак Р.С.-Н. почтовой связью было направлено уведомление об обязанности оплаты задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения претензии. Однако данное требование оставлено ответчиком без удовлетворения.

Согласно ст.307ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п.1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в Кодексе (п.2).

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (п.3).

Статьей425ГК РФ предусмотрено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Представленный расчет суд находит исчисленным верно. Вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ доказательств, опровергающих обоснованность исковых требований истца, произведенные расчеты, суду не представлено.

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что требование о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предъявлено законно и обоснованно, следовательно, подлежат удовлетворению исковые требования о взыскании с ответчика Пак Р.С.-Н. денежных средств в размере 325781,86 руб. в пользу истца.

Кроме того, пунктом 17 Договора предусмотрена ответственность за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, и обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Доказательств оплаты по договору материалы дела не содержат. Соответственно, довод истца о взыскании с ответчика неустойки суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Таким образом, учитывая установленные по делу обстоятельства, суд удовлетворяет исковые требования ПАО «Россети Сибирь» в полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ взысканию с ответчика подлежит государственная пошлина в пользу истца в сумме 7493 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ПАО «РоссетиСибирь» удовлетворить.

Взыскать с Пак Р.С-Н. (паспорт РФ: №) в пользу ПАО «РоссетиСибирь» (ИНН 

<

***>) задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 325781,86 руб., неустойку в размере 103480,66 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 7493 руб., всего 436755,52 руб.

Ответчик вправе подать в Иволгинский районный суд РБ заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.Б.Харимаева

Заочное решение в окончательной форме изготовлено 26 августа 2024 г.