УИД 63RS0027-01-2025-002257-69

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 января 2026 года г. Тольятти

Ставропольский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Лазаревой Н.В.,

с участием представителя истца ФИО1 - ФИО2,

представителя ответчика - ООО СВГК ФИО3 по доверенности,

при секретаре Евлентьевой И.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-193/2026 по исковому заявлению ФИО1 к ООО "СВГК" о защите прав потребителей, по встречному иску ООО "СВГК" к ФИО1 о расторжении договора,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Ставропольский районный суд Самарской области с исковым заявлением к ООО «СВГК» о защите прав потребителей, в котором, с учетом уточненных исковых требований, просит обязать ответчика исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно осуществить (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, в домовладении по адресу: 

<

адрес> сети газораспределения, принадлежащей ООО «СВГК» и выполнить фактическое подключение (присоединение) указанного домовладения (газораспределительной сети в границах земельного участка и газоиспользующего оборудования) при условии выполнения истцом своих обязательств установленных договором от ДД.ММ.ГГГГ года в срок 90 дней с момента вступления в силу решения суда. В случае нарушения ООО «СВГК» установленного судом срока исполнения обязательств по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. взыскать с ООО «СВГК» в пользу ФИО1 за каждый день просрочки 1000 рублей. Взыскать с ООО «СВГК» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда 100000 рублей, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

В обоснование заявленных требований указано, что между ФИО1 и ООО «СВГК» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №УРТ031859 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно пункта 1 указанного договора Ответчик принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю (Истцу), намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, на связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г, №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»), расположенного по адресу: ФИО6, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункта 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляют 270 дней со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункта 1 дополнительного соглашения № к договору срок, указанный в пункте 3 договора, составляет 1 год 4 месяца с момента заключения договора.

Таким образом, срок исполнения ответчиком своих обязательств по заключенному с истцом договору истек в ДД.ММ.ГГГГ. Свои обязательства по договору ответчик не исполнил. В ответах от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ответчик отказывается от исполнения принятых на себя по договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ обязательств, так как земельный участок, на котором располагается принадлежащий истцу объект капитального строительства (домовладение) не входит в границы газифицированного населенного пункта. Вместе с тем, указанное обстоятельство не делает исполнение обязательства по указанному договору невозможным и не освобождает ответчика от его исполнения.

Представителем ответчика ООО «СВГК» ФИО3 в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство о принятии встречного искового заявления, которое мотивировано тем, что при осуществлении деятельности, связанной с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства ООО «СВГК» руководствуется требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов органов власти, утвержденных в установленном порядке, в том числе Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021г.

Согласно п. 2 Правил подключения - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа или программой газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта.

В соответствии с требованиями Правил подключения, учитывая, что в адресе заявителя сведений о нахождении домовладения в населенном пункте между ООО «Средневолжская газовая компания» и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. заключен Договор № №догазификация о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а именно жилого дома по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ. исх. № Главе сельского поселения Подстепки направлено о предоставлении информации о нахождений домовладений 

<

данные изъяты>» в границах населенного пункта, в т.ч. домовладения: по адресу - 

<

адрес>, 

<

адрес>) получен ответ о нахождении указанных в запросе домовладений (в т.ч. домовладения по адресу - 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ. (исх. № в адрес ФИО1 направлено предложение о расторжении договора №/догазификация от ДД.ММ.ГГГГ. или заключения дополнительного соглашения, устанавливающее оплату услуг по подключению в связи с нахождением домовладения вне границ населенного пункта.

ДД.ММ.ГГГГ. данное предложение было направлено повторно.

Согласно пп «п» п. 52 Правил подключения - размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на момент заключения договора. Согласия о заключении дополнительного соглашения в ООО «СВГК» не поступало. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. В связи с чем, ответчик просит расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения и взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СВГК» судебные расходы по плате государственной пошлины за подачу искового заявления в суд в размере 20 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца (ответчика по встречному иску) ФИО1 – ФИО2 уточнённые исковые требования поддержал, просил удовлетворить по основаниям изложенным в исковом заявлении. Возражал против заявленных встречных исковых требований, считает, что встречные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, принадлежащий истцу, назначение земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения, адрес

<

адрес>. Дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ. Как следует из писем ответчика от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ истец предоставлял ответчику правоустанавливающие документы на принадлежащие истцу объекты недвижимости, в том числе на земельный участок.

Ответчик встречные исковые требования основывает на положениях п.1, 2 статьи 451 ГК РФ, в соответствии с которыми договор может быть расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств из которых стороны исходили при заключении договора. По мнению ответчика в процессе исполнения спорного договора, однако, как указано выше, то обстоятельство, что принадлежащий истцу земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и не входит в земли населенных пунктов, имело быть место на момент заключения спорного договора. Данное обстоятельство было известно ответчику (могло быть известно), так как указанные сведения содержит Публичная Кадастровая Карта и официально размещены в сети Интернет в открытом доступе на портале Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/map). Истец, ФИО1, при заключении договора действовал добросовестно, предоставив ответчику всю необходимую и достоверную информацию о земельном участке и домовладении. Таким образом, отсутствует правовое основание для расторжения спорного договора, так как существенного изменения обстоятельств из которых исходили стороны при заключении договора и на которое ссылается ответчик не происходило.

Представитель ответчика (истца по встречному иску) ФИО3, в судебном заседании возражал против заявленных требований, просил отказать, указав, что в соответствии с условиями данного договора о подключении, распределение основных обязанностей между сторонами строится следующим образом.

Исполнитель (ООО «СВГК») обязуется создать (построить) сеть газораспределения, необходимую для подключения объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения), определённой в Технических условиях (пункты 4 Договора о подключении).

В свою очередь, истец как заявитель обязан: за свой счет создать (построить) сеть газопотребления, с подключенным газоиспользующем оборудованием, обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (в том числе решение вопросов вентиляции и дымоудаления), уведомить исполнителя о выполнении технических условий, обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 15 рабочих дней до дня подключения.

Срок выполнения мероприятий по подключению согласно п. 3 договора составляет 1 год 4 месяца со дня заключения т.е. до 12.01.2024г.

Садоводческое товарищество ТСН «СНТ Приморское» препятствует подключению, в настоящее время Автозаводским районным судом г. Тольятти Самарской области рассматривается гражданское дело по иску ООО «СВГК» к ТСН «СНТ Приморское» об обязании не чинить препятствий в подключении заявителей.

В соответствии с условиями Договора о подключении, фактическое присоединение осуществляется только после окончания выполнения сторонами в соответствии с техническими условиями мероприятий по созданию сетей (сети газораспределения и сети газопотребления) и подтверждению (в т.ч. документальному) их готовности. В срок до настоящего времени от Заявителя (истца) уведомления о выполнении технических условий в ООО «СВГК» не поступало. Также в соответствии с п. 56 Правила подключения заявителем обращения о продлении срока договора не поступало. Иной срок подключения сторонами не определен.

В соответствии с условиями Договора о подключении, фактическое присоединение осуществляется только после окончания выполнения сторонами в соответствии с техническими условиями мероприятий по созданию сетей (сети газораспределения и сети газопотребления) и подтверждению (в т.ч. документальному) их готовности (п.п. 4 Договора о подключении, технических условий, п. 3 Правил подключения (технологического присоединения).

Также в соответствии с условиями договора для осуществления газоснабжения на постоянной основе заявителю как потребителю необходимо заключить ряд договоров. В частности, договор поставки газа с организацией-поставщиком газа, в данном случае ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» в порядке, предусмотренным Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства от 21.07.2008г. № 549. Также необходимо заключить договор о техническом Обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, поскольку данный договор является одним из необходимых для заключения договора поставки газа документов, предусмотренных вышеназванными правилами поставки газа, а именно, пп. «к» п.9 Постановления Правительства от 21.07.2008г. № 549. В случае невыполнения указанных действий, ООО «СВГК» не сможет реализовать свои обязательства по договору.

Исходя из ст. 11 ГК РФ и ст. 3 ГПК РФ, удовлетворение исковых требований должно повлечь восстановление прав истца. Однако удовлетворение требований об обязании осуществить подключение по договору о подключении не повлечет восстановление его прав, поскольку таковые нарушены не были (сеть газопотребления не была построена, объект не готов, право на подключение (присоединение) в установленном порядке у истца не возникло). Права и обязанности по заключенному Договору о подключении носят корреспондирующий характер, исполнение договора заканчивается фактическим присоединением и составлением акта о подключении (технологическом присоединении), однако указанное действие возможно лишь после выполнения определенных мероприятий как со стороны заявителя (Истца) так и со стороны ответчика (ООО «СВГК»).

Порождаемые договором обязательства носят встречный характер. В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. При этом, ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе Требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (п.3 ст. 328 ГК РФ).

Таким образом исполнить договор в настоящее время, а именно осуществить подключения домовладения заявителя (произвести врезку и пуск газа в домовладение ФИО1) не представляется возможным в связи с неисполнением истцом встречных обязательств, отсутствием сведений о готовности объекта капитального строительства к подключению, заключенных договорах на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и договора поставки газа, препятствием со стороны СНТ «Приморское».

Как указано ранее, при неисполнении встречных обязательств истцом, а также препятствие со стороны третьего лица, осуществление технологического присоединения объекта капитального строительства истца к сети газораспределения является фактически неисполнимым. Таким образом, взыскание неустойки за каждый день неисполнения договора со стороны ООО «СВГК» при отсутствии возможности его исполнения вследствие неисполнение требований со стороны заявителя. А также действий третьих лиц влечёт существенное нарушение прав и законных интересов ООО «СВГК».

ООО «СВГК» действовало в соответствии с положениями законодательства РФ, в связи, с чем действия ответчика являются правомерными.

Встречные исковые требования представитель подержал, просил удовлетворить, по основаниям изложенным в иске.

Представитель третьего лица - Администрации с.п. Подстепки в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, просил рассмотреть без их участия.

Представитель третьего - лица СНТ «Приморское» в судебное заседание не явился, о слушании дела извещался надлежащим образом.

Суд, выслушав стороны, изучив письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии с положениями ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на все стороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым.

В силу ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1, 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств. К таким обязательствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 (Правила №1547).

Согласно п. 2 Правил № 1547 "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В силу п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Согласно п. 126 Правил №1547 в случае, если садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество располагается в границах населенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений, расположенных внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляется исполнителем до границ такого товарищества без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению) при условии возможности строительства сети газораспределения и (или) сети газопотребления внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и земельного законодательства.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, принадлежащий ФИО1 назначение земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения, адрес: 

<

адрес> Дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «СВГК» заключен договор № подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно пункта 1 указанного договора ООО «СВГК» приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г, №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»), расположенного по адресу: 

<

адрес> единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункта 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляют 270 дней со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункта 1 дополнительного соглашения № к договору срок, указанный в пункте 3 договора, составляет 1 год 4 месяца с момента заключения договора.

В обоснование своих доводов встречного иска, представителем ООО «СВГК» указано, что ДД.ММ.ГГГГ. исх. № Главе сельского поселения Подстепки направлено о предоставлении информации о нахождений домовладений СНТ «Приморское» в границах населенного пункта, в т.ч. домовладения: по адресу - 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ) получен ответ о нахождении указанных в запросе домовладений (в т.ч. домовладения по адресу - 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 направлено предложение о расторжении договора №догазификация от ДД.ММ.ГГГГ. или заключения дополнительного соглашения, устанавливающее оплату услуг по подключению в связи с нахождением домовладения вне границ населенного пункта.

ДД.ММ.ГГГГ. данное предложение было направлено повторно.

Как следует из ответов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВГК» отказывается от исполнения принятых на себя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ обязательств, так как земельный участок на котором располагается принадлежащий истцу объект капитального строительства (домовладение) не входит в границы газифицированного населенного пункта.

При заключении договора данное обстоятельство было известно ответчику, правоустанавливающие документы предоставлялись стороной истца.

В пункте 42 Правил подключения к сетям газораспределения указано на необходимость получения технических условий.

Согласно пункту 61 Правил подключения к сетям газораспределения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении) (пункт 71 названных Правил).

Согласно п. 72 данных Правил исполнитель обязан: осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил); по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Согласно п. 74 Правил заявитель обязан: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом «б» пункта 72 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации); в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении; заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), уведомив об этом исполнителя.

В пункте 74 Правил подключения к сетям газораспределения определены обязанности заявителя, в том числе по выполнению установленных в договоре о подключении условий подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (подпункт «а»).

В соответствии с условиями Договора о подключении, фактическое присоединение осуществляется только после окончания выполнения сторонами в соответствии с техническими условиями мероприятий по созданию сетей (сети газораспределения и сети газопотребления) и подтверждению (в т.ч. документальному) их готовности (п.п. 4 Договора о подключении, технических условий, п. 3 Правил подключения (технологического присоединения)).

Кроме того, распределение основных обязанностей между сторонами строится следующим образом.

Исполнитель ООО «СВГК» обязуется создать (построить) сеть газораспределения, необходимую для подключения объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения), определённой в Технических условиях (пункт 4 Договора о подключении).

Истец, как заявитель, обязан за свой счет создать (построить) сеть газопотребления, с подключенным газоиспользующим оборудованием, обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (в том числе решение вопросов вентиляции и дымоудаления), уведомить исполнителя о выполнении технических условий, обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 15 рабочих дней до дня подключения.

Также следует отметить, что для осуществления газоснабжения на постоянной основе истцу как потребителю необходимо заключить ряд договоров, в частности, договор поставки газа с организацией-поставщиком газа, в данном случае ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» в порядке, предусмотренным Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства от 21.07.2008г. № 549. Также необходимо заключить договор о техническом Обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, поскольку данный договор является одним из необходимых для заключения договора поставки газа документов, предусмотренных вышеназванными правилами поставки газа, а именно, пп. «к» п.9 Постановления Правительства от 21.07.2008г. № 549. В случае невыполнения указанных действий, ООО «СВГК» не сможет реализовать свои обязательства по договору.

На момент рассмотрения дела от истца сведений о выполнении технических условий в ООО «СВГК» не поступало.

Поскольку в ходе рассмотрения дела ответчик не предоставил достоверные сведения о выполнении своих обязательств по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ., при условии исполнения ФИО1 обязательств установленных договором от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает возможным удовлетворить требования истца ФИО1 в части подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка по адресу: 

<

адрес> сети газораспределения, принадлежащей ООО «СВГК».

Сведения о том, что земельный участок не находится в пределах границ населенного пункта, были предоставлены, однако договор был заключен, указанные представителем истца по встречному иску основания являющиеся существенными и повлекшими изменение обстоятельств необходимые для исполнения договора, суд считает необоснованными и тем самым не находит оснований для удовлетворения встречных исковых требований ООО «СВГК».

При этом суд учитывает и в качестве оснований для удовлетворения встречного иска отсутствие каких-либо доказательств нарушения условий договора со стороны ФИО1.

Иные доводы сторон были предметом подробного судебного исследования, однако не влияют на выводы суда.

В силу положений ч. 1 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

Учитывая принципы разумности и справедливости, конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым установить срок для исполнения обязательства 120 дней с момента вступления решения суда в законную силу. При этом суд учитывает, что при наличии уважительных на то оснований стороны не лишены возможностью воспользоваться положениями ст. 203 ГПК РФ.

Рассматривая требования ФИО1 о взыскании с ответчика ООО «СВГК» судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как указано в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

В силу п. 31 указанного постановления Пленума суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).

Согласно п. 32 указанного постановления Пленума удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В связи с изложенным суд полагает возможным удовлетворить данные требования и в случае неисполнения ответчиком решения суда, взыскать с ООО «СВГК» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно приведенной норме закона, установленный факт нарушения прав потребителя является достаточным условием для удовлетворения требования о компенсации морального вреда.

Поскольку ответчиком допущено нарушение прав истца, выразившееся в неисполнении обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ., в связи чем права истца, как потребителя нарушены, поскольку истец был вправе рассчитывать на своевременное исполнение обязательств со стороны газораспределительной организации, суд в этой связи приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о возмещении морального вреда на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

При этом, исходя из принципа разумности, конкретных обстоятельств дела, несвоевременного осуществления всех необходимых мероприятий по договору со стороны самого истца, несвоевременного осуществления обязательств ответчиком по договору в установленный срок, суд считает, что требования о компенсации морального вреда подлежат удовлетворению в сумме 10 000 рублей.

В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из анализа вышеуказанных норм материального права и правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, с ООО «СВГК» в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в добровольном порядке требований истца, его размер составляет 5 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.

Обязать ООО «СВГК» исполнить договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно осуществить (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения, принадлежащей ООО «СВГК», в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в срок 120 дней с момента вступления решения суда в законную силу, при условии исполнения ФИО1 обязательств установленных договором от ДД.ММ.ГГГГ.

В случае нарушения ООО «СВГК» установленного судом срока исполнения обязательств по № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ООО «СВГК» в пользу ФИО1 за каждый день просрочки в размере 1000 рублей.

Взыскать с ООО «СВГК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт 

<

данные изъяты>) в счет компенсации морального вреда 10 000 рублей.

Взыскать с ООО «СВГК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт 

<

данные изъяты>) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 5000 рублей.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований и в удовлетворении встречных исковых требований ООО "СВГК" к ФИО1 о расторжении договора - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Ставропольский районный суд Самарской области.

Председательствующий

Мотивированное решение изготовлено 15 января 2026 года.