Дело № 2-35/2017

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кумертау 24 января 2017 года

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Сафарова Р.Ф.,

с участием представителя истца Ионова А.В., - Уткина М.Л. (по доверенности от 

<

...>),

при секретаре Фроловой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ионова А.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Акрополь» о возложении обязанности устранить недостатки 

<

...> взыскании денежной компенсации морального вреда в сумме 

<

...>, неустойки в сумме 

<

...>, а также штрафа за нарушение прав потребителя, 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Ионова А.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Акрополь» удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь» в срок не позднее 45 дней со дня вступления в законную силу решения суда устранить недостатки 

<

...> 

<

...>, путем: 1) устройства пароизоляции и утепления торцевой части вентканала в уровне чердака в осях «10/К» в соответствии с проектом; 2) заполнения утеплителем зазоров между плитами утеплителя, установленных по разным плоскостям кухонного вентканала с шириной зазора 10…50 мм в уровне чердака в осях «10-11/К»; 3) замены уплотнителя в температурно-осадочном шве между примыкающими секциями наружных стен в осях «10/К-И» на всю высоту здания, в том числе в уровне парапета на упругий материал; 4) ремонта кирпичной кладки наружной стены в осях «10/К» в узле примыкания секций в уровне подоконной части; 5) расширения входных отверстий вентканалов с выявленным непроектным сечением в кухне, в ванной, между ванной и туалетом до проектной величины; 6) устройства отверстия вентканала между туалетом и ванной в проектном положении; 7) замены оконных конструкций на новые в полном объеме; 8) устройства проектной термовставки из ячеистобетонных блоков по наружной стене в уровне утеплителя перекрытия 5 этажа в соответствии с проектом. При этом разработать проект на страховочное раскрепление несущих конструкций крыши и проект производства работ с разделением работ по захваткам; 9) ремонта отделочных слоев кухни; 10) устройства зонтика над вентканалами для исключения попадания в вентканалы атмосферных осадков.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Акрополь» в пользу Ионова А.В. неустойку за период с 

<

...> по 

<

...> в размере 

<

...>, компенсацию морального вреда в размере 

<

...>, штраф в размере 

<

...>, - на общую сумму 

<

...>.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации морального вреда отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Акрополь» в доход бюджета городского округа город Кумертау РБ государственную пошлину в сумме 

<

...>.

Настоящее решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Кумертауский межрайонный суд РБ в течение месяца со дня составления в окончательной форме. 

Председательствующий