Дело № 2-148/2020

РЕШЕНИЕ

 СУДА

Именем Российской Федерации

16 января 2020 года

Балашихинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Буянтуевой Т.В., 

при секретаре Гумашвили М.З., 

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к АО «Мособлгаз» о взыскании денежных средств по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, излишне уплаченных денежных средств, взыскании денежных средств по договору № г. от ДД.ММ.ГГГГ за невыполненные работы, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услуг представителя,

установил:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, указывая на то, что между сторонами заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение в пределах границ земельного участка истца строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов недвижимого имущества на основании технических условий № К1859. Стоимость работ определена на основании сметного расчета, прилагаемого к договору, и составляет 188 475, 59 руб. с учетом НДС 28 750, 51 руб. Истец внесла в кассу ответчика указанную денежную сумму ДД.ММ.ГГГГ Также между сторонами был заключен договор 24-Р от ДД.ММ.ГГГГ по техническому надзору за строительством объектов газового хозяйства. Стоимость работ составляет 5 923, 89 руб. в том числе НДС 903 руб., что составляет 5% от сметной стоимости прокладки газопровода. Однако ответчик в одностороннем порядке изменил стоимость работ без письменного оформления и определил новую стоимость работ в размере 5% от общей стоимости сметного расчета, что составило 9 423, 78 руб., которые истец оплатила на основании платежного документа путем внесения денежных средств в кассу ответчика. Кроме того, ответчик к выполнению работ по договору №-Р не приступал, в ответ на письменное обращение истца отказался от проведения технического надзора. В связи с чем истец отказывается от исполнения договора №-Р, требуя возврата оплаченных денежных средств по договору. Далее истец указывает, что по договору № г. от ДД.ММ.ГГГГ ответчик отказался оформить и предоставить истцу исполнительно-техническую документацию, которая входит в состав выполнения работ, отказался выполнить требование истца по возврату денежных средств, оплаченных истцом за работы, не оговоренные сторонами и не предусмотренные договором. Ответчик незаконно требует от истца подписания Акта выполненных работ и дополнительного соглашения к договору №. Также истец требует вернуть ответчика денежные средства, которые она оплатила по договору № г. за работы, которые были выполнены ответчиком и оплачены истцом в рамках договора № от 2015 г. (выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода от границы земельного участка истца до цокольного ввода первого строения. Эти обстоятельства установлены решениями судов). В связи с чем, на основании Закона РФ «О защите прав потребителей», истец просит взыскать с ответчика денежные средства по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 423, 78 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 53 123, 47 руб., 3 434, 80 руб., 7 194, 12 руб., а всего 73 176, 17 руб., неустойку по договору № в размере 74 641, 04 руб., штраф, компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 20 000 руб. 

В ходе судебного разбирательства истец уточнил в соответствии со ст. 39 ГПК РФ исковые требования и просил взыскать денежные средства по договору №-Р в размере 5 923, 80 руб., что составляет стоимость работ по договору, от исполнения которого истец отказался, излишне уплаченные денежные средства в сумме 3 499, 98 руб. - разница между стоимостью работ по договору и фактически произведенной оплатой, по договору № г. просит взыскать денежные средства за невыполненные работы: по строительству газопровода-ввода в размере 53 123, 47 руб., затраты на производство работ в зимнее время 3 434, 80 руб., за уменьшение сметной заработной платы на 50% 14 388, 24 руб., за отсутствие подъема давления, выдержки под давлением и пневматические испытания 33 258, 71 руб., уменьшение стоимости работ за нарушение качества выполненных работ на 20% 37 695, 11 руб., неустойку по договору № в размере 74 641, 04 руб. за 365 дней просрочки, убытки в размере 70 000 руб., включая 10 000 руб. за выполнение земляных работ, компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 20 000 руб., штраф за отказ выполнения требований истца в добровольном порядке. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 иск не признала, представила письменные возражения на иск, пояснив, что ответчиком выполнены все условия и обязательства по договорам, истец отказывается принять работы и подписать Акт приемки выполненных работ, отказался подписать Дополнительное соглашение. 

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

Спорные правоотношения сторон регулируются, в том числе и законодательством о защите прав потребителей. 

В силу ст. 420, ст. 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

В силу п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

Согласно п. 3 ст. 426 ГК РФ отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие услуги не допускается. 

В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства по договору не допускается. 

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков работы немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

В силу ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда. 

Согласно ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок, должна предоставить соответствующую документацию. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные технической документацией работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п. 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по независящим от него причинам. 

В соответствии со ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком. 

В силу ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное (ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Потребителем газа в соответствии со ст. 2 Федерального закона “О газоснабжении в Российской Федерации” признается лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд. 

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона. 

Согласно ч. 8 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка. 

В соответствии с ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Такой порядок установлен Правилами N 1314, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подключения (Технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», действующими с 01.03.2014 г. 

Согласно п. 1 Правил N 1314 под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения, Заявителем при этом является юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения. Под исполнителем понимается газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

В соответствии с п. 59 Правил N 1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о Подключении. 

Согласно п. 60 Правил N 1314 по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому Присоединению). 

Согласно пункту 62 Правил договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Для заключения договора о Подключении заявитель направляет заявку о Подключении (технологическом присоединении) в газораспределительную организацию, которая ранее выдала технические условия (исполнителю) (пункт 63 Правил). 

Согласно п. 83 Правил N 1314 договор о подключении должен содержать перечисленные существенные условия, в том числе размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения. 

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ “О газоснабжении в Российской Федерации” плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям подлежит государственному регулированию. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные ступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Решением Балашихинского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, в иске ФИО3 к АО «Мособлгаз» о признании условий договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ГУП МО «Мособлгаз» и ФИО3, недействительными, взыскании денежных средств, оплаченных за проектирование, в размере 30 481 руб. 74 коп., за монтаж газопровода в размере 188 475 руб. 59 коп., за ведение технического надзора в размере 9 423 руб. 78 коп., за технологическое присоединение в размере 19 691 руб. 84 коп., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., штрафа, расходов по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб. отказано.

Решением суда установлено, что истице ФИО3 на праве собственности принадлежит земельный участок, площадью 1 203 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Также ФИО3 является собственником жилого дома, площадью 56 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ представитель истца ФИО3 по доверенности ФИО1 подала в адрес АО «Мособлгаз» заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, в которой просила заключить с ФИО3 договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения - жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП МО «Мособлгаз», именуемым исполнитель, и ФИО3, именуемой заявитель, заключен договор № К1859-12/17-ТП/С8 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, по настоящему договору исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению объекта капитального строительства — жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходам газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 50:15:0080103:236, по адресу: 

<

адрес>, уч. с кадастровым номером 50:15:0080103:236, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). Срок действия технологических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения настоящего договора. Под точкой подключения (технологического присоединения) в настоящем договоре понимается место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства. Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2016 года Na 249-р, с учетом предварительного расчета размера платы, согласно ъприложению Na 6, являющегося неотьемлемой частью настоящего договора, и составляет 39 383 руб. 68 коп.

ДД.ММ.ГГГГ 18 года между АО «Мособлгаз», именуемым исполнитель, и ФИО3, именуемой заказчик, заключен договор №-P по техническому надзору за строительством объектов газового хозяйства, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство ведения технического надзора за строительством газопровода жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, участок с кадастровым номером №, согласно проекту № К1859, разработанному АО «Мособлгаз» Балашихамежрайгаз.

ФИО3 произвела оплату по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по техническому надзору за строительством объектов газового хозяйства на сумму 9 423 руб. 78 коп.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мособлгаз», именуемым подрядчик, и ФИО3, именуемой заказчик, заключен договор № на выполнение в пределах границ земельного участка заявителя строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить собственными силами и (или) привлеченными силами и средствами в пределах границ земельного участка заказчика строительно-монтажные работы по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов недвижимого имущества, на основании технических условий № К1859, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, участок с кадастровым номером №. Работы включают в себя: строительно-монтажные работы по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов; составление и передачу заказчику экземпляра исполнительно-технической документации. Стоимость работ определяется на основании сметного расчета (Приложение № к договору) и составляет 188 475 руб. 59 коп., в том числе НДС 18 % 28 750 руб. 51 коп. (п. 3.1 договора). 

Истица ФИО3 произвела оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение в пределах границ земельного участка заявителя строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов на сумму 188 475 руб. 59 коп. 

Согласно письму АО «Мособлгаз» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ были выполнены сварочно-монтажные работы по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов, по адресу: 

<

адрес>. Оплата за указанные работы была произведена ДД.ММ.ГГГГ в кассе Филиала, в сумме 188 457 руб. 59 коп. Однако не были подписаны акты о приемке выполненных работ. Также в связи с изменением объемов работ по договору на выполнение в пределах границ земельного участка заявителя строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода и внутренних газопроводов, Филиалом подготовлено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении стоимости работ по настоящему договору, в размере 152 878 руб. 92 коп. В связи с вышеизложенным, направляет подписанный со стороны Филиала акт о приемке выполненных работ и дополнительное соглашение № на выполнение в пределах границ земельного участка заявителя строительно-монтажных работ по строительству газопровода-ввода и внутренних газопровода-ввода от ДД.ММ.ГГГГ. Просили ФИО3 подписать акт и дополнительное соглашение.

Стороной ответчика АО «Мособлгаз» представлена рабочая документация на часть проекта газоснабжения, по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подала в адрес АО «Мособлгаз» заявление, согласно которому просила сделать перерасчет сумм, внесенных ею в кассу филиала «Балашихамежрайгаз» по всем видам работ и услуг, оказанных ей при строительстве газопровода в пределах границ её земельного участка, возвратить ей излишне уплаченную сумму.

Согласно Письму АО «Мособлгаз» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО3 следует, что Филиалом в адрес ФИО3 было направлено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № об изменении стоимости работ, которая составляет 152 878 руб. 92 коп. После подписания дополнительного соглашения Филиалом будет произведен перерасчет, на основании договора и соглашений к нему, излишне оплаченные денежных средства будут возвращены. Технический надзор будет осуществлен после предоставления ФИО3 комплекта документов для принятия объекта законченного строительства. Акты по форме КС-2 и КС-З будут направлены в адрес ФИО3 после подписания дополнительного соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подала в адрес АО «Мособлгаз» заявление, согласно которому просила устранить недостатки. Повторно предоставила срок для устранения выявленных недостатков в течение 30 календарных дней с момента подачи данного заявления. 

Согласно письму АО «Мособлгаз» от ДД.ММ.ГГГГ на заявления ФИО3 следует, что в п. 1 договора от ДД.ММ.ГГГГ № К1859-12/17-ТП/С8, заключенного между Филиалом и ФИО3, указан кадастровый номер земельного участка, а не дома, поэтому необходимости внесения изменений в договор не требуется. Изменения в проектную и сметную документацию внесены. Филиалом составлено дополнительное соглашение о внесении изменений в технические условия к договору о подключении. Для подписания документов ФИО3 необходимо явиться в Филиал.

ГУП МО «Мособлгаз» ДД.ММ.ГГГГ прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в АО «Мособлгаз», которое является правопреемником прав и обязанностей. 

Вышеуказанные обстоятельства установлены решением суда. 

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд выводу о том, что исковые требования ФИО3 о взыскании денежных средств по договору №-Р в размере 5 923, 80 руб., излишне уплаченных денежных средств в сумме 3 499, 98 руб., по договору № г. денежных средств за невыполненные работы: по строительству газопровода-ввода в размере 53 123, 47 руб., затраты на производство работ в зимнее время 3 434, 80 руб., за уменьшение сметной заработной платы на 50% 14 388, 24 руб., за отсутствие подъема давления, выдержки под давлением и пневматические испытания 33 258, 71 руб., уменьшение стоимости работ за нарушение качества выполненных работ на 20% 37 695, 11 руб., необоснованны и не подлежат удовлетворению, т.к. истицей в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств нарушения ответчиком условий договора №-Р от ДД.ММ.ГГГГ и договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ФИО3 и АО «Мособлгаз».

Как установлено вышеназванным решением суда истица ФИО3 уклонялась от приемки выполненных работ, от подписания Акта выполненных работ и дополнительного соглашения. 

Кроме того, согласно представленному ответчиком Акту приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ работы ответчиком выполнены ДД.ММ.ГГГГ, Акт направлен истице для подписания ДД.ММ.ГГГГ, получен ею ДД.ММ.ГГГГ, однако ответчику не возвращен. 

Решением приемочной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, в том числе прошли испытания на прочность и герметичность газопровода.

Также суд соглашается с возражениями ответчика о том, что излишне уплаченная истицей денежная сумма в размере 3 499, 80 руб. по договору №-Р таковой не является, т.к. согласно условиям договора стоимость работ составляет 5% от сметной стоимости прокладки газопровода, что соответствует 5% от стоимости работ по прокладке газопровода 188 475, 59 руб., истицей внесена денежная сумма 9 423, 78 руб., составляющая 5%. 

К тому же договоры №-Р от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не были расторгнуты либо признаны судом недействительными, в связи с чем оснований для одностороннего отказа ФИО3 от условий договора № 24-Р не имеется. 

Доказательств, подтверждающих, что указанные договоры заключены с нарушением требований ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», условия договора ущемляют права истца ФИО3, как потребителя, стороной истца ФИО3 суду не представлено. 

Также нет оснований для взыскания убытков в размере 70 000 руб., которые истцом не доказаны. Кроме того, суд критически относится к представленным истицей письменным доказательствам в подтверждение факта несения расходов в сумме 10 000 руб., связанных с земляными работами, поскольку данные доказательства не отвечаю принципам относимости, допустимости и достаточности. 

Поскольку суд пришел к выводу об отказе основных требований, то производные от них требования о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, которые предусмотрены ст. 15 и ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» удовлетворению не подлежат.

В силу ст. 100 ГПК РФ не подлежат взысканию и расходы не услуги представителя в сумме 20 000 руб. 

На основании вышеуказанного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО3 к АО «Мособлгаз» о взыскании денежных средств по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, излишне уплаченных денежных средств, взыскании денежных средств по договору № г. от ДД.ММ.ГГГГ за невыполненные работы, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услуг представителя отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Балашихинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья Буянтуева Т.В. 

Решение принято в окончательной форме 06.04.2020 г. 

Судья Буянтуева Т.В. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>