Дело № 2-4969/2018

Копия

Заочное 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 мая 2018 г. Красноярск 

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Леонтьевой И.В.,

при секретаре Семенищевой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Министерства лесного хозяйства Красноярского края к ООО «Сибресурс» о возложении обязанности выполнить лесовосстановительные мероприятия,

У С Т А Н О В И Л:

Министерства лесного хозяйства Красноярского края обратился в суд с иском к ООО «Сибресурс» о возложении обязанности выполнить лесовосстановительные мероприятия.

Свои требования мотивировал тем, что между министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и ООО «Сибресурс» заключен договор аренды лесных участков от ДД.ММ.ГГГГ №-з.

По договору аренды Арендодатель обязуется предоставить, а Арендодатель обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 договора аренды.

Схема расположения лесного участка и его характеристика приводятся в Приложениях № и № к договору аренды (пункт 3 договора аренды).

Арендатору передаются лесные участки в целях использования лесов для заготовки древесины сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (пункты 4, 27 договора аренды).

В соответствии с подпунктом «и» пункта 13 договора аренды Арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении №. 

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов (приложение № к договору аренды).

Согласно Таблице 22 проекта освоения лесов (страница 38) к договору аренды определены проектируемые способы и объемы лесовосстановления:

Категория фонда лесовосстановления 

Искусственноелесовосстановление 

Комбинированноелесовосстановление 

Естественноелесовосстановление 

всего 

ИТОГО 

В т.ч.посев 

в т.ч. посадка 

Вырубки 

8,8 

8,8 

1,8 

10,6 

Гари, погибшие насаждения 

1,1 

1.1 

1,1 

Прогалины 

3,3 

3,3 

3,3 

Пустыри 

Лесосекисплошных рубокпредстоящегопериода 

42,5 

42,5 

87,5 

130 

Итого: 

55,7 

55,7 

89,3 

145,0 

В таблице указаны среднегодовые объемы лесовосстановления (примечание к таблице 22 проекта освоения лесов к договору аренды).

На сегодняшний день за период 2016 год ООО «Сибресурс» не выполнил лесовосстановительные мероприятия, указанные в Таблице 22 проекта освоения лесов (страница 38) к договору аренды.

В министерство в срок до ДД.ММ.ГГГГ не была представлена от ООО «Сибресурс» информация о лесовосстановительных мероприятиях.

Вместе с тем министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края письмом от ДД.ММ.ГГГГ № мпр/5-9539 предоставило информацию о скорректированном плане 2016 года по договору аренды, согласно которой лесовосстановительные мероприятия 2016 года составляют:

искусственное лесовосстановление - 0 га;

подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 0 га; 

в том числе будущего года - 0 га; 

естественное лесовосстановление - 1,8 га; 

агротехнический уход за лесными культурами - 0 га; 

дополнение лесных культур - 0 га; 

заготовка лесных семян (ель) - 2 кг.

Кроме того, министерство лесного хозяйства Красноярского края письмом от ДД.ММ.ГГГГ № млх/2-3416 предоставило ООО «Сибресурс» информацию о скорректированном плане 2017 года по договору аренды, согласно которой необходимо выполнить лесовосстановительные мероприятия 20 17 года в следующих объемах: 

создание лесных культур - 13,2 га;

подготовка почвы - 26,4 га, 

в том числе будущего года - 13,2 га; 

содействие естественному возобновлению леса - 3,6 га; 

агротехнический уход за лесными культурами - 26 га; 

заготовка лесных семян (ель) - 5 кг.

Просит обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2016 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах: естественное лесовосстановление - 1,8 га. Обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2017 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 13,2 га; подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 26,4 га; в том числе текущего года - 13,2 га, и будущего года - 13,2 га; естественное лесовосстановление (проведение мер СЕВ леса) - 1,8 га; агротехнический уход за лесными культурами - 26 га.. 

В судебном заседании представитель истца Министерства лесного хозяйства Красноярского края в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания гражданского дела извещен судом надлежащим образом, направил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя. Также направил заявление об уточнении исковых требований, просил обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2016 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах: естественное лесовосстановление - 1,8 га. Обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2017 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах:

искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 13,2 га:

подготовка почвы под искусственное лесовосстановление -26,4 га;

в том числе текущего года - 13,2 га, и будущего года - 13,2 га;

естественное лесовосстановление (проведение мер СЕВ леса) - 1,8 га;

агротехнический уход за лесными культурами - 26 га.

Ответчик ООО «Сибресурс» в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания гражданского дела извещен судом надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомил. 

Представитель третьего лица КГБУ «Усольское Лесничество», в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания гражданского дела извещен судом надлежащим образом, направил ходатайство, в котором указал, что необходимо удовлетворить требования истца, просил рассмотреть дело в отсутствии представителя.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, и в силу ст. 233 ГПК РФ вынести заочное решение.

Исследовав представленные суду доказательства, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе судебного заседания было установлено, что между министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и ООО «Сибресурс» заключен договор аренды лесных участков от ДД.ММ.ГГГГ №-з.

По договору аренды Арендодатель обязуется предоставить, а Арендодатель обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 договора аренды.

Схема расположения лесного участка и его характеристика приводятся в Приложениях № и № к договору аренды (пункт 3 договора аренды).

Арендатору передаются лесные участки в целях использования лесов для заготовки древесины сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (пункты 4, 27 договора аренды).

В соответствии с подпунктом «и» пункта 13 договора аренды Арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении №. 

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов (приложение № к договору аренды).

Согласно Таблице 22 проекта освоения лесов (страница 38) к договору аренды определены проектируемые способы и объемы лесовосстановления:

В таблице указаны среднегодовые объемы лесовосстановления (примечание к таблице 22 проекта освоения лесов к договору аренды).

На сегодняшний день за период 2016 год ООО «Сибресурс» не выполнил лесовосстановительные мероприятия, указанные в Таблице 22 проекта освоения лесов (страница 38) к договору аренды.

В министерство в срок до ДД.ММ.ГГГГ не была представлена от ООО «Сибресурс» информация о лесовосстановительных мероприятиях.

Вместе с тем министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края письмом от ДД.ММ.ГГГГ № мпр/5-9539 предоставило информацию о скорректированном плане 2016 года по договору аренды, согласно которой лесовосстановительные мероприятия 2016 года составляют:

искусственное лесовосстановление - 0 га;

подготовка почвы под искусственное лесовосстановление - 0 га; 

в том числе будущего года - 0 га; 

естественное лесовосстановление - 1,8 га; 

агротехнический уход за лесными культурами - 0 га; 

дополнение лесных культур - 0 га; 

заготовка лесных семян (ель) - 2 кг.

Кроме того, министерство лесного хозяйства Красноярского края письмом от ДД.ММ.ГГГГ № млх/2-3416 предоставило ООО «Сибресурс» информацию о скорректированном плане 2017 года по договору аренды, согласно которой необходимо выполнить лесовосстановительные мероприятия 20 17 года в следующих объемах: 

создание лесных культур - 13,2 га;

подготовка почвы - 26,4 га, 

в том числе будущего года - 13,2 га; 

содействие естественному возобновлению леса - 3,6 га; 

агротехнический уход за лесными культурами - 26 га; 

заготовка лесных семян (ель) - 5 кг.

Согласно пункту 2 Приказа Минприроды России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил лесовосстановления» (далее - Приказ №) лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (ч.1 ст.62 Лесного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Приказа №).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Приказа № лесовосстановление обеспечивается: на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, - арендаторами этих лесных участков.

Согласно пункту 2 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации, на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.

Согласно ст. 307, 309 ГК РФ, обязательства возникают из договоров и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона.

Согласно пп.1 п.1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец от уплаты государственной пошлины освобожден.

В ходе судебного разбирательства ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об устранении выявленного нарушения, в материалах дела таких доказательств также не имеется. 

Анализируя приведенные выше нормативно-правовые акты, суд приходит к выводу о правомерности требований Министерства лесного хозяйства 

<

адрес> и необходимости возложении на ответчика обязанности выполнить лесовосстановительные мероприятия.

Руководствуясь ст. ст. 194, 233-237 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Министерства лесного хозяйства Красноярского края удовлетворить.

Обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2016 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах: естественное лесовосстановление - 1,8 га. 

Обязать ООО «Сибресурс» до ДД.ММ.ГГГГ выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2017 год по договору аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з в следующих объемах:

искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 13,2 га:

подготовка почвы под искусственное лесовосстановление -26,4 га;

в том числе текущего года - 13,2 га, и будущего года - 13,2 га;

естественное лесовосстановление (проведение мер СЕВ леса) - 1,8 га;

агротехнический уход за лесными культурами - 26 га.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий подпись И.В. Леонтьева

Копия верна

Судья И.В.Леонтьева.