Дело №2-274/2023

УИД 80RS0002-01-2023-000544-62

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

п. Могойтуй 27 июля 2023 года

Могойтуйский районный суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Ситко Т.И.,

при секретаре Минжурдоржиной Б.Т.,

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ФИО1 по доверенности,

истца ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в интересах ФИО2 к ИП ФИО3 о расторжении договора о выполнении работ (оказании услуг), взыскании денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обратилось в суд с указанным исковым заявлением в защиту прав потребителя ФИО2 на основании ее письменного заявления от 05 июня 2023 года обосновав его следующим. 17 октября 2022 года между ФИО2 и ИП ФИО3 заключен договор на поставку и монтаж оборудования №-ЕП. На основании предмета договора Исполнитель и Заказчик заключили настоящий договор на поставку оборудования и комплектующих, выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу оборудования, а также на дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание поставленного оборудования Исполнителем. Заказчик, со своей стороны, обязуется принять и оплатить данное оборудование, а также результат выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором. Согласно пункту 1.1. указанного договора Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика оборудование, согласно прилагаемого расчета стоимости договора, указанного в Приложении № (Спецификации) к настоящему Договору, в частности: 

№ п/п

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1

Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения из алюминиевых панелей на низком типе подъёма (RSD01 (Ширина- 2680, Высота-2500, Притолка- 560мм, Цвет, Привод 800PRO

1 шт.

98 400,00

95 900,00

2

Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения из алюминиевых панелей на низком типе подъёма (RSD01 (Ширина- 2800, Высота-2500, Притолка- 560мм, Цвет-8017 (Шоколад)

1 шт.

87 300,00

85 100,00

4

Выезд бригады

1 шт.

6 000,00

6 000,00

5

Монтаж

1 шт.

7 000,00

14 000,00

Итого:

201 000,00

Срок поставки: 45 рабочих дней с момента оплаты.

Предоплата 80% - 160 800 руб.

В соответствии с пунктом 3.2.Договора оплата стоимости оборудования Заказчиком производится на основании счета выставленного Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением наличных средств в кассу Исполнителя.

18 октября 2022 года денежные средства в размере 160 800 рублей Заказчиком были внесены в кассу Исполнителя, о чем свидетельствует квитанция к приходному кассовому ордеру №1025 от 18.10.2022 года на сумму 160 800 рублей - предоплата 80% по Договору.

Согласно пункту 4.1. срок передачи и сборки конструкции по договору 30 календарных дней. В пункте 4.4. указано, что окончательным сроком поставки и монтажа является дата, определенная в пункте 4.1. Договора.

Срок передачи и сборки конструкции по Договору составлял 30 календарных дней. Поэтому последний день передачи и сборки конструкции по Договору 17 ноября 2022 года. Согласно приложению №1 к договору № 67-ЕП от 17.10.2022 года спецификации к договору №67-ЕП от 17.10.2022 года срок поставки 45 рабочих дней с момента оплаты. 18 октября 2022 года следует считать началом действия срока поставки на основании приходного кассового ордера №1025 от 18.10.2022 года на сумму 160 800 рублей. Окончательный срок действия поставки из 45 рабочих дней с момента оплаты истек 19 декабря 2022 года. Обязательства по Договору на поставку и монтажу оборудования №67-ЕП не выполнены.

Просит обязать ИП ФИО3 расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги) и вернуть уплаченный аванс ФИО2 в размере 160 800 рублей, взыскать с ИП ФИО3 в пользу ФИО2 неустойку в размере 892 440 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ФИО1, истец ФИО2 исковые требования поддержали по основаниям, указанным в исковом заявлении. 

Ответчик ИП ФИО3 не явилась, судом приняты меры по извещению ответчика о времени и месте судебного заседания по известному суду адресу регистрации ответчика, также посредством телефонной связи и электронной почты. Согласно телефонограмме, а также отчету о доставке электронного письма ответчик ФИО3 надлежаще извещена о дате, времени и месте судебного заседания, т.е. о наличии дела в суде ей было известно, каких-либо заявлений, ходатайств от ответчика не поступило, суд расценивает ее действия как злоупотребление своими правами и полагает возможным рассмотреть дело в соответствии со ст. 167 ГПК РФ в отсутствие ответчика.

Выслушав участников процесса, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).

В соответствии с п.1. ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Согласно п.3. ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" указывается, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Таким образом, срок является существенным условием договора.

В силу ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Из материалов дела следует, что 17 октября 2022 года между ИП ФИО3 и ФИО2 заключен договор на поставку и монтаж оборудования №67-ЕП. 

Согласно данному договору ИП ФИО3 обязуется передать в собственность заказчика ФИО2 оборудование, согласно прилагаемого расчета стоимости договора, указанного в Приложении №1 (Спецификации) к Договору (п. 1.1.), соблюдать сроки и порядок проведения вышеперечисленных работ, оговоренных в Приложении №1 (Спецификации) к настоящему Договору (п. 1.2.), выполнять гарантийные обязательства, оговоренные в п.2 настоящего Договора (п. 1.3.), заказчик обязуется принять изделия и работы по их установке в соответствии с Приложением №1 (Спецификации) к настоящему Договору, по окончании монтажа конструкции исполнитель и заказчик подписывают Акт выполненных работ (п.1.4.). 

Цена договора согласовывается Сторонами и указывается в Приложении №1 (Спецификации) к настоящему Договору (п.3.1.), оплата стоимости оборудования Заказчиком производится на основании счета выставленного Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением наличных средств в кассу Исполнителя (п.3.2.), порядок и сроки оплаты по настоящему договору оговариваются в Приложении №1 (Спецификации), цена товара, является окончательной и изменению не подлежит, исполнитель, по согласованию с Заказчиком, оставляет за собой право увеличить общую сумму договора в случае возникновения дополнительных, затрат на оборудование, материалы и монтаж. (п.3.3.).

Срок передачи и сборки конструкции по настоящему договору: 30 календарных дней (п.4.1.), срок поставки и монтажа ограждающих конструкций, подвижных конструкций и автоматики может быть продлен в соответствии с пунктом 1.6 Приложения №2 к настоящему Договору (п.4.2.), срок поставки и монтажа модульных некапитальных и капитальных конструкций может быть продлен в соответствии с пунктом 1.11 Приложения № 3 к настоящему договору (п.4.3.), окончательным сроком поставки и монтажа является дата, определенная в пункте 4.1 настоящего договора (п.4.4).

Согласно приложения 1 к договору №67-ЕП от 17 октября 2022 года (спецификации) стоимость работ итого составляет 210 000 рублей:

№ п/п

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1

Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения из алюминиевых панелей на низком типе подъёма (RSD01 (Ширина- 2680, Высота-2500, Притолка- 560мм, Цвет, Привод 800PRO

1 шт.

98 400,00

95 900,00

2

Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения из алюминиевых панелей на низком типе подъёма (RSD01 (Ширина- 2800, Высота-2500, Притолка- 560мм, Цвет-8017 (Шоколад)

1 шт.

87 300,00

85 100,00

4

Выезд бригады

1 шт.

6 000,00

6 000,00

5

Монтаж

1 шт.

7 000,00

14 000,00

Итого:

201 000,00

Срок поставки 45 рабочих дней с момента оплаты, предоплата составляет 80% - 160 800 рублей. 

Квитанцией к приходному кассовому ордеру №1025 от 18 октября 2022 года подтверждается факт произведенной ФИО2 предоплаты по договору в размере 160 800 рублей. 

Между тем, установлено, что в назначенный срок к исполнению своих обязанностей ответчик не приступил.

22 декабря 2022 года в связи с нарушением сроков выполнения работ ФИО2 обратилась к ответчику с письменной претензией, в которой предложила ИП ФИО3 в срок до 01 января 2023 года возвратить уплаченную денежную сумму в размере 160 800 рублей. 

Однако ответа на данную претензию не последовало.

Истцом заявлены требования о расторжении договора на поставку и монтаж оборудования №67-ЕП от 17 октября 202 года, взыскании с ответчика суммы предварительной оплаты в размере 160 800 рублей. 

Основываясь на фактических обстоятельствах дела, приведенных выше норм права, суд приходит к выводу о правомерности заявленных истцом требований в данной части и считает их подлежащими удовлетворению.

ФИО2 также заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков исполнения договора в размере 892 440 рублей (3% от 160 800 рублей =4 824 рубля за день с 20.10.2022 года по 23.06.2023 год - 185 дней, 4 824 рубля *185 дней=892 440 рублей). 

В силу ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», закреплено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В силу п. 4.1 срок передачи и сборки конструкции был определен сторонами в течение 30 календарных дней, согласно приложению 1 к договору №67-ЕП от 17.10.2022 года (спецификации) срок поставки оборудования 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты в размере 80%, 18 октября 2022 года денежные средства в размере 160 800 рублей внесены истцом в кассу исполнителя, ИП ФИО3 к выполнению работ по договору не приступила, общий размер неустойки в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей следует рассчитывать исходя из установленной договором на поставку и монтаж оборудования суммы (п. 3.1. Договора) в следующем порядке: 201 000 руб. x 3% x 185 дней (заявленный истцом период просрочки с 20 декабря 2022 года по 23 июня 2023 года). Размер неустойки составляет 1 115 550 рублей.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Так как, требования ФИО2 как потребителя, изложенные в претензии добровольно не были удовлетворены ИП ФИО3 с последней в пользу истца с учетом положений ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" подлежит взысканию неустойка в размере 500 000 рублей.

Истцом заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В ст. 151 ГК РФ закреплено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с абз. 2 ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ).

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Пункт 45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» определяет, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку факт противоправного поведения ответчика и нарушения неимущественных прав истца по не поставке и монтажу оборудования подтверждается материалами дела, ответчиком не представлено доказательств опровергающих доводы истца, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Подлежит взысканию с ответчика в пользу истца штраф исходя из следующего.

Согласно преамбуле Закона «О защите прав потребителей» данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 1 Постановления «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17 разъяснил, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Ответчик знал о предъявленных истцом требованиях, с момента получения иска до даты рассмотрения дела в суде прошло достаточно времени, судом установлено, что ответчик не оказал истцу услуги по договору на поставку и монтаж оборудования, ответчик имел возможность добровольно исполнить требования потребителя в полном объеме, чего сделано им не было.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 330 400 руб. (160 800 руб. + 500 000 руб.).

В связи с тем, что истец в соответствии с п.4 ч.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика в силу п.8 ч.1 ст.333.20 Налогового кодекса РФ подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина, исчисленная по правилам п.п.1,3 ч.1 ст.333.19 Налогового кодекса РФ, в размере 9 808 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в интересах ФИО2 к ИП ФИО3 удовлетворить частично.

Расторгнуть договор на поставку и монтаж оборудования №67-ЕП от 17 октября 2022 года заключенный между Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ОГРНИП 

<

данные изъяты>) и ФИО2 (паспорт серии 

<

данные изъяты>). 

Взыскать в пользу ФИО2 (паспорт серии 

<

данные изъяты>) с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП №) уплаченные по договору на поставку и монтаж оборудования №67-ЕП от 17 октября 2022 года денежные средства в размере 160 800 (сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, штраф в размере 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП №) в доход бюджета муниципального района «Могойтуйский район» государственную пошлину в размере 9 808 (девять тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Могойтуйский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 31 июля 2023 года. 

Судья Т.И. Ситко