Дело № 2-2647/2025

УИД 50RS0036-01-2025-001089-26

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

17 марта 2025 года г.Пушкино Московской области

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Овчинниковой А.А., 

при секретаре судебного заседания Иманбаевой М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 

<

данные изъяты> к ИП ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 

<

данные изъяты> обратился в суд с иском к ИП ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа.

Требования мотивированы тем, что 

<

дата> между истцом ФИО2 и ответчиком ИП ФИО1 был заключен договор подряда № №, согласно условиям которого ответчик по заданию истца обязался выполнить работы по строительству каркасного здания на объекте строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно п.3.3 договора подряда № № истец своевременно исполнил свои обязательства по предварительной оплате работ по договору в сроки, установленные договором, и передал аванс ответчику наличными денежными средствами в размере 1 099 700 руб., что подтверждается расписками о получении наличных денежных средств от 

<

дата>. В соответствии с п.2.1 договора подряда № № ответчик в срок до 

<

дата> должен был полностью выполнить свои обязательства по договору и построить каркасное здание на вышеуказанном объекте строительства. Однако до настоящего времени предварительно оплаченные работы по договору не выполнены, акты о приеме-передачи работ в адрес истца не направлялись. Также во время заключения договора подряда № № ответчиком не были представлены приложения № 2, 3, 4 к договору, по договоренности ответчик согласно расписке должен был их предоставить истцу в срок до 

<

дата>, что не было сделано. После неоднократных телефонных переговоров с ответчиком истцу стало известно, что работы в установленные договором сроки не будут выполнены. 

<

дата> истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием об отказе от исполнения договора, возврате денежных средств и об уплате неустойки. Данная претензия была оставлена ответчиком без ответа. В договоре не был указан статус ответчика как индивидуального предпринимателя, но был указан его ИНН. В день заключения договора истец убедился на сайте Федеральной налоговой службы, что ответчик является действующим индивидуальным предпринимателем. Информацию об услугах ответчика по строительству гаражей истец узнал на сайте: 

<

данные изъяты>, а также прочитал отзывы об ответчике в его профиле на сайте 

<

данные изъяты>, в сети интернет ответчик позиционирует себя как компания. На основании этого истец просит суд расторгнуть договор подряда от 

<

дата> № №, взыскать денежные средства, оплаченные по договору подряда, в размере 1 099 700 руб., неустойку в связи с нарушением сроков выполнения работ за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 1 304 622,72 руб., штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы, расходы по оплате государственной пошлины в размере 49 043 руб.

Истец ФИО2 в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, подробно изложенным в исковом заявлении. Дополнительно пояснил, что в день заключения договора подряда ответчик приехал на объект строительства по адресу: 

<

адрес>, и произвел замеры. Фундамент под каркасное здание уже у истца имелся, поэтому ответчику только нужно было собрать каркас. Ответчик начал строительные работы, поставив металлические столбы под каркасное основание, которые не соответствовали оговоренному проекту и эскизу и не удовлетворяли требованиям истца. В связи с этим истец попросил ответчика сделать работы в соответствии с первоначальными условиями договора, на что ответчик согласился. Однако после этого ответчик перестал выходить на связь с истцом, работы по договору подряда в установленный срок не выполнены, денежные средства истцу не возвращены. Пояснил, что на сайте авито имеются отзывы о ФИО1, согласно которым ФИО1 также не исполнил свои обязательства перед другими заказчиками, в Пушкинском городском суде находятся дела по сходим исковым заявлениям. 

Ответчик ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направил, о причинах неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении судебного заседания или о рассмотрении дела в его отсутствие не заявил. Суд в соответствии со ст.233 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.167, 233 ГПК РФ в отсутствие не явившегося в судебное заседание ответчика. 

Выслушав объяснение истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.2 ст.1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно п.1 ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с п.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из положений п.1 ст.330 ГК РФ следует, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п.п.1, 2 ст.410 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п.1 ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Из положений п.п.1, 2, 4 ст.450 ГК РФ следует, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п.п.1, 2, 4 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно п.п.1, 2, 3 ст.451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

В соответствии со ст.452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

В силу п.п.2, 3, 5 ст.453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В случае изменения или расторжения договора в судебном порядке обязательства считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства считаются соответственно измененными или прекращенными. Такая дата определяется судом исходя из существа договора и (или) характера правовых последствий его изменения, но не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения или расторжения договора. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.п.1, 3 ст.703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В силу п.1 ст.704 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Из положений п.п.1, 2 ст.708 ГК РФ следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с п.п.1, 2 ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Согласно п.1 ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу п.п.1, 2 ст.715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст.717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно п.1 ст.720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Из положений п.4 ст.753 ГК РФ следует, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с п.п.1, 4 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Согласно п.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Из положений п.п.1, 4, 6 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» следует, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. 

В силу п.1 ст.31 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Согласно ст.32 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии с п.1 ст.33 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» на выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета.

Из положений ст.37 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» следует, что потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем. Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса.

В соответствии с п.п.1, 12, 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей. При разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 

<

дата> между истцом ФИО2 и ответчиком ФИО1 был заключен договор подряда № № (л.д.7-9).

Согласно п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 договора подряда от 

<

дата> № подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по строительству каркасного здания на объекте строительства: 

<

адрес>, в соответствии с согласованными сторонами сметным расчетом (приложение № 1 к договору), архитектурным решением, конструктивным решением, а заказчик обязуется принимать выполненные подрядчиком работы и обеспечивать их оплату. Объем, содержание и стоимость выполняемых работ указаны в архитектурном решении (приложение № 2 к договору), конструктивном решении (приложение № 3 к договору) и сметном расчете (приложение № 1 к договору). Подрядчик заверяет и гарантирует, что вправе выполнять работы, предусмотренные договором. По завершении работ подрядчик сдает, а заказчик принимает по акту фактически выполненную подрядчиком работу. 

Из положений п.п.2.1, 2.2, 2.3 договора подряда от 

<

дата> № следует, что работы выполняются подрядчиком в следующие сроки: начало выполнения работ – 

<

дата>; окончание выполнения работ – 

<

дата>. По соглашению сторон работы могут быть выполнены подрядчиком досрочно. Срок выполнения работ может быть увеличен по письменному соглашению сторон.

Согласно п.п.3.1, 3.2, 3.3 договора подряда от 

<

дата> № цена договора не меняется, определяется в сметном расчете (приложение № 1 к договору) и составляет сумму в размере 1 358 982 руб. Расчеты между сторонами договора производятся в порядке, согласованном сторонами в приложении № 1. Днем исполнения денежных обязательств по договору является дата оплаты заказчиком подрядчику суммы, согласованной сторонами в приложении № 1. Факт приемо-передачи денежных средств подтверждается распиской о получении от подрядчика.

В соответствии с п.9.7 договора подряда от 

<

дата> № приложениями к договору являются: приложение № 1 – сметный расчет; приложение № 2 – архитектурные решения; приложение № 3 – конструктивное решение; приложение № 4 – график платежей. 

Как следует из приложения № 1 к договору подряда от 

<

дата> №, между истцом и ответчиком был составлен сметный расчет, согласно которому был определен вид работ на объекте строительства, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также определена стоимость работ следующим образом: 528 400 руб. – аванс на заказ сэндвич-панелей в день подписания договора; 349 820 руб. – в день доставки металлокаркаса на объект; 224 880 руб. – в день установки металлокаркаса на объекте; 129 650 руб. – в день доставки ворот; 126 220 руб. – окончательный платеж в день завершения работ (л.д.10).

Из расписки ответчика ФИО1 следует, что приложения № 2, 3, 4 к договору подряда от 

<

дата> № отсутствовали на дату заключения договора и не были переданы истцу. При этом ответчик также обязался предоставить их в срок до 

<

дата> (л.д.11). 

Согласно распискам о получении денежных средств от 

<

дата> ответчик ФИО1 получил от истца ФИО2 наличные денежные средства в размере 1 099 700 руб. во исполнение обязательства по договору подряда от 

<

дата> № (л.д.12-13).

Кроме того, на дату заключения договора подряда от 

<

дата> № ответчик ФИО1 являлся индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, о чем в ЕГРИП была внесена запись от 

<

дата> № (л.д.14-17). 

Следовательно, обязательства по оплате цены договора подряда от 

<

дата> № в соответствии с определенными сторонами условиями истцом были исполнены в полном объеме и в установленные договором сроки. При этом стороной ответчика каких-либо претензий в адрес истца по данному обстоятельству не предъявлено. 

Одновременно с этим ответчик ИП ФИО1 в нарушение принятых на себя обязательств к исполнению договора подряда от 

<

дата> № не приступил, работы, определенные сторонами, не произвел.

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено. Доказательств заключения с истцом дополнительного соглашения по изменению сроков выполнения работ, а равно наличия обстоятельств непреодолимой силы, ответчиком не представлено и в материалах дела не имеется.

<

дата> истец ФИО2 направил в адрес ответчика ИП ФИО1 досудебную претензию, согласно которой истец заявил об отказе от исполнения договора подряда от 

<

дата> № в связи с существенным нарушением условий договора, а также потребовал вернуть денежные средства, оплаченные по договору подряда, в размере 1 099 700 руб. и неустойку в размере 1 304 622,72 руб. При этом ответчику был установлен срок для добровольной оплаты требуемых истцом денежных средств в течение 10 календарных дней с момента получения досудебной претензии (л.д.18-34).

В установленный досудебной претензией срок денежные средства ответчиком ИП ФИО1 выплачены не были. 

Таким образом, доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору подряда от 

<

дата> № ответчиком в порядке ст.56 ГПК РФ не представлено и в материалах дела не имеется.

Оценив в совокупности исследованные доказательства в порядке ст.67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что ответчиком были допущены нарушения своих обязательств по договору подряда от 

<

дата> №, в связи с чем имеются достаточные основания для расторжения данного договора и возврата истцу денежных средств, оплаченных им по договору. 

При разрешении исковых требований истца в части взыскания неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 1 304 622,72 руб. суд принимает во внимание следующее.

Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с абз. 5 преамбулы к названному закону исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

При этом потребитель - это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги), исключительно для семейных, личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнитель - это организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, законодателем сформулировано императивное правило о том, что Закон о защите прав потребителей применяется к сделкам гражданина, в том, числе, не являющимся индивидуальным предпринимателем, но систематически выступающим на потребительском рынке в роли продавца, исполнителя, то есть, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере защиты прав потребителей без необходимой регистрации, то контрагенты такого субъекта должны иметь те же правовые возможности, в том числе, и по применению средств защиты, что потребители в обычных (нормальных) ситуациях. Для констатации факта занятия гражданина предпринимательской деятельностью необходимо доказать систематическое получение им прибыли, например, от выполнения работ, оказания услуг, о чем, может свидетельствовать выполнение работ с помощью привлеченных лиц, осуществлении ранее аналогичных работ на возмездной основе, получение заказчиком сведений о подрядчике из рекламных объявлений об осуществлении данного вида работ и т.п.

Учитывая, что занятие предпринимательской деятельностью предполагает ведение такой деятельности с целью извлечения прибыли на постоянной основе при производстве товаров, строительстве или оказании услуг, то юридически значимым обстоятельством, подлежащим доказыванию по настоящему гражданскому делу, является факт ведения ФИО1 работ с извлечением прибыли неоднократно.

Поскольку ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ответчиком оказываются услуги на постоянной основе, в сети интернет размещены объявления об указании услуг по строительству, в силу чего, несмотря на отсутствие в договоре указания на статус ответчика как индивидуального предпринимателя, основания для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика неустойки, основанных на положениях Закона «О защите прав потребителей», имеются.

В соответствии с п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно п.п.32, 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при рассмотрении требований потребителей о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, необходимо иметь в виду, что: неустойка (пеня) в размере, предусмотренном пунктом 5 статьи 28 Закона, за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) и промежуточных сроков выполнения работы (оказания услуги), а также назначенных потребителем на основании пункта 1 статьи 28 Закона новых сроков, в течение которых исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги), ее этапа и (или) выполнить работу (оказать услугу), ее этап, взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала исполнения работы (оказания услуги), ее этапа либо окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или до предъявления потребителем иных требований, перечисленных в пункте 1 статьи 28 Закона. Если исполнителем были одновременно нарушены установленные сроки начала и окончания работы (оказания услуги), ее этапа, неустойка (пеня) взыскивается за каждое нарушение, однако ее сумма, в отличие от неустойки (пени), установленной статье 23 Закона, не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей цены заказа, если цена отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) не определена договором. Размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте 5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а также в случаях, предусмотренных иными законами или договором, определяется судом исходя из цены товара (выполнения работы, оказания услуги), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на день вынесения решения.

Принимая во внимание вышеуказанные положения и установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства, учитывая представленный стороной истца расчет цены иска, являющийся арифметически верным, суд полагает данные исковые требования законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.

При разрешении исковых требований истца в части взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя суд принимает во внимание следующее.

В соответствии с п.п.5, 6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя 

В силу п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку требования истца ФИО2 о возврате денежных средств, оплаченных им по договору подряда от 

<

дата> №, а также о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору не были исполнены ответчиком ИП ФИО1 в добровольном порядке, суд приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 1 202 161,36 руб. (1 099 700 руб. + 1 304 622,72 руб. х 50 %). 

При таком положении суд полагает, что исковые требования истца о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа подлежат удовлетворению. 

Кроме того, в исковом заявлении истец также ставит вопрос о возмещении судебных расходов в виде расходов по оплате государственной пошлины в размере 49 043,23 руб. 

В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Расходы истца на оплату государственной пошлины в размере 49 043,23 руб. подтверждаются кассовым чеком от 

<

дата> (л.д.38). 

Однако суд не усматривает оснований для взыскания с ответчика в пользу истца государственной пошлины в размере 49 073,23 руб. Исходя из цены иска - 2 404 322, 72 руб., размер государственной пошлины составит 39 043 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО2 

<

данные изъяты> к ИП ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа – удовлетворить. 

Расторгнуть заключенный между ФИО2 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) договор подряда от 

<

дата> №. 

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 

<

данные изъяты> денежные средства, оплаченные по договору подряда от 

<

дата> №, в размере 1 099 700 руб., неустойку в связи с нарушением сроков выполнения работ за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 1 304 622,72 руб., штраф в размере 1 202 161,36 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 39 043 руб. 

Разъяснить ответчику, что он вправе обратиться в Пушкинский городской суд Московской области с заявлением об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчику заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Пушкинский городской суд Московской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Пушкинский городской суд Московской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.А.Овчинникова

Решение изготовлено в окончательной форме 04.04.2025 года.

Судья А.А.Овчинникова