Дело № 2-308/2024

91RS0006-01-2023-002143-16

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 января 2024 года г. Бахчисарай

Бахчисарайский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи Атаманюка Г.С., при секретаре судебного заседания Калиевской С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго", Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго" в лице структурного подразделения Бахчисарайский РЭС, о понуждении к исполнению договора, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась с исковым заявлением о возложении обязанности на Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" (далее – ГУП РК "Крымэнерго") в течение 25 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № от «10» февраля 2020 г., осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение электроустановки расположенной на земельному участке,принадлежащем истцу с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, за границами населенного пункта, лот №, участок №. Исковые требования мотивированы тем, что истец заключила с ответчиком договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроустановки, расположенной на принадлежащей ей земельном участке, по условиям которого сетевая организация в течение 6 месяцев обязана осуществить технологическоеприсоединения энергопринимающих устройств истца с учетом следующих характеристик (изложенных как в договоре, так и в техническихусловиях для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся неотъемлемой частью договора): максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,38 кВ проектируемая ЛЭП 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ; основной источник питания: ПС 35/10 кВ Альма ВЛ-10 кВ Л-10, в том числе: выполнить мероприятия по техническому присоединению: установить ТП-10/0,4 кВ Конструктивные особенности ТП 10/0,4 кВ, тип и мощность силового трансформатора определить проектом, проектируемую ТП-10/0,4 кВ присоединить к электрическим сетям по ЛЭП-10 кВ от оп № ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 35/10 кВ Альма (выполнитьнеобходимое переоборудование опоры с установкой линейного разъединителя с заземляющими ножками) тип, марку, сечение и способ прокладки ЛЭП определить проектом; проложить ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы участка истца, тип, марку, сечение и способ прокладки ЛЭП-0,4 кВ определить проектом; выполнить требования к релейной защите и автоматике, компенсации токов однофазного замыкания в сетях с изолированной нейтралью и др., произвести расчет установок релейной защиты на питающем фидере Л-10 ПС 35/10 кВ Альма, выполнить требования к изоляции, защите от перенапряжения: определить необходимость устройства контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; осуществить проверку выполнения ФИО1 технических условий, провести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств с участием ФИО1; осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, осуществить фактическую подачу напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его истцу. Истец указывает на то, что с её стороны выполнены все условия договора. Однако, ответчик свои обязательства в установленный срок не выполнил, чем нарушены её законные права и интересы. Ссылаясь на нормы ст. 779 ГК РФ, требования Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств, истец просит суд обязать ответчика выполнить принятые на себя обязательства по договору.

Истец и её представитель в судебное заседание не явились, направили суду ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие и о поддержке заявленных исковых требований в полном объёме.

Представитель ответчика в суд не явился, направил суду письменные возражения о частичном признании иска, в которых, не отрицая факта нарушения срока исполнения договора, указывает на невозможность в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить технологическое присоединение, которое требует выполнения значительных подготовительных работ, а поэтому считает возможным выполнение своих обязательств в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме по следующим основаниям.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ГУП РК "Крымэнерго" был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения электроустановки истца к электрическим сетям. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила). 

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией Договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Согласно п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения ВЛЗ-б кВ, КТП, ВА, измерительный комплекс, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик, указанных в договоре, а заявитель обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 4 Договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается не далее 25 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

Согласно п. 5 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 7 Договора сетевая организация обязуется: - надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; - обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; - разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; - составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; - уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 12 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Истец ФИО1 произвела оплату услуг по договору за технологическое присоединение, произвела мероприятия по обеспечению технологического подключения энергоустановки на её земельном участке к электрическим сетям. 

Таким образом, истцом обязательства по Договору выполнены своевременно и в полном объеме. 

Однако, ответчиком не выполнены свои обязательства по технологическому присоединению, чем ущемляются законные права и интересы ФИО1

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть конечным сроком присоединения к электрическим сетям является 10 августа 2020 года.

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований. В соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ГУП РК «Крымэнерго» обязательства по Договору до настоящего времени не исполнены. Данных об обратном суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что восстановление нарушенных прав истца возможно путём удовлетворения исковых требований в части возложения на ответчика обязанности в течение одного месяца со дня вступления в силу данного решения осуществить технологическое присоединение земельного участка ФИО1 к электрическим сетям.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Требования истца в этой части заявлены в соответствии с законом, расходы подтверждены документально, а поэтому подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по Договору от ДД.ММ.ГГГГ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и электроснабжение электроустановки на земельном участке ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, за границами населенного пункта, лот №, участок №. 

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 (триста) рублей 00 копеек. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Бахчисарайский районный суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме принято 24 января 2024 года.

Судья Г.С. Атаманюк