№ 2-1796/2019

25RS0003-01-2019-001080-03

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

17 мая 2019 года г. Владивосток

Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе 

судьи Струковой О.А.,

при участии представителя ответчика ФИО1, 

при секретаре Тимошенко Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Л.В.Л к ООО «Восточный луч» о взыскании неустойки по договору долевого участия в строительстве, 

установил:

Истец обратился в суд с названным иском, в обоснование указав, что между ним и ответчиком 20.02.2018 года заключен договор № 76 долевого участия в строительстве жилого дома № 3, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> в г. Владивостоке. Цена договора составила 3 828 620 рублей. Согласно договору срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства до 30 июня 2018 г. Однако объект долевого строительства передан только 02.10.2018 г. Учитывая, что срок передачи объекта долевого строительства ответчиком просрочен на 94 дня, размер неустойки составил 89 973, 04 рублей. В адрес ответчика 25.10.2018 г. истец обратился к ответчику с претензией, потребовав произвести выплату неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. 29.10.2018 г. получен ответ, которым застройщик отказал в удовлетворении требований. Просит взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 179 946, 08 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50% от взысканной судом суммы.

В судебное заседание истец не явился, посредством телефонограммы просил рассмотреть требования в свое отсутствие.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований, пояснил, что Обществом были предприняты все зависящие от него действия для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. Так строительство дома было окончено в августе 2018 г., а ввод его в эксплуатацию осуществлен 19.09.2018 г., то есть минимальными отступлениями от первоначальных условий договора. При этом следует учитывать, что в качестве причин просрочки выступали многоэтапные административные процедуры, именно необходимость прохождения которых и повлияла на срок фактического ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, а также существенно ограничивающие строительство погодные факторы. Так, при строительстве были выявлены участки полускальных грунтов – песчаников и алевролитов очень низкой прочности, соответствующих по физическим свойствам суглинкам полутвердым с включением дресвы и щебня, а также выявлены подземные воды спорадического распространения, влекущие снижение прочности возводимых конструкций. Указанные обстоятельства повлекли за собой необходимость дополнительных инженерно-геологических изысканий, экспертиз и последующих за этим корректировок проектной документации. Общий срок проведения названных выше мероприятий, явно влияющих на возможность своевременного строительства, составил 7 месяцев и 10 дней. Также в период с 2017-2018 г.г. сезоны тайфунов прямо или косвенно затронули Приморский край. Безусловно, указанные факторы повлияли на осуществление строительства. Данные обстоятельства были доведены до истца в ответе на претензию. Кроме того при расчете неустойки применяется ставка 7, 25%. На основании вышеизложенного, учитывая отсутствие вины в просрочке передачи объекта, просит отказать в удовлетворении требований в полном объеме. В случае удовлетворения требований, снизить размер неустойки, применив положения ст. 333 ГК РФ до 20 000 рублей, а компенсацию морального вреда до 1000 рублей. 

Выслушав доводы представителя ответчика, исследовав материалы дела, давая оценку всем доказательствам в их совокупности, суд пришел к следующему.

Правоотношения, связанные с участием граждан в финансировании долевого участия в строительстве подлежат регулированию общими нормами обязательственного права ГК РФ главы 21-26, специальными нормами - Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". В части взыскания компенсации морального вреда и штрафа применяются положения Федерального Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В силу ч. 1 ст. 6 настоящего Закона застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (ч. 2 ст. 6 Закона)

В случае если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном ГК РФ (ч. 3 ст. 6 Закона)Согласно ч. 1 ст. 12 Закона обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

Из материалов дела следует, что 20.02.2018 между истцом и ООО «Восточный луч» заключен договор № 272 участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного в районе 

<

адрес> в г.Владивостоке. 

Объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира, общей площадью 81, 46 кв.м, этаж 4, строительный номер дома 3, строительный номер квартиры 76. Стоимость договора составляет 3 828 620 руб. 

Пунктом 1.3 договора долевого участия определен срок передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику – 30 июня 2018 года. 

Дольщики внесли полную оплату за квартиру, что не оспаривается ответчиком.

05.04.2018 ООО «Восточный луч» уведомило истца о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию до 31.08.2018 и передачи объекта участнику долевого строительства – до 30.09.2018. Дольщикам было предложено подписать дополнительное соглашение об изменении сроков к Договору. 

Дополнительное соглашение об изменении сроков передачи объекта долевого строительства сторонами не заключалось. На предложение застройщика истец согласия не направлял.

Застройщик нарушил срок сдачи дома в эксплуатацию, обязательство по передаче квартиры дольщику исполнено 02.10.2018 года, что подтверждается актом приема-передачи. 

Судом установлен факт нарушения ответчиком обязательства по своевременной передаче дольщику квартиры, что в соответствии со ст. 330 ГК РФ является основанием для взыскания неустойки в размере, определенном ч.2 ст. 6 ФЗ № 214-ФЗ. 

Истцами заявлен период просрочки исполнения обязательств с 01.07.2018 г. по 02.10.2018 г., что составило 94 дня просрочки.

Проверив представленный в материалы дела расчет неустойки, суд не может принять его как математически верный, поскольку при расчете неустойки должна применяться ставка рефинансирования установленная законом на день исполнения обязательства договором, что составляет 7, 25%.

Таким образом, при расчете неустойки суд применяет ставку рефинансирования, действовавшую на дату исполнения обязательства, установленную условиями договора долевого участия, размер неустойки составил 156 552,27 руб. (3 828 620 р. * 94 д.*7,25%*1/300*2). 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что применение статьи 333 ГК РФ по делам о взыскании неустойки по договорам долевого участия возможно в исключительных случаях, по заявлению застройщика, который должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 34 постановления Пленума от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", п. 73-75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", п. 9 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости") 

Суд не усматривает оснований для снижения неустойки, поскольку она не превышает размера нарушенного обязательства. Не относятся к исключительным обстоятельствам и доводы ответчика о том, что ведению строительных работ препятствовало выявление участков полускальных грунтов, в связи с чем, были неоднократно проведены дополнительные инженерно-геологические изыскания, экспертизы и последующие за этим корректировки проектной документации, что повлекло увеличение объемов строительства; а также неблагоприятные погодные условия; длительность административных процедур по согласованию ввода объекта в эксплуатацию. 

Выявление в процессе строительства полускальных грунтов низкой прочности и подземных вод является финансовым риском застройщика, связано с экономией на подготовительном этапе работ. 

Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения его прав, установлена ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей». Для её взыскания достаточным условием является установленный факт нарушения прав потребителя.

Требование о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению в части. С учетом требований разумности и справедливости суд определил соразмерной компенсацию морального вреда в сумме 1000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

25.10.2018 г. истец обратился в адрес ответчика с претензией, потребовав выплатить неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства.

Ответом от 29.10.2018 г. ООО «Восточный ЛУЧ» отказал в удовлетворении требования.

Поскольку законные требования потребителя после подачи претензии добровольно ответчиком не удовлетворены, с него надлежит взыскать штраф в размере 78 776, 13 руб. ((156 552, 27 р. + 1000 р.)/2).

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 4337 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Л.В.Л к ООО «Восточный луч» о взыскании неустойки по договору долевого участия, убытков, защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Восточный луч» в пользу Л.В.Л неустойку в размере 156 552, 27 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 78 776, 13 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «Восточный луч» в доход муниципального бюджета Владивостокского городского округа государственную пошлину 4337 руб.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г.Владивостока в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 21 мая 2019 года

Судья Струкова О.А.