Дело №2-1147/2017

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2017 года г.Гурьевск

Гурьевский районный суд Калининградской области в составе: 

председательствующего судьи Олифер А.Г.,

при секретаре Прейбис И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 ФИО9 к ООО «ТЛТ РУС» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

у с т а н о в и л:

ФИО2 (далее также – Заказчик) обратился с иском к ООО «ТЛТ РУС» (далее также – Общество, Подрядчик), указывая, что 19.06.2016 года между ним и Обществом заключен договор строительного подряда №113/127/16, согласно которому подрядчик взял на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы, подготовить исполнительную документации, получить договора, необходимые для дальнейшего пользования газом, и сдать объект согласно протоколу согласования цены в отношении его дома по адресу: 

<

адрес > 19.07.2016 года им было уплачено подрядчику 50000 рублей в качестве аванса за проведение работ по настоящему договору. 06.09.2016 года им был оплачен второй взнос по данному договору в размере 26500 рублей. Срок получения ордера на раскопки в ОАО «Калининградгазификация» в соответствии с п.31 договора строительного подряда составляет 4 приемных дня, срок выполнения строительно-монтажных работ после получения ордера предусмотрен пунктом 3.2 и составляет 20 рабочих дней. Таким образом, указанные в п.3.2 настоящего договора работы должны были быть исполнены не позднее 19.08.2016 года. Однако договор ответчиком своевременно и надлежаще не был исполнен, работы в оговоренный срок не были произведены. В результате чего его семья осталась проживать в доме без газового отопления, без возможности приготовления пищи на газовой плите, без возможности подогрева воды с использованием газа. После приобретения необходимого оборудования, которое должно было быть приобретено подрядчиком, для выполнения строительно-монтажных работ заказчиком самостоятельно работы оговоренные в п.3.2 были фактически завершены 23.12.2016 года. В ответ на направленную претензию в адрес подрядчика о нарушении сроков выполнения работ и расчете неустойки, им был получен ответ, которым Общество признает, что работы были завершены 23.12.2016 года. Таким образом, просрочка выполнения работ по договору составляет 123 дня. В виду нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, истец и его семья испытывали нравственные и физические страдания, вызванные отсутствием элементарных удобств, которых не могли иметь по вине ответчика. Семья регулярно болела, поскольку проживала в холодном доме, в котором отсутствовала нормальная система отопления. Приходилось прибегать к иным источникам отопления, нести дополнительные расходы. В добровольном порядке подрядчик отказывается компенсировать неустойку за нарушение сроков выполнения работ, в связи с чем истец был вынужден обратиться в суд с настоящим иском. Просит взыскать неустойку в размере 73050 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, а также штраф за отказ от удовлетворения требований истца в добровольном порядке в размере 35525 рублей.

Истец ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

ООО «ТЛТ РУС», извещавшееся о времени и месте рассмотрения дела заблаговременно и надлежащим образом, от получения судебного извещения уклонилось, о чем свидетельствует возвращение адресованной ему корреспонденции с отметкой ОПС «за истечением срока хранения»; своего представителя в суд не направило; возражений относительной исковых требований не представило.

При таких обстоятельствах суд с согласия стороны истицы на основании ч.1 ст. 233 ГПК РФ определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Заслушав пояснения истицы, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии со ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст.719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии с п.1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п.4 ст. 753 ГК РФ). 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 19 июня 2016 года между ФИО2 и ООО «ТЛТ РУС» в лице генерального директора ФИО3 на основании протокола согласования (ведомости) №127 от 08.06.2016 года заключен договор №113/127/16 на выполнение строительно-монтажных работ по газификации, по условиям которого Общество (Подрядчик) обязалось по заданию Заказчика и за его счет выполнить: строительно-монтажные работы, подготовить исполнительную документацию, получить договоры с эксплуатирующей организацией, необходимые для дальнейшего пользования газом, сдача объекта эксплуатирующей организации, согласно протоколу согласования цены (приложение №1). Объект расположен по адресу: 

<

адрес > (раздел №1 договора). 

В соответствии с разделом №2 договора общая стоимость работ по договору составляет 120150 рублей. За работы согласно приложению №1 Заказчик в течение 1 дня после подписания договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика либо вносит наличные деньги в кассу предприятия аванс в размере 50000 рублей. Промежуточный расчет в размере 26500 рублей заказчик производит в период с 25.08.2016 года по 31.08.2016 года. Следующий промежуточный расчет в размере 23500 рублей производится в период с 15.09.2016 года по 20.09.2016 года. Окончательный расчет в размере 20000 рублей Заказчик производит в течение 1 рабочего дня после подписания акта приемки законного строительства объекта. 

Срок выполнения работ оговорены в разделе №3 договора. Срок получения ордера на раскопки в ОАО «Калининградгазификация» - в течение 4 приемных дней, срок выполнения строительно-монтажных работ после получения ордера на раскопки – 20 рабочих дней, срок подготовки исполнительной документации для передачи проектной документации на корректировку проектному бюро – 25 рабочих дней, после внесения промежуточного платежа согласно п.2.2 настоящего договора. При этом срок считается действительным при условии наличия согласованного проекта. 

Разделом №4 оговорены права и обязанности сторон, в том числе Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. В случае возникшей необходимости внесения изменений в проектную документацию, произвести соответствующие согласования и утверждения, передать согласованный проект Подрядчику, либо поручить ему данные работы. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Качество работ должно соответствовать нормативно установленным техническим требованиям и быть пригодно для использования в предусмотренных проектом целях.

Порядок приемки работ согласован сторонами в разделе 5 договора, в соответствии с которым заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 3-х рабочих дней, за исключением случаев, (когда работы выполнены с ненадлежащим качеством. Сдача-приемка работ производится на основании предоставленного Подрядчиком акта выполненных работ. Ответственность сторон.

Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. В случае нарушения Заказчиком срока приемки и оплаты работ (согласно пункта 2.2), Подрядчик в праве требовать, а Заказчик по письменному требованию Подрядчика обязан уплатить пени в размере 0,5% от стоимости услуг по согласованной сторонами в Приложении №1( протокол согласования) за каждый день просрочки исполнения обязательства. За нарушение сроков выполнения и оплаты работ и другие нарушения своих обязательств по настоящему говору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации (раздел №6 договора).

19.07.2016 года, то есть в день подписания договора истец внес в кассу Подрядчика полную стоимость подрядных работ в сумме 50 000 рублей, что подтверждается представленной суду квитанцией к ПКО №151 от 19.06.2016 года.

Кроме того, 06.09.2016 года истец дополнительно внес в кассу Подрядчика 26 500 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО №59 от 06.09.2016 года.

Дополнительным соглашением от 19.11.2016 года к договору №113/127/16 от 19.06.2016 года стороны внесли в условия договора следующие изменения, в соответствии с которым пункты 2.1 и 2.2 считаются недействительными, принять пункты 2.1 и 2.2 в следующей редакции: общая стоимость работ по договору составляет 87 150 рублей. За работы согласно приложению №1 Заказчик в течение 1 дня после подписания договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика либо вносит наличные деньги в кассу предприятия аванс в размере 50000 рублей. Промежуточный расчет в размере 17 150 рублей заказчик производит в период с 25.08.2016 года по 31.08.2016 года. Окончательный расчет в размере 20000 рублей Заказчик производит в течение 1 рабочего дня после подписания акта приемки законного строительства объекта. Соответствующие изменения были внесены в протокол согласования (ведомость) №127 от 08.06.2016 года. 

20 марта 2017 года ФИО4 подана на имя директора ООО «ТЛТ РУС» претензия, в соответствии с которой договор должен быть полностью исполнен 31 января 2017 года включительно. Однако до настоящего времени Подрядчиком нарушены оговоренные сроки выполнения работ, в связи с чем в пользу Заказчика подлежит выплате неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 % от стоимости данных работ. В случае отказа от добровольного исполнения требований потребителя в выплате неустойки Заказчик будет вынужден обратиться в суд, в том числе с предъявлением требований о выплате штрафа за отказ от добровольного исполнения требований. 

21 марта 2017 года генеральным директором ООО «ТЛТ РУС» в адрес ФИО5 направлен ответ на указанную выше претензию, согласно которому, сроки выполнения работ, предусмотренные договором с учетом внесенных в него дополнений, со стороны Подрядчика не нарушены, сварочные работы завершены 23.12.2016 года, при этом для завершения полного перечня работ по договору ФИО5 необходимо выполнить условия п.4.1.2 и 4.1.4.

Согласно доводам истца, не опровергнутым в ходе судебного разбирательства стороной ответчика, подтвержденным вышеприведенным ответов ответчика в адрес истца фактически предусмотренные условиями договора работы завершены лишь 23.12.2016 года.

Вопреки требованию ч.1 ст.56 ГПК РФ, стороной ответчика не представлено суду убедительных доказательств неисполнения условий договора, повлиявшего на невозможность завершения работ Подрядчиком в установленный срок, со стороны Заказчика.

Напротив, как следует из доводов стороны истца, не опровергнутых стороной ответчика, им предприняты меры для ускорения выполнения строительно-монтажных работ и самостоятельно приобретены необходимые для выполнения работ материалы, что подтверждается соответствующими дополнениями к указанному выше договору. 

При таких обстоятельствах, поскольку, как усматривается из обстоятельств дела, обязательства в части оплаты стоимости работы истцом исполнены своевременно и в полном объеме, следует полагать, что со стороны Подрядчика имело место нарушение принятых встречных обязательств, что влечет предусмотренную для него гражданско-правовую ответственность.

При этом, исходя из условий договора строительного подряда следует, что сроком окончания строительно-монтажных работ является 19.08.2016 года. 

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Разрешая требования о взыскании с ответчика неустойки, суд, исходит из следующего.

Так, в соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со ст.331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В силу ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

На основании п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В силу п.2 ст.332 ГК РФ размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.

Таким образом, в связи с неисполнением Обществом своих обязательств в полном объеме исчисляемая в соответствии в соответствии с условиями договора (раздел №6) неустойка составляет: за период с 22.08.2016 года по 23.12.2016 года в размере 269554,50 рублей ((34050 рублей + 39000 рублей (стоимость просроченных работ, предусмотренная п.3.2 договора и соответствующая п.4 и 5 протокола согласования)) х 123 дня (просрочка) х 3%).

При этом, указанная неустойка подлежит взысканию с ответчика в пределах, не превышающих требований иска, то есть в сумме 73 050 рублей.

Полагая установленным факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, в соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», принимая во внимание характер нарушений, степень вины ответчика, учитывая требования разумности, справедливости и конкретные обстоятельства дела, пережитые истцом нравственные страдания, связанные с невозможностью получения своевременно результата работ, таких как невозможностью приготовления пищи, подогрева воды, невозможностью отапливать дом в холодное время года, с учетом проживания в нем несовершеннолетних детей, страдающих в связи с чем различными простудными заболеваниями, приведшими к осложнениям, суд взыскивает с Общества в пользу истца 10000 рублей в счет компенсации морального вреда.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд взыскивает с Общества в пользу истца штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере, не превышающем требований иска, то есть в сумме 36252 рублей ((73050 + 10000) рублей х 50%).

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ФИО1 ФИО10 к ООО «ТЛТ РУС» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «ТЛТ РУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 ФИО11 73 050 рублей в счет неустойки; 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда; 36 525 рублей в счет штрафа.

Взыскать с ООО «ТЛТ РУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета Гурьевского городского округа Калининградской области государственную пошлину в размере 2691,50 рублей.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Гурьевский районный суд Калининградской области в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

В течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Гурьевский районный суд Калининградской области.

Председательствующий А.Г. Олифер

Заочное решение в окончательной форме изготовлено 14.07.2017 года.