Производство № 2-1327/2025

УИД 28RS0004-01-2024-020025-59

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

12 февраля 2025 года г. Благовещенск 

Благовещенский городской суд Амурской области в составе: 

председательствующего судьи Колмогоровой Ю.Е., 

при секретаре Совгир А.С.,

с участием представителя истца АО «ДРСК» - ФИО1, представителя ответчика ФИО2 – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «ДРСК» к ФИО2 о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

АО «ДРСК» обратились в Благовещенский городской суд Амурской области с иском к ФИО2 в обоснование указали, что между сторонами заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1633/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1632/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1631/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1629/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1628/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1627/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***).

В соответствии с разделом 1 договоров, АО «ДРСК» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения объекта энергопринимающих устройств объекта должника - Жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности существующих объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, а ответчик - оплатить расходы сетевой организации в соответствии с условиями договора.

Стороны в п.1 договоров определили, что технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ, по третьей категории надежности электроснабжения, в пределах максимальной мощности 149 кВт, срок выполнения мероприятий — один год со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий согласно п.5 договора составляет 1 (один) год со дня заключения договора.

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям №15-09/157/1633 (приложение А к договору 1633/18-ТП от 07.06.20108г.), №15-09/155/1632 (приложение А к договору 1632/18-ТП от 07.06.20108г.), №15-09/154/1631 (приложение А к договору 1631/18-ТП от 07.06.20108г.), №15-09/150/1629 (приложение А к договору 1629/18-ТП от 07.06.20108г.), №15-09/152/1628 (приложение А к договору 1628/18-ТП от 07.06.20108г.), №15-09/156/1627 (приложение А к договору 1627/18-ТП от 07.06.20108г.) заявитель обязан произвести монтаж захода ЛЭП -0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п. 7 до ВРУ-0,4 кВ объекта, установить на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующих заявленной нагрузке, выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с проектом ПУЭ и СНиП, выполнить электромонтажные работы в соответствии с проектом ПУЭ и СНиП, срок действия технических условия составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Между сетевой организацией и ответчиком были заключены дополнительные соглашения № 4 от 16.12.2021 г. к договорам 1633/18-ТП, 1632/18-ТП, 1631/18-ТП, 1629/18-ТП, 1628/18-ТП, 1627/18-ТП от 07.06.2018 г. в соответствии с п. 2, указанных соглашений, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 31.12.2023 г.

Пунктом 1 заключенных дополнительных соглашений № 5 от 28.01.2022 г к Договорам, установлен размер платы за технологическое присоединение, который составил 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, в соответствии с Приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

Обязательства по присоединению объекта заявителя, возложенные на сетевую организацию, определены пунктом 10 технических условий № 15-09/157/1633, № 15-09/155/1632, № 15-09/154/1631, № 15-09/150/1629, № 15-09/152/1628, № 15-09/156/1627 от 18.05.2018.

Заявитель должен выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные пунктом 11 технических условий.

Обязательства АО «ДРСК», предусмотренные договором и необходимые для технологического присоединения объекта ответчика, АО «ДРСК» исполнило.

В нарушение п.5 договора и п. 2 дополнительно соглашения № 4 от 16.12.2021 г. к Договору обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению со стороны Ответчика не исполнены своевременно. Уведомление о выполнении технических условий от заявителя в сетевую организацию не поступало.

Со стороны сетевой организации фактическое присоединение объекта возможно только после выполнения технических условий заявителем, тем самым истец не может осуществить технологическое присоединение по договору ранее выполнения ответчиком его части мероприятий, чем нарушаются права и интересы истца, в связи с чем была направлена претензия с требованием об оплате суммы неустойки, которая оставлена ответчиком без исполнения.

На основании изложенного просили суд взыскать с ФИО2 (*** г.р.) в пользу Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» сумму неустойки по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1633/18-ТП, 1632/18-ТП, 1631/18-ТП, 1629/18-ТП, 1628/18-ТП, 1627/18-ТП от 07.06.2018 г. в размере 236 220 рублей 24 копейки; расходы по уплате госпошлины в размере 8 087 рублей.

Определением Благовещенского городского суда от 27 января 2025 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самострельных требований привлечено ООО «Вита Нова». 

В судебном заседании представитель АО «ДРСК» - ФИО1 настаивала на удовлетворении заявленных требований, дополнительно пояснила, что заявкой, договорами о технологическом присоединении и последующим подписанием всех дополнительных соглашений, ФИО2 изъявлял свою волю и выражал своё намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках спорных договоров, что свидетельствует о его заинтересованности в исполнении договоров на данное технологическое присоединение. На сегодняшний день АО «ДРСК» состоит в договорных отношениях именно с ФИО2 Сетевая организация со своей стороны выполнила мероприятия в полном объёме, а ответчиком не были предприняты все меры для надлежащего исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения, что даёт истцу право просить взыскание неустойки.

Представитель ответчика ФИО2 – ФИО3 возражал против удовлетворения требований АО «ДРСК» по доводам письменного отзыва, согласно которым 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1627/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка ***. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 7 770 кв. м., расположенного по адресу: ***. Право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1628/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка ***. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***. Право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 08.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1629/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка ***. На основании заявления ФИО2 о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Вита Нова» от 06.11.2018 г., протокола общего собрания учредителей ООО «Вита Нова» от 06.11.2018 г., акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «Вита Нова» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Вита Нова», 18.12.2018 г. было зарегистрировано право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, номер государственной регистрации: ***-28/001/2018-2. 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1631/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка ***. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***. Право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1632/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка ***. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***. Право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-1. 07.06.2018 г. между АО «ДРСК» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1633/18-ТП объекта «Жилая застройка», по адресу: ***, кадастровый номер земельного участка *** (далее - Земельные участки). 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***. Право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 08.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. Услуги АО «ДРСК», по указанным в п. 1-6 договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оплачены ФИО2 в полном объеме в размере 72 907,49 руб. за каждый договор, всего оплачено 437 444,94 руб. Таким образом, ФИО2, с момента перехода права собственности на земельные участки ООО «Вита Нова»: с 07.08.2018 г., с 08.08.2018 г., с 18.12.2018 г., не являясь ни собственником, ни владельцем земельных участков, не вправе осуществлять технологическое присоединение к электрическим сетям на основании заключенных с АО «ДРСК» договоров.

Ответчик ФИО2, в судебное заседание не явился, обеспечил явку представителя в судебное заседание, третье лицо ООО «Нова Вита» в судебное заседание не явилось, будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения дела путем направлении письменных извещений по имеющимся в материалах дела адресам, сведений о причинах неявки не представили, ходатайств об отложении не заявило, в связи с чем суд, с учетом требований ч.3 ст.167 ГПК РФ, ст.165.1 ГК РФ приходит к выводу о возможности рассмотрения дела при данной явке.

Из письменного отзыва ООО «Вита Нова» следует, что 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», были заключены договоры купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 7 770 кв. м., расположенного по адресу: ***, право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. 27.07.2018 г. был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 08.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. На основании заявления участника ООО «Вита Нова» ФИО2 о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Вита Нова» от 06.11.2018 г., протокола общего собрания учредителей ООО «Вита Нова» от 06.11.2018 г., акта приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «Вита Нова» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Вита Нова», 18.12.2018 г. было зарегистрировано право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, номер государственной регистрации: ***-28/001/2018-2. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-2. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова» был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 07.08.2018 г. за № ***-28/001/2018-1. 27.07.2018 г. между ФИО2 и ООО «Вита Нова», был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 10 000 кв. м., расположенного по адресу: ***, право собственности ООО «Вита Нова» на земельный участок с кадастровым номером *** зарегистрировано 08.08.2018 г. за№ ***-28/001/2018-2. ООО «Вита Нова» стороной договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1627/18-ТП, № 1628/18-ТП, № 1629/18-ТП, № 1631/18-ТП, № 1632/18- ТП, № 1633/18-ТП от 07.06.2018 г., заключенным между АО «ДРСК» и ФИО2, не являлось и не является. Переход прав и обязанностей по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1627/18-ТП, № 1628/18-ТП, № 1629/18-ТП, № 1631/18- ТП, № 1632/18-ТП, № 1633/18-ТП от 07.06.2018 г., заключенным между АО «ДРСК» и ФИО2, на ООО «Вита Нова» от ФИО2 не осуществлялось.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между АО «ДРСК» и ФИО2 были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1633/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1632/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1631/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1629/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1628/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***); № 1627/18-ТП от 07.06.2018 (технологическое присоединение ЭПУ - «Жилая застройка», ***, кадастровый номер земельного участка ***), согласно которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта заявителя – «Жилая застройка», с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 (кВт), класс надежность – 3 категория – 149 кВт, класс напряжения электрических сетей, которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. В свою очередь ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 

В соответствии с ч.1 ст.26 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

В соответствии с п.6 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии с пунктом 21 заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию, согласно отметке о дате поступления входящей документации, договоры поступили в сетевую организацию 7 июня 2018 года.

Согласно п. 5 указанных договоров, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договоров. 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Согласно Приказу УГРЦиТ Амурской области № 156-пр/э от 15.12.2017 года, гл. 3 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 71 692 рубля 36 копеек, в том числе НДС 10 939 рублей 12 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 1 к договору №1633/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09-157/1633 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1633/18-ТП от 07.06.2018 года), в п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1633/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года,

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1633/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09-157/1633 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1633/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1633/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09-157/1633 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1633/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1633/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которому в течении 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 1 к договору №1632/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09/155/1632 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1632/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1632/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года,

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1632/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09/155/1632 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1632/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1632/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09/155/1632 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1632/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1632/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которого в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 1 к договору №1631/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09/154/1631 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1631/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1631/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1631/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09/154/1631 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1632-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1631/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09/154/1631 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1631/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1631/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которому в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 1 к договору №1629/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09/150/1629 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1629/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1629/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года,

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1629/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09/150/1629 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1629-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1629/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09/150/1629 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1629/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1629/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которому в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 №1 к договору №1628/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09/152/1628 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1628/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1628/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года,

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1628/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09/152/1628 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1629-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1628/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09/152/1628 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1629/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1628/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которого в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 1 к договору №1627/18-ТП от 17.04.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 28.02.2020 года, в технических условиях №15-09/156/1627 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1627/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020г.». 

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 2 к договору №1627/18-ТП от 22.02.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2020 года,

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 3 к договору №1627/18-ТП от 16.12.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, пункт 4 договора изложен в новой редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, действуют до 31 декабря 2021 года», в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2021 года, в технических условиях №15-09/156/1627 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1627-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021г.», п. 13 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2021 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 4 к договору №1627/18-ТП от 16.12.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.4 внесены изменения, согласно которым технические условия являются неотъемлемой частью договора и действуют до 31.12.2023 года, в п.5 внесены изменения, согласно которым мероприятия по технологическому присоединению выполняются в срок до 31.12.2023 года, в технических условиях №15-09/150/1627 от 18.05.2018 г. (приложение А к договору №1627/18-ТП от 07.06.2018 года), п.6 договора изложен в следующей редакции: «год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2023г.», п. 14 изложен в следующей редакции: «Срок действия настоящих технических условия до 31.12.2023 г.».

Дополнительным соглашением между АО «ДРСК» и ФИО2 № 5 к договору №1627/18-ТП от 28.01.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2018 года, в п.10 внесены изменения, согласно которым размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом от 15.12.2017 г. № 156-пр/э УГРЦиТ Амурской области, размер платы за технологическое присоединение составляет 72 907 рублей 49 копеек, в том числе НДС 12 151 рубль 25 копеек, п. 11 договора дополнен п. «е», согласно которому в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения вносится доплата суммы НДС в размере 1 215 рублей 13 копеек.

При этом, как указывает истец, ответчик в нарушение п. 5 договоров и п.2 Дополнительных соглашений №4 от 16.12.2021 г. к договорам №1633/18-ТП, 1632/18-ТП, 1631/18-ТП, 1629/18- ТП, 1628/18-ТП, 1627/18-ТП от 07.06.2018 в срок до 31 декабря 2023 года и до настоящего времени, не осуществил мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участков, не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий. Доказательств обратного, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, стороной ответчика не представлено.

Претензия, направленная ответчику 2 августа 2024 года, оставлена им без удовлетворения.

В соответствии с положениями пп. «а» п.16(6) Правил № 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

В силу ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (электрических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

Процедура технологического присоединения завершается составлением акта об осуществлении технологического присоединения (п.7 Правил №861).

В силу положений ст. 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов нарушенного права.

Пунктом 1 ст. 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом й другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, который должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

Стороной ответчика в обоснование невозможности осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в том числе монтажа захода ЛЭП – 0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п. 7 до ВРУ – 0,4 кВ объекта, установки на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующих заявленной нагрузке, выполнения устройства контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101, приведены доводы об отчуждении земельных участков в пользу ООО «Вита Нова».

В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Суд полагает необходимым отметить, что ФИО2 от своего лица заключались дополнительные соглашения в 2019-2022 гг. к договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1633/18-ТП, 1632/18-ТП, 1631/18-ТП, 1629/18- ТП, 1628/18-ТП, 1627/18-ТП уже после перехода права собственности на указанные земельные участки, с учётом добросовестности поведения, а также учитывая то обстоятельство, что ФИО2 с 2 октября 2017 года является учредителем ООО «Вита Нова» с размером доли – 49%, действуя разумно мог предпринять меры по извещению сетевой организации, нового собственника о смене правообладателя земельных участков и обязанностях по технологическому присоединению.

В договорах об осуществлении технологического присоединения ответчик является заявителем, то есть договор заключен в интересах последнего. На ответчика, как на заказчика, договорами технологического присоединения возложена обязанность по выполнению технических условий в своей части, являющаяся существенным условием договоров технологического присоединения.

Факт невыполнения ответчиком мероприятий по осуществлению технологического присоединения, предусмотренных ТУ, ответчиком не оспорен, в своей части, факт выполнения сетевой организацией ТУ в своей части исходя их представленных в материалы дела доказательствам, суд находит установленным.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения и наличии оснований для взыскания с ответчика неустойки за просрочку исполнения договоров №1633/18-ТП, №1632/18-ТП, №1631/18-ТП, №1629/18- ТП, №1628/18-ТП, №1627/18-ТП от 07.06.2018 года.

В соответствии с п. 17 гл. 5 договоров №1633/18-ТП, №1632/18-ТП, №1631/18-ТП, №1629/18- ТП, №1628/18-ТП, №1627/18-ТП от 07.06.2018, в случае нарушения одной из сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором уплачивает другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Расчет, предоставленный истцом, проверен судом и признан правильным. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее несоразмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, который с учетом характера гражданско-правовой ответственности устанавливает соразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства и предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с его нарушенным правом.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определениях от 22 апреля 2004 года № 154-О и от 21 декабря 2000 года №263-О, при применении ГК РФ суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в пункте 69 Постановления Пленума от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п.1 ст.333 ГК РФ).

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. Учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание обстоятельства дела и объем нарушенных прав истца, а также то обстоятельство, что доказательств того, что нарушение повлекло за собой какие-либо негативные последствия для истца, не представлено, с учетом вышеуказанных норм права, правовых позиций Конституционного Суда РФ, представленных сторонами доказательств, исходя из разумной меры имущественной ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, сохранения баланса интересов истца и ответчика, компенсационного характера неустойки в гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности взыскиваемой неустойки объему и характеру правонарушения, суд находит, что предъявленная к взысканию неустойка не соразмерна последствиям нарушения обязательства, и, исходя из принципа разумности и справедливости и с учетом интересов сторон приходит к выводу о снижении размера заявленной истцом ко взысканию неустойки до 150 000 рублей, учитывая также, что применение санкций, направленных на восстановление нарушенных прав, вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, должно соответствовать последствиям нарушения, но не должно служить средством обогащения.

В удовлетворении заявленного требования в большей части истцу надлежит отказать.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 4 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следовательно, при снижении судом неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ ответчик не может считаться стороной, частично выигравшей спор и имеющей право претендовать на возмещение за счет истца судебных расходов пропорционально объему требований последнего, в удовлетворении которых судом было отказано. Соответственно, истец в данной ситуации в указанной части не считается частично проигравшим спор.

Поскольку исковые требования удовлетворены, с учетом ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 087 рублей, факт несения которых подтверждается платежным поручением № 980 от 16 ноября 2019 года.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление АО «ДРСК» к ФИО2 о взыскании неустойки, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2, *** года рождения (ИНН ***) в пользу АО «ДРСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1633/18-ТП, 1632/18-ТП, № 1631/18-ТП, 1629/18-ТП, № 1628/18-ТП, № 1627/18-ТП, заключенных 7 июня 2018 года в размере 150 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 087 рублей.

В удовлетворении остальной части требований, - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд в течение одного месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья Колмогорова Ю.Е.

Решение в окончательной форме составлено 10.03.2025 г.