Дело № 2-3406(2025) 

59RS0005-01-2025-004548-88

Р е ш е н и е

 

Именем Российской Федерации 

17 ноября 2025 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Опря Т.Н.,

при ведении протокола секретарем Исуповой К.И. 

с участием представителя истца ФИО2, представителя ответчика ФИО3.. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ФИО5 о взыскании суммы, 

установил:

ФИО4 (далее – истец) обратился в суд с иском к ФИО5 (далее-ответчик) о взыскании суммы, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор на изготовление дизайн-проекта №, согласно которого ответчиком приняты обязательства по заданию Заказчика разработать Дизайн-проект квартиры общей площадью 118,9 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес> передать его Заказчику. Стоимость работ по договору составила 237800 рублей (п. 2.1 Договора). Согласно п. 3.1 Договора ответчик обязался оказать услуги в течение 44 рабочих дней, однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ результат работ не сдан. Во исполнение условий договора истцом в адрес ответчика произведены авансовые платежи посредством СБП: ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 96000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 95120 рублей. Итого 214120 рублей. ДД.ММ.ГГГГ представителем истца в адрес ответчика направлена досудебная претензия с уведомлением о расторжении договора и требованием произвести возврат полученных денежных средств на расчетный счет истца. Ответчик получил претензию ДД.ММ.ГГГГ, однако ответа на нее, согласно п. 11.4 договора, не последовало. 

Истец ФИО4 просит взыскать с ответчика ФИО5 в свою пользу сумму в размере 214120 рублей. 

Протокольным определением от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечена ФИО1.

Истец ФИО4 в судебное заседание после перерыва не явился. Ранее в судебном заседании пояснил, что для ремонта квартиры он обратился к дизайнеру за подготовкой документации. Договор на изготовление дизайн проекта готовил ответчик, направила его на электронную почту истца. Все оплаты истец производил согласно договора. В том числе оплатил разработку рабочей документации, которая так и не была разработана. Считает, что ответчик нарушила сроки для изготовления дизайн проекта, в проекте который она прислала ему на почту нет рабочей документации. Результат, который планировали достичь, привлекая дизайнера, достигнут не был. 

Представитель истца ФИО4 в судебном заседании на требованиях настаивал, поддержав доводы, изложенные в исковом заявлении. Также пояснил, что требования истцом заявлены исходя из положений Гражданского кодекса РФ, из договора подряда. 

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом. 

Представитель ответчика ФИО5 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, дал пояснения, аналогично изложенных в письменных возражениях на исковое заявление, пояснив, что договор между сторонами не подписан. Не оспаривает, что между сторонами обсуждались условия изготовления дизайн проекта, после проведения определенных работ ответчиком, истец производил оплату. Впоследствии ФИО4 поручил согласование основных этапов работ, разработку дизайн-проекта совей супруге, что следует из представленной переписки между истцом, третьим лицом и ответчиком. Третье лицо и ответчик производили подбора материала, с выездом в магазины и салоны мебели, напольных покрытий, дверей и отделочных материалов. ДД.ММ.ГГГГ с рабочей документацией и эскизами был направлен Заказчику через мессенджер Whats app; ДД.ММ.ГГГГ проект стилизации с измененными материалами направлен представителю Заказчика через мессенджер Whats app; ДД.ММ.ГГГГ проект с внесенными поправками направляется представителю Заказчика через мессенджер Whats app; ДД.ММ.ГГГГ полный проект со стилизацией, эскизами, чертежами, планами освещения и светильников, привязками розеток и включателей, направляется представителю Заказчика через мессенджер Телеграмм; ДД.ММ.ГГГГ Заказчик сообщил о начале ремонта, выхода бригады на объект и запросил дизайн-проект в цвете. Дизайн-проект был направлен ДД.ММ.ГГГГ ответчиком на электронную почту истца. Замечаний к качеству документации выполненного Дизайн-проекта не было. Ответчиком осуществлялся выезд на объект, консультации рабочей бригады, подрядчиков, поставщиков по реализации проекта. Истцу услуга была оказана в полном объеме, результат выполненных работ находиться у истца. Он пользуется дизайн проектом. Рабочая документация, также имеется в переданном истцу дизайн - проекте Рабочая документация (проектная документация), все необходимые чертежи для реализации Дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Дизайн-проекта. План объекта с размерами и площадью помещений. План расстановки мебели и оборудования. План сносимых и возводимых перегородок. План полов и напольных покрытий. План теплого пола (при необходимости). План потолков (при проектировании многоуровневых потолков). План расстановки светильников. План освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания. Планы расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей. Необходимые сметы разверток стен. Планы раскладки плитки в санузлах. Ведомость отделки помещений с указанием спецификаций. Неосновательного обогащения с стороны ответчика не имеется. Просил отказать в удовлетворении исковых требований. 

Третье лицо ФИО10 после перерыва в судебное заседание не явилась, ранее поясняла, что она несколько раз встречалась с ответчиком для обсуждения проекта. Всей документацией занимался истец. Телефон указанный в переписке принадлежит ей, она переписывалась с ответчиком по поводу дизайн проекта. Но в основном подборкой материалов занималась сама. 

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В силу п. 1, 2 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно ст. 730 ГК РФ, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

На основании статьи 715 ГК РФ, Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании п. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается. 

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 ( Заказчик) и ФИО5 (Исполнитель) заключен договор на изготовление дизайн-проекта №, по условиям которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать Дизайн-проект квартиры, общей площадью 118,9 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес> передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы (л.д.5-7). 

В соответствии с п. 1.2 Договора, перечень, объем и требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием, являющимся Приложением № к настоящему договору, и составом Дизайн-проекта, являющимся Приложением № к настоящему договору. 

Согласно п. 1.3 Договора, результатом работ по настоящему договору является Дизайн-проект интерьера Объекта, представляющий собой файлы в формате А4-3. Исполнитель обязуется передать результат работ по настоящему договору на электронную почту и предоставления Заказчику используемых ссылок на проект, а также по требованию Заказчика передать результат работ полностью или в части в распечатанном виде в формате А4. 

В силу п. 1.4 Договора, Обязательства исполнителя по настоящему договору включают в себя: подготовительные работы, необходимые для разработки Дизайн-проекта, включая, но не ограничиваясь следующими: обследование объекта, обмеры помещений, изучение необходимой документации; разработку и согласование с Заказчиком Планировочных решений ( при необходимости); разработку и согласование с Заказчиком Дизайн Объекта; разработку и согласование с Заказчиком Дизайн-проекта Объекта в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему; взаимодействие с Заказчиком в ходе исполнения настоящего договора; подготовку и передачу Заказчику результата работ. 

В соответствии с п. 2.1 Договора, общая стоимость работ по договору составляет 237800 рублей. Цена настоящего договора является твердой и изменению не подлежит. В случае, если после замера площадь помещения не будет соответствовать указанной в п. 1.1, стоимость услуг по настоящему договору пересчитывается, для чего заключается дополнительное соглашение к настоящему договору. Порядок расчетов Приложение №. 

Стоимость может быть изменена в сторону увеличения в результате изменения Заказчиком объемов работ (глубины проработки проекта) ( п. 2.1.1 Договора).

Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора (п. 2.1.2 Договора).

В соответствии с п, 3.1 Договора, срок начала работ, сроки выполнения этапов и срок окончательной сдачи работ Заказчику по Договору устанавливаются графиком выполнения работ – Приложения №. 

В случае нарушения Заказчиком сроков приемки результатов очередного этапа работ сроки выполнения работ продлеваются соразмерно периоду просрочки Заказчика (п. 3.2 Договора). 

Согласно п. 4. Договора Исполнитель обязуется: начать работы в течение 5 календарных/рабочих дней после оплаты Заказчиком авансового платежа в соответствии с Приложением № к Договору; оказать услуги качественно и в полном объеме. Под качественным оказанием услуги в целях настоящего договора понимается оказанием ее в строгом соответствии с настоящим договором и приложениями к нему; до начала разработки Дизайн-проекта осуществить все подготовительные действия, необходимые для надлежащего выполнения работ; в установленный договором срок и установленном договором виде подготовить и передать Заказчику Дизайн-проект Объекта; информировать Заказчика по его запросу в ходе выполнения работ; устранять недоделки и дополнять проектную документацию в случае получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям Договора (п.п. 4.1.1 – 4.1.6 Договора).

В силу п. 4.2 Договора, исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц как за свои собственные. 

Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме (п. 4.3 Договора).

На основании п. 4.5 Заказчик обязуется: своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором; обеспечить в согласованное сторонами время, доступ Исполнителю на Объект для осуществления работ, предусмотренных Договором;.. 

В соответствии с п. 5.1 Договора, при завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику документацию, представляющую собой промежуточный результат работ или результат работ в целом. Такая документация отправляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, указанной в реквизитах Договора, либо выгружается Исполнителем в облачное хранилище, на которое Заказчику предоставляется соответствующая ссылка. 

В силу п. 5.2 Договора, Заказчик в течение 5 календарных/рабочих дней с даты получения от Исполнителя результата работ по соответствующему этапу обязан рассмотреть и принять их, подписав, один распечатанный экземпляр передать Исполнителю. 

На основании п. 5.3 Договора, датой получения Заказчиком результата работ считается дата отправки сообщения, содержащего результат ( или промежуточный) результат работ, либо дата отправки сообщения, содержащего ссылку на облачное хранилище, в которое Исполнитель выгрузил результат ( или промежуточный результат) работ. 

В случае не передачи Исполнителю подписанного со своей стороны экземпляра в указанный срок, если Стороны не согласовали продление сроков приемки работ с соразмерным продлением общего срока выполнения работ по договору, работ по соответствующему этапу считаются безоговорочно принятыми Заказчиком по истечении установленного срока на приемку и подлежат незамедлительной оплате (п. 5.4 Договора). 

Если Заказчик обнаружит недостатки или упущения в сдаваемых работах, он обязан отразить это ответным письмом по электронной почте, указанной в реквизитах Договора, и по согласованию с Исполнителем, указать в письме разумный срок для их исправления. Письмо либо распечатанный экземпляр с замечаниями за подписью Заказчика вместе с требующей исправления документацией в течение 5 календарных/рабочих дней с момента передачи результатов работ возвращаются Исполнителю. В случае не передачи Заказчиком этих документов в установленный срок, последний считается безоговорочно принявшим работы без замечаний, лишается права ссылаться на явные недостатки сданных работ, и обязан незамедлительно их оплатить ( п. 5.5 Договора). 

Как следует из договора, дизайн-проект – это комплект документации, отражающий концепцию художественного оформления интерьера и содержащий информацию о концептуальных, колористических, видовых особенностях интерьеров объекта, рекомендуемых элементам мебели, чистовых материалах отделки, элементах декора, элементах освещения и иных элементах объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, включающий в себя Планировочные решения ( при необходимости), Эскизный проект ( 3 D визуализации) и Рабочий проект ( проектную документацию), состав которых определяется настоящим Договором, Приложением № «Техническое задание» и Приложением № «Состав дизайн-проекта». 

Согласно технического задания на разработку дизайн-проекта, являющегося Приложением № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ адрес объекта: 

<

адрес>. Общий метраж: квартира 118,9 кв.м. ( л.д. 8). 

Как следует из Приложения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ состав Дизайн –проекта состоит из Эскизного проекта, в который входит: планировочное решение помещения ( план расстановки мебели и оборудования). План утвержденной перепланировки с размерами, с подготовкой проемов; концепция и стилизация помещений. Предложение по отделочным материалам, дверям, светильникам; цветные развертки всех стен помещений. Рабочая документация состоит из: плана объекта с размерами и площадью помещений; плана расстановки мебели и оборудования; плана сносимых и возводимых перегородок ( при наличии разрешения на перепланировку); плана полов и напольных покрытий; плана теплого пола (при необходимости); плана потолков ( при проектировании многоуровневых потолков); плана расстановки светильников; плана освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания; планов расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей; необходимых схем разверток стен; планов раскладки плитки в санузлах; ведомости отделки помещений с указанием спецификаций (л.д. 9 (оборот).

Согласно приложению № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость работ составляет 2000 рублей за 1 метр квадратный, что составляет 237800 рублей. Оплата работ Заказчиком производится в рублях в 4 этапа, в следующем порядке: 1) аванс в размере 10 % от общей стоимости дизайн-проекта, что составляет 23780 рублей, оплачивается Заказчиком в день подписания настоящего Договора, после чего Исполнитель приступает к обмерам помещений. 2) аванс в размере 40 % от общей стоимости дизайн-проекта, что составляет 95120 рублей, оплачивается Заказчиком после согласования Технического задания (приложение №) и перед началом работ Исполнителя над Планировочным-Концептуальным решением и Эскизным проектом. 3) в день утверждения эскизного проекта, Заказчиком выплачивается аванс в размере 40 % от общей стоимости дизайн-проекта, что составляет 95120 рублей, после чего Исполнитель приступает к разработке Рабочей документации. 4) окончательный расчет за выполненные работы в размере 10 % от общей стоимости дизайн проекта, что составляет 23780 рублей, оплачивается Заказчиком в момент передачи Рабочей документации (л.д. 10 (оборот). 

Согласно графика выполнения работ, являющегося приложением № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, срок проведения работ 44 рабочих дня. Эскизный проект помещений (предпроектная документация): планировочные решения 14 рабочих дней ( определен сторонами в свободной форме по договоренности); концепция и стилизация помещений: развертки стен помещений 14 рабочих дней ( определен сторонами в свободной форме по договоренности); визуализация не предусматривается проектом, все сроки оговариваются отдельно. Дизайн-проект помещений (проектная документация) срок проведения работ 16 рабочих дней ( определен сторонами в свободной форме по договоренности). По соглашению сторон работы могут быть завершены досрочно (л.д. 11). 

ДД.ММ.ГГГГ на счет исполнителя поступила предоплата за первый этап в размере 6000 рублей, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей ( л.д. 13-14).

Также ДД.ММ.ГГГГ на счет исполнителя поступила предоплата за первый этап в размере 17000 рублей, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17000 рублей (л.д. 15).

ДД.ММ.ГГГГ на счет исполнителя поступила предоплата в размере 96 000 рублей, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96000 рублей (л.д. 12).

ДД.ММ.ГГГГ на счет исполнителя поступила предоплата в размере 95120 рублей, что подтверждается квитанцией о переводе по СБП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96000 рублей (л.д. 12).

Доводы представителя ответчика, что между сторонами не заключался договор на изготовление дизайн проекта, а также не устанавливались сроки его изготовления, судом отклоняются. 

Как пояснил истец, проект договора ему направила именно ответчик где указала, как стоимость и график оплаты, так и сроки изготовления дизайн проекта. 

Согласно представленной ответчиком переписки между истцом и ответчиком, следует, что именно ответчик направила истцу договор, с указанием на сроки и суммы предварительной оплаты. ( л.д.40) 

Оценив в совокупности представленные доказательства, договор, представленную ответчиком переписку как с истцом так и с третьим лицом, суд исходит из того, что стороны при изготовлении дизайн проекта руководствовались, именно данным договором и приложением к договору. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был направлен в адрес ФИО5 заполненный бланк технического задания на разработку дизайн-проекта (анкета) (л.д. 148-150).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в адрес ФИО11 через мессенджер Whats app был направлен проект планировки помещений для согласования, что подтверждается перепиской сторон (л.д. 46).

Как следует из переписки сторон, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ поручил дельнейшие действия по согласованию разработки дизайн-проекта своей супруге ФИО1 (л.д. 40-137). 

Кроме того, из переписки сторон усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представитель Заказчика, совместно с ФИО5 производили этап подбора материала с выездом в магазины и салоны мебели, напольных покрытий, дверей и отделочных материалов, включая консультацию данного этапа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 проект с рабочей документацией и эскизами был направлен Заказчику через мессенджер Whats app.

Таким образом, в период изготовления проекта ответчиком подробно оговаривались все моменты, в отношении объекта, пожелания заказчика истца, что принималось стороной истца, в проект вносились изменения. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 проект стилизации с измененными материалами направлен представителю Заказчика через мессенджер Whats app.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 проект с внесенными поправками направлен представителю Заказчика через мессенджер Whats app.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в адрес представителя Заказчика через мессенджер Телеграмм был направлен дизайн проект квартиры (л.д.81) 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщил ФИО5 о начале ремонта, выхода бригады на объект и запросил полный дизайн-проект в цветном виде. 

ДД.ММ.ГГГГ Дизайн-проект в полном объеме в цветном виде был направлен ФИО5 на электронную почту Заказчика 

<

данные изъяты>.(л.д. 151-207). 

ДД.ММ.ГГГГ представителем истца в адрес ответчика ФИО5 была направлена досудебная претензия об отказе от исполнения заключенного договора и возврате денежных средств в сумме 214 020 рублей в кратчайшие сроки, поскольку по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы в соответствии с приложением № к договору не произведены (л.д. 17). 

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком ФИО5 в адрес истца ФИО4 направлен ответ на претензию, из которого следует, что ФИО5 по заданию Заказчика был выполнен весь объем работ, надлежащим образом сдан, что является основанием для полной оплаты стоимости услуг, выставляет требование об оплате оказанных услуг в сумме 23780 рублей в течение 10 дней (л.д. 138-141). 

Доводы истца, что ответчиком нарушены сроки изготовления дизайн проекта, судом во внимание не принимается.

Суд считает, что изменение общего срока исполнения обязательств по изготовлению Дизайн-проекта, имело место в результате обоюдных действий сторон договора, т.е между сторонами согласовано. Истец принимая этапы производства работ от ответчика, производил дальнейшую предварительную оплату по договору. 

Как следует из приложения к договору, с учетом произведенных истцом предоплат для выполнения работ, истец и ответчик согласовывали техническое задание Как следует из договора, а также действий истца и ответчика, истец ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заплатил аванс ответчику, и согласно договора после оплаты данного аванса ответчик приступил к обмерам помещения, и после согласования технического задания и перед началом работ над планировочным –концептуальным решением и Эскизом проекта истец произвел следующий платеж ДД.ММ.ГГГГ. Далее в день утверждения истцом эскизного проекта истец произвел платеж ДД.ММ.ГГГГ, после которого ответчик приступила к разработке Рабочей документации.

Согласно приложения 4 к договору следует, что дизайн проект помещений проектная документация срок проведения работ 16 рабочих дней. С момента оплаты истцом ДД.ММ.ГГГГ предоплаты и началом работ ответчика над рабочей документацией, 16 дней истекал ДД.ММ.ГГГГ, Согласно представленной переписке следует, что ответчик направила дизайн проект в электронном виде ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем суд считает, что истец не нарушила срок выполнения работ. 

Доводы истца, что представленный ответчиком дизайн проект не может быть использован, результат работ не сдан, отсутствует рабочая документация, отсутствуют чертежи, что данный проект он не может использовать, судом отклоняются. 

Как следует из приложения к договору, в состав дизайн проекта, входит эскизный проект и рабочая документация. В состав рабочей документации входит : план объекта с размерами и площадью помещений; план расстановки мебели и оборудования; план сносимых и возводимых перегородок ( при наличии разрешения на перепланировку); план полов и напольных покрытий; плана теплого пола (при необходимости); план потолков ( при проектировании многоуровневых потолков); план расстановки светильников; план освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания; план расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей; необходимых схем разверток стен; план раскладки плитки в санузлах; ведомости отделки помещений с указанием спецификаций. Имеется примечание в состав документации не входит рабочие проекты : инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты вентиляции, отопления, канализации и кондиционирования. 

Как следует из представленного дизайн проекта, (л.д.154-207), имеется план объекта с замерами и площадью помещений ( стр. 3-7) :план расстановки мебели и оборудования ( 10) ; план сносимых и возводимых перегородок ( при наличии разрешения на перепланировку) ( 4-5) ; план полов и напольных покрытий( 16) ; плана теплого пола (при необходимости)(15) ; план потолков ( при проектировании многоуровневых потолков) (14) ; план расстановки светильников (11); план освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания (12); план расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей (13) ; необходимых схем разверток стен (18-28); план раскладки плитки в санузлах (.25-27) ; ведомости отделки помещений с указанием спецификаций (45-54), которая в договоре указана как рабочая документация, имеется. С указанием пояснений, примечаний, условных обозначений, замеров, с расстановкой мебели.

Как следует из переписки между истцом, третьим лицом и ответчиком данный дизайн проект, истцом использовался для ремонта квартиры. 

Суд считает, что ФИО5 по заданию истца был выполнен весь объем работ по договору.

При этом, ссылка стороны истца на то, что иск подан ввиду утраты интереса к данному дизайн-проекту, и его не актуальности для истца, поскольку в установленный договором срок он не изготовлен, судом во внимание не принимается, поскольку имеющимися в материалах дела доказательствами, подтверждается возможность использования на объекте истца Дизайн-проекта, разработанного ФИО5, доказательств иного суду не представлено..

Поскольку судом установлено выполнение ответчиком ФИО5 условий договора по созданию Дизайн-проекта, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО4 о взыскании с ФИО5 суммы в размере 214120 рублей, полученных по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил :

ФИО4 в удовлетворении исковых требований к ФИО5 о взыскании суммы, в размере 214120рублей –отказать.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Судья подпись

Мотивированное решение изготовлено 01.12.2025.

Копия верна Судья