РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2024 года г. Иркутск

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Кирилловой Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивлевой Е.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 38RS0036-01-2024-007606-62 (производство № 2-4915/2024) исковому заявлению ФИО2 к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» об обязании исполнить условия договора, 

УСТАНОВИЛ:

В Свердловский районный суд г. Иркутска обратиласьФИО2 к акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (далее – АО «ИЭСК») об обязании исполнить условия договора.

В обоснование иска указано, что 26.05.2023 между ФИО2 и АО «ИЭСК» был заключен договор № 2473/23-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> адресу:

<

адрес обезличен>. Со стороны истца обязательства исполнены в полном объеме, 26.05.2023произведена оплата по договору в размере 16707,32рублей, однако ответчик встречные обязательства по осуществлению технологического присоединения не исполняет. 30.06.2023 истец направила ответчику уведомление о выполнении технических условий со своей стороны.Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 12.07.2023 АО «ИЭСК» сообщено, что процедура технологического присоединения будет завершена в срок, предусмотренный условиями договора № 2473/23-ЮЭС. 10.11.2023 истец обратилась к ответчику с заявлением, в котором указала, о том, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный условиями договора № 2473/23-ЮЭС, истек. Кроме того, в этом заявлении истец просила об увеличении мощности с 15 кВ до 35 кВ. 27.11.2023 АО «ИЭСК» сообщено, что в связи с необходимостью обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях значительного повышения нагрузки на электрические сети сетевой организации в Шелеховском районе подключение к электрической сети энергопринимающих устройств по договору об осуществлении технологического присоединения № 2473/23-ЮЭС возможно при условииусиления питающей электрической сети после реализации в полном объеме указанных в п. 10.1 Технических условий к Договору мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей в сроки, определенные Инвестиционной программой АО «ИЭСК» на период 2024-2029 гг. Планируемый срок реализации 2024 год. 06.12.2023 истец обратилась к ответчику с заявлением, в котором требовала исполнить условия договора № 2473/23-ЮЭС. 06.12.2023 АО «ИЭСК» направила ответаналогичный ответу от 27.11.2023. 21.05.2024 истец обратилась к ответчику с заявлением, в котором требовала исполнить условия договора № 2473/23-ЮЭС. 23.05.2024 АО «ИЭСК» направила ответ аналогичный ответам от 27.11.2023 и 06.12.2023. 23.05.2024 состоялся осмотр электроустановок заявителя сетевой организацией, на основании которого составлен акт о выполнении заявителем технических условий, предусмотренных п. 11.1-11.4 технических условий № 2473/23-ЮЭС от 26.05.2023. До настоящего времени ответчик технические условия № 2473/23-ЮЭС от 26.05.2023 не выполнил. В связи с чем, истец просит суд обязать АО «ИЭСК» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> по адресу:

<

адрес обезличен>, в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, взыскании государственной пошлины в размере 300 рублей. 

Истец ФИО2в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося истца в соответствии с ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик АО «ИЭСК» в судебное заседание представителя не направило, извещено надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, о причинах неявки суду не сообщило. Направило отзыв, в котором суду пояснило, что в связи с необходимостью обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях значительного повышения нагрузки на электрические сети сетевой организации в 

<

адрес обезличен> подключение к электрической сети энергопринимающих устройств по договору об осуществлении технологического присоединения № 2473/23-ЮЭС возможно при условии усиления питающей электрической сети после реализации в полном объеме указанных в п. 10.1 Технических условий к Договору мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей в сроки, определенные Инвестиционной программой АО «ИЭСК» на период 2024-2029 гг., которая в настоящее время находится в стадии оформления. Вместе с тем сетевой организацией предприняты меры для исполнения мероприятий по технологическому присоединению граждан. 

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика в соответствии с ч.3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Пунктом 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерациипредусмотрено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане свободны в заключении договора (пункт 1 ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 названной нормы условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерациивстречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила №861) урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. К числу указанных лиц в соответствии с п. 14 Правил относятся физические подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 4 Правил, любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов, кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии и т.п.

При этом из подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25(1) Правил присоединения мероприятий с п. 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволят сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

С учетом изложенного на сетевой организации лежит обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе по урегулированию отношений с любыми третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно абз. 3 п. 103 Правил технологического присоединения, действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил.

Судом установлено, что 26.05.2023 между ФИО2 и АО «ИЭСК» был заключен договор № 2473/23-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> по адресу:

<

адрес обезличен>.

По условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> по адресу:

<

адрес обезличен>.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 35 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. В п. 10 раздела III Условий договора указан размер платы за технологическое присоединение, который составляет 16707,32 рублей.

В п. 7 Технических условий прописано, что точка присоединения – опора № 15ВЛ 0,4 кВ от ТП-1-3393 гр. «Ф-1» (ближайшая подставная опора, расположенная не далее 15 метров от границы земельного участка Заявителя со стороны ВЛ 0,4 кВ). 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 12 Технических условий).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 Договора).

Согласно условиям договора (п. 6) сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В течение 8 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Не позднее 8 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий, при этом дополнительная плата не взимается (п. 7 Договора).

В рамках данного договора истцу были выданы технические условия. 

В соответствии с Техническими условиями (п. 10) сетевая организация осуществляет:

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, планируемые ко включению в инвестиционную программу ОАО "ИЭСК":

- Реконструкция ПС 110 кВ Луговая в части: замены ОРУ-110 кВ, замены силовых трансформаторов на 2*ТРДН-63000/110/10/10, замены ЗРУ-10 кВ с установкой ячеек с вакуумным выключателем. 

Переоформление Акта № 2300/22-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения.

Перенастройка счетчика РиМ.

Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий настоящего договора.

Обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям.

П. 11 Технических условий предусматривает следующее: заявитель после выполнения технических условий со стороны Сетевой организации самостоятельно осуществляет:

Разработка проекта электроснабжения объекта, согласование с сетевой организацией. 

Монтаж вводного устройства объекта с установкой автоматического выключателя с номинальным током не более 63 А.

Выполнить проверку сечения кабельно-проводниковой продукции на пропускную способность с условием проверки на термическую стойкость к токам к.з. и невозгораемость при воздействии тока к.з.

Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания смонтированного электрооборудования с оформлением протоколов испытаний электролабораторией.

23.05.2024 состоялся осмотр электроустановок заявителя сетевой организацией, на основании которого составлен акт о выполнении заявителем технических условий, предусмотренных п. 11.1-11.4 технических условий № 2473/23-ЮЭС от 26.05.2023. 

Согласно чекам от 26.05.2023 на сумму 2707,32 рублей и 14 000, ФИО2была произведена оплата по договору в размере16707,32 рублей.

Обязательства по внесению платы истцом исполнены в полном объеме, между тем в установленный договором срок свои обязательства ответчиком не исполнены.

Также судом установлено, что 30.06.2023 истец направила ответчику уведомление о выполнении технических условий со своей стороны.

12.07.2023 АО «ИЭСК» сообщено, что процедура технологического присоединения будет завершена в срок, предусмотренный условиями договора № 2473/23-ЮЭС.

10.11.2023 истец обратилась к ответчику с заявлением, в котором указала, о том, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный условиями договора № 2473/23-ЮЭС, истек. Кроме того, в этом заявлении истец просила об увеличении мощности с 15 кВ до 35 кВ.

Аналогичные заявления были направлены в адрес ответчика 06.12.2023 и 21.05.2024.

27.11.2023 АО «ИЭСК» сообщено, что в связи с необходимостью обеспечения надежного бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях значительного повышения нагрузки на электрические сети сетевой организации в 

<

адрес обезличен> подключение к электрической сети энергопринимающих устройств по договору об осуществлении технологического присоединения № 2473/23-ЮЭС возможно при условии усиления питающей электрической сети после реализации в полном объеме указанных в п. 10.1 Технических условий к Договору мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей в сроки, определенные Инвестиционной программой АО «ИЭСК» на период 2024-2029 гг. Планируемый срок реализации 2024 год. 

Аналогичные ответы были направлены в адрес истца 06.12.2023 и 23.05.2024.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. К числу указанных лиц в соответствии с п. 14 Правил относятся физические подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с требованиями пункта 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, N 861 установлено, что обязательства сторон по договору распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежит именно на ответчике, между тем, ответчиком не представлено доказательств, отвечающих требованиям статей 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждающих невозможность исполнения договора, и о том, что ответчику чинились препятствия в исполнении договора, не представлено письменных доказательств, свидетельствующих о том, какие конкретно мерыдействительно и оперативно принимало АО «ИЭСК» в целях надлежащего исполнения своих обязательств.

Исходя из представленных доказательств, следует, что ответчик, заключая договор технологического присоединения, обладал сведениями, необходимыми для исполнения обязательств по данному договору и самостоятельно согласовывал технические условия, срок их действия. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации АО «ИЭСК» не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что после заключения договора и выданных технических условий ответчиком предпринимались мероприятия по технологическому присоединению, либо имелись обстоятельства, сделавшие невозможным присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в соответствии с условиями Договора и техническими условиями.

Кроме того, доводы ответчика об отсутствии технической возможности технологического присоединения в установленные сроки, ввиду загруженности электрических сетей, не могут быть приняты во внимание и не являются основанием для освобождения ответчика от обязанности произвести технологическое присоединение абонента. 

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязательств по договору № 2473/23-ЮЭС от 26.05.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в части возложения обязанности на ответчика исполнить договор, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке истца.

Суд, учитывая, что истец в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от оплаты государственной пошлины при обращении в суд с иском, связанным с нарушением прав потребителя, между тем истцом оплачена госпошлина в размере 300 рублей, приходит к выводу, что в соответствии с требованиями части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 52, подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма оплаченной истцом государственной пошлины, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Возложить на акционерное общество "Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанность исполнить договор присоединения к электрическим сетям № 2473/23-ЮЭС от 26.05.2023,осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> по адресу:

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>

Взыскать с акционерного общества "Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в ФИО2 (....) расходы на оплату государственной пошлины в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Свердловский районный суд города Иркутска в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья Т.В. Кириллова 

Решение в окончательной форме изготовлено 11 ноября 2024 года.