Дело №

22RS0№-75

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 февраля 2024 года

Центральный районный суд .... в составе:

председательствующего Овсянниковой М.Ю.

при секретаре ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты> к ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 обратилась в суд с иском, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор №Д, по условиям которого ответчик обязан был в срок до ДД.ММ.ГГГГ подключить (технологически присоединить) газоиспользующее оборудование к сети газораспределения до границы земельного участка по адресу проживания истца и осуществить строительство внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку газоиспользующего оборудования, прибора учета газа по адресу истца. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость проектных работ внутри границ земельного участка составляет 

<

данные изъяты>. ФИО1 условия договора в части внесения полной оплаты на счет ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в счет строительства внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку газоиспользующего оборудования, прибора учета газа исполнены, в то время как ответчиком условия договора не исполняются. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлена претензия с требованием исполнить договор в течение 10-ти дней с даты получения претензия, которая ответчиком в добровольном порядке не исполнена. Действия ответчика нарушают права и законные интересы истца по газификации домовладения в срок, обусловленный договором. 

На основании изложенного просит обязать ООО «Газпром газораспределение Барнаул» исполнить договор №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение, обеспечив газоснабжение домовладения, расположенного по адресу: ...., взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу ФИО1 неустойку за просрочку выполнения работ в размере 

<

данные изъяты> неустойку за просрочку исполнения требований в добровольном порядке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>., неустойку в размере 

<

данные изъяты> за каждый день просрочки исполнения требований в добровольном порядке от суммы в размере 

<

данные изъяты>., начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения требований истца, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>., штраф в размере 

<

данные изъяты> от суммы удовлетворенных исковых требований, в случае неисполнения ООО «Газпром газораспределение Барнаул» решения суда в течении 1 месяца взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 

<

данные изъяты> за каждый день просрочки исполнения решения суда с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения. 

В судебном заседании представитель истца ФИО7 на исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в иске, пояснил, что работы внутри участка истцом не произведены по причине неисполнения условий договора ответчиком. Выполнение работ возможно в течение нескольких дней. 

Представитель ответчика ФИО4 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменного отзыва. Указала, что вблизи от домовладения истца сети газораспределения отсутствуют, и подключить домовладение истца путем строительства только подводящего газопровода до границ ее земельного участка не представляется возможным. Для подключения домовладения истца необходимо строительство объекта сети газораспределения: распределительный газопровод в ..... В связи с большим объемом работ в рамках догазификации на территории ФИО2 края и сложностью создаваемых объектов сроки догазификации продлены, срок завершения мероприятия по строительству данного объекта для обеспечения населения природным газом установлен в 

<

данные изъяты> году. Кроме того, в действующей редакции п. 121 Правил исключены ранее установленные в пределах 2022 ограничения сроков реализации программы догазификации. С учетом того, что до завершения строительства распределительного газопровода невозможно подключить от него домовладение, истцу предложено заключить дополнительное соглашение к договору о продлении срока подключения. Истцом дополнительное соглашение о продлении срока подключения не подписано. Истец работы внутри земельного участка не выполнила, что также препятствует подключению объекта к газоснабжению.

Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежаще.

В соответствие со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав пояснения явившихся участников, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п.1.1 данного Договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети. 

Место объекта газификации – жилой дом по .....

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догоазификации (п.2 договора).

В силу п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа – ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно п. 4 договора исполнитель обязан осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий).

П. 11 договора предусмотрено, что плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования и (или) постановку прибора учета. 

Размер платы за подключение составляет 

<

данные изъяты>

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 

<

данные изъяты> что составляет 0 руб., в том числе НДС 0 руб., вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50% платы, что составляет 0 руб., в том числе НДС 0 руб. вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключено дополнительное соглашение в рамках договора №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазицикафии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость проектных работы внутри границ земельного участка составляет 

<

данные изъяты> в том числе НДС 

<

данные изъяты>.

Согласно квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, имеющейся в материалах дела, истцом внесена оплата по дополнительному соглашению в размере 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в адрес ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлена претензия об исполнении договора.

В ответ на претензию ООО «Газпром газораспределение Барнаул» предложило ФИО1 заключить дополнительное соглашение об изменении срока исполнения договора по мотивам того, что для подключения домовладения истца необходимо строительство объекта сети газораспределения: распределительный газопровод в ..... В связи с большим объемом работ в рамках догазификации на территории ФИО2 края и сложностью создаваемых объектов сроки догазификации продлены. Постановлением Правительства ФИО2 края от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена новая Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ФИО2 края.

Согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

Согласно ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее также Правила подключения от ДД.ММ.ГГГГ №).

Согласно п. 5 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно п. 2 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В соответствии с требованием п. 121 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции, действовавшей на день заключения договора о технологическом присоединении) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству газораспределительных систем. Срок осуществления мероприятий не может выходить за пределы 2022 года за исключением случаем, когда для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, газораспределительные сети в которых будут проложены после ДД.ММ.ГГГГ.

Абзац второй п.121 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ №, ограничивающий во времени осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации до конца 2022 года, утратил силу с ДД.ММ.ГГГГ в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2187.

Пунктом 123 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

С ДД.ММ.ГГГГ пункт 123 Правил изложен в новой редакции, согласно которой в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя, основания превышения сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определены в пункте 122 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ №.

При заключении с истцом договора № №Д от ДД.ММ.ГГГГ действовала Государственная Программа ФИО2 края «Обеспечение населения ФИО2 края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства ФИО2 края от ДД.ММ.ГГГГ №, включающая Подпрограмму 3 «Газификация ФИО2 края».

ФИО2 края №-рг от ДД.ММ.ГГГГ утвержден сводный план-график догазификации, включенный в указанную Государственную программу ФИО2 края «Обеспечение населения ФИО2 края жилищно-коммунальными услугами». Данным сводным планом-графиком предусмотрено окончание строительства и (или) реконструкция газораспределительной сети в .... ФИО2 края в ноябре 2022 года.

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства ФИО2 края от ДД.ММ.ГГГГ № в Приложение № (пункт 37) вышеуказанной Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ФИО2 края, срок проведения мероприятий по строительству указанного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления до жилых домов в ....» 

<

данные изъяты>.

Согласно ответу ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос суда в .... действующие сети газораспределения имеются, но они не обеспечивают техническую возможность подключения всех домовладений в ..... П. 121 раздела VII Правил предусматривает в составе мероприятий по созданию технической возможности строительство сетей газораспределения. В приложении 4 Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ФИО2 края, утвержденной Постановлением Правительства ФИО2 края от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрены мероприятия по созданию сети газораспределения: распределительный газопровод в .... за счет средства единого оператора газификации для обеспечения населения природным газом со сроком завершения мероприятий по строительству данного объекта в 2024 году. В непосредственной близости от домовладения ФИО1 сети газораспределения отсутствуют, и подключить домовладение ФИО1 путем строительства только подводящего газопровода (подводки) до границ ее земельного участка не представляется возможным, поскольку необходимо обеспечить техническую возможность подключения в рамках догазификации и иных домовладений на ...., для этого необходимо построить сеть газораспределения с подводящими газопроводами до границ земельных участков домовладений не подключенных к сети газораспределения. В п.9 технических условий к договору, заключенному с ФИО1 точкой подключения определен проектируемый объект: распределительный газопровод в ..... Договор подписан сторонами и является действующим. В составе объекта: распределительный газопровод в .... планируется строительство сети газораспределения протяженностью 9,8 км., с 7 точками подключения от действующих сетей газораспределения с прокладкой по .... газопровода высокого и низкого давления, установкой ГРП, а также строительством подводящих газопроводов до границ земельных участков заявителей и с дальнейшей перспективой подключения более 

<

данные изъяты>, в том числе и домовладения по адресу: ..... 

Учитывая, что в ...., где располагается домовладение истца, проложены газораспределительные сети, и ответчиком не представлено доказательств того, что для подключения домовладения ФИО1 требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 Правил подключения №, суд приходит к выводу, что ООО «Газпром газораспределение Барнаул» обязано было предпринять все необходимые меры и в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспрделения.

Таким образом, действия ООО «Газпром газораспределение Барнаул», выразившееся в нарушении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, расположенного по адресу: ...., к сетям газораспределения не соответствуют договору и пунктам 121-123 правил №.

Согласно п.п. 16, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» по смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 450.1 ГК РФ не связанный с нарушением со стороны потребителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора не допускается, в том числе в случаях, предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК РФ. 

Согласно п.4 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств лежит на исполнителе услуг.

Таким образом, Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).

Между тем, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины. 

Выполнение ответчиком возложенных на него действующим законодательством обязанностей по обеспечению технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения истца позволит соблюсти общественные интересы и принципы государственной политики в области газоснабжения.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что имеются основания для возложении обязанности на ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1 по адресу: .... учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка без взимания платы.

Доводы ответчика о том, что невозможность подключения объекта истца к сетям газоснабжения вызвана бездействием самой ФИО1, не осуществившей работы по прокладке газопровода внутри земельного участка, суд не принимает, поскольку в судебном заседании причинно-следственной связи между бездействиями ответчика и истца не установлено. Какой-либо срок исполнения обязательств истца по прокладке газопровода внутри земельного участка договором не предусмотрен, в связи с чем истец вправе это сделать в любое время до выполнения своих обязательств ответчиком.. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, - 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу. 

В соответствие со статьей 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Истцом заявлены требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 

<

данные изъяты> неустойки за просрочку исполнения требований в добровольном порядке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>., неустойки в размере 

<

данные изъяты> за каждый день просрочки исполнения требований в добровольном порядке от суммы в размере 

<

данные изъяты> начиная с ДД.ММ.ГГГГ, по дату фактического исполнения требований истца.

Поскольку работы по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования истца к сети газораспределения по договору №Д от ДД.ММ.ГГГГ являлись бесплатными, оснований для взыскания неустойки отсутствуют.

Платными являлись работы по разработке проектной документации, которые выполнены ответчиком в установленный срок, что представитель истца при рассмотрении дела не отрицал. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статья 1101 ГК РФ предусматривает, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчиком нарушены права истца как потребителя соответствующих работ, постольку причинение истцу морального вреда презюмируется. Суд учитывает характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, характер нравственных страданий истца, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца 5 000 руб.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу разъяснения, содержащегося в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Судом установлено, что ответчиком требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, в связи с чем в пользу истца подлежит взысканию штраф.

Размер штрафа составляет 2 500 руб. из расчета 5 000 руб./2. 

Оснований для снижения штрафа по ст.333 ГК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Определяя размер неустойки, судом учитываются обстоятельства наступления гражданской ответственности, характер подлежащих выполнению работ, срок их выполнения, баланс интересов сторон. С учетом изложенных обстоятельств суд полагает правильным определить размер неустойки 

<

данные изъяты> за каждый день просрочки по дату фактического исполнения решения суда.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ суд, взыскивает с ответчика госпошлину в доход бюджета муниципального образования городской округ - .... в размере 

<

данные изъяты>. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты>) удовлетворить в части.

Возложить на ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 

<

данные изъяты> обязанность в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты>), с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка, расположенного по адресу: ...., без взимания платы. 

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 

<

данные изъяты>) в пользу ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты> на случай неисполнения решения суда неустойку в размере 

<

данные изъяты> в день за каждый день просрочки по дату фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 

<

данные изъяты>) в пользу ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> штраф в размере 

<

данные изъяты>

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 

<

данные изъяты> в бюджет муниципального образования городского округа – .... ФИО2 края государственную пошлину в размере 600 руб.

Решение может быть обжаловано в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение одного месяца после составления решения в окончательной форме.

Судья М.Ю.Овсянникова