Дело № 2-1642/2024

УИД 39RS0002-01-2023-008184-89

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

13 февраля 2024 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда 

в составе: 

председательствующего судьи Оксенчук Ж.Н.,

при помощнике судьи Левчиковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Россети Янтарь» об обязании исполнить договор технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с вышеуказанным иском, обосновав его тем, что она является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

 адрес > кадастровый №. 

<

 Дата > между и ответчиком был заключен договор № технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенному по вышеуказанному адресу. По условиям которого, ответчик принял на себя обязательств по осуществлению технологического присоединение энергопринимающих устройств истца. Срок присоединения составил 6 месяцев, до 

<

 Дата >, однако, до настоящего времени договор не исполнен. Просила возложить на общество обязанность выполнить комплекс мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей, а также неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в размере 5% от 550 рублей за каждый день просрочки, до момента фактического исполнения обязательств, размер которой на дату подачи иска составляет 8717.5 руб.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала по вышеизложенным основаниям, дополнив, что до настоящего времени мероприятия по технологическом присоединению не исполнены, в результате чего она не имеет возможность въехать в дом и вынуждена снимать квартиру.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 возражала против удовлетворения исковых требований, представила письменные возражения, пояснив, что в целях исполнения обязательств по договору АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание. Сетевой организаией на электронной торговой площадке проводилась процедцра по выбору подрядной организации, которая на основании договора продряда выполнит проектные и строительно-монтажные работы для технологического присоединения объекта истца. 

<

 Дата > проведены итоги повторно проведенной конкурсной процедуры, победителем признано ООО «Энергопроект». В настоящее время договор с данной подрядной организацией находится в разработке, срок исполнения 180 календарный дней с момента заключения договора. Они предпринимают все необходимые меры для исполнения обязательств по договору технологического присоединения. Истцом некорректно посчитан размер неустойки, который за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > составляет 10037.50 руб.

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

<

 Дата > N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п.п. «в» п.16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрическое энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», стороны договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2)- 13(5) и пункта 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0.4 к.В и ниже, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Как установлено и подтверждается материалами дела, между АО «Россети Янтарь»» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: индивидуального жилого дома, расположенный (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес > (КН №). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, которые внесены истцом 

<

 Дата >.

Согласно Технических условий, являющихся Приложением к договору, сетевая организация обязана обязана выполнить мероприятия в целях присоединения нового заявителя:

10.1 Группу в РУ 0.4 кВ ТП 088-48 оборудовать рубильником и предохранителями на ток плавной вставки в соответствии с расчетной мощностью.

10.2 От ТП 088-48 в сторону участка заявителя построить ЛЭП 0.4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 95 кв.мм (трассу ЛЭП определить проектом).

10.3 Прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0.4 кВ (Л-Новая) от ТП 088-48, установленной не далее 15 метоов во внешнюю сторону от границы участка заявителя, От зажимов провода ВЛ 0.4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения.

Из представленных АО «Россети Янтарь»» документов следует, что в рамках выполнения обязательства по договору разработано и утверждено техническое задание № по титулу «Сроительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 088-48 (инв.5116764), организация учета электроэнергии в 

<

 адрес >».

Согласно ст.4 ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. В соответствии с Постановлением Федеральной энергетической комиссии от 19.12.1997 «Об утверждении перечня субъектов естественных монополия в топливно-энергетическом комплекса, включаемых в Реестр по разделу 1 «Услуги по передаче электрической и тепловой энергии» АО «Россети Янтарь» включено в Реестр естественных монополий «Передача электроэнергии».

<

 Дата > подведены итоги повторно проведенной конкурсной процедуры, победителем признано ООО «

<

 ИЗЪЯТО >».

<

 Дата > между АО «Россети Янтарь» и ЛЛЛ «

<

 ИЗЪЯТО >» заключен договор № на разработку рабочей документации, строительно-монтажные работы на строительство ЛЭП 0.4 кВ ТП 088-48, организация системы учета электроэнергии в 

<

 адрес >.

Однако судом установлено, что на момент рассмотрения дела судом электроэнергия в жилой дом истца не подана.

Суд считает, что право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора, не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям.

Обобщая изложенные обстоятельства, основываясь на совокупности приведенных норм и положений суд приходит к выводу, что требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь»» обязанности выполнить технологическое присоединения к электрическим сетям законно и обоснованно, в следствие чего, подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, довод истица об обязании осуществления мероприятий по технологическому присоединению в течение 30 дней в момента вступления в законную силу решения суда суд находит не состоятельным, поскольку ответчику необходимо более длительный срок для выполнения всего комплекса работ по договору, в связи с чем, суд приходит к выводу о возложении на ответчика срок исполнения работ в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 10037.50 рублей за период 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, 365 дней, поскольку размер неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Обобщая изложенные обстоятельства, основываясь на совокупности приведенных норм и положений суд приходит к выводу, что требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь» обязанности выполнить технологическое присоединения к электрическим сетям законно и обоснованно, в следствие чего, подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом характера и длительности допущенного ответчиком нарушения, нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 20 000 руб. 

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, размер штрафа составляет 15018.75 рублей (10037.50 руб.+20000 руб.) х50%.

Также судом принимается во внимание, что постановлением 

<

 ИЗЪЯТО > от 

<

 Дата > АО «Россети Янтарь» признано виновным в совершении предусмотренного ч.2 ст.9.21 КоАП РФ административного правонарушения и назначено наказания в размере 800000 рублей за нарушение субъектом естественных монополий установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

- обязать АО «Россети Янтарь» выполнить технологическое присоединение энергопринимающего устройства жилого дома, расположенного по адресу: 

<

 адрес >, (кадастровый №) согласно договору № в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу; 

- взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1, 

<

 Дата > года рождения, СНИЛС № неустойку за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > в размере 10037.50 руб., компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., штраф в размере 15018.75 руб., всего 45056 (сорок пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 25 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» госпошлину в доход местного бюджета в размере 401.50 руб.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 01 марта 2024 года.

СУДЬЯ