Дело №2-2973/2025

УИД 22RS0069-01-2025-006105-31

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 декабря 2025 года г.Барнаул

Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Яньшиной Н.В.,

при секретаре Трофимовой А.С.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд с требованием о возложении обязанности на ПАО «Россети Сибирь» (далее - ответчик) исполнить договор ... от 20 декабря 2023 года и осуществить в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу технологическое присоединение к электрическим сетям объекта жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером ... по адресу: ///

Также просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение установленных договором сроков выполнения работ в размере 56996,10 рублей за период с 21.06.2024 по 01.11.2025, а далее по дату фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 50% от суммы, оплаченной по платежному поручению от 20.12.2025 №68 в размере 28498,05 рублей.

Требования обоснованы тем, что ФИО2 является собственником указанного земельного участка. На основании заявки между сторонами 20.12.2023 заключен договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: ///

По условиям договора ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения объекта недвижимости по указанному адресу. Истец получил технические условия ... для присоединения к электрическим сетям, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в размере 45777 рублей 15 копеек.

Срок исполнения обязательства ПАО «Россети Сибирь» определен 6 месяцев со дня заключения договора (до 20 июня 2024 года). Оплата услуг ФИО2 произведена в размере 45777,15 рублей.

Ответчик после получения оплаты услуг в установленный договором срок не исполнил принятые на себя обязательства по договору. Обращения истца с требованиями об осуществлении технологического присоединения оставлены без удовлетворения со ссылкой на отсутствие возможности исполнить договор. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору ответчиком нарушает права истца как потребителя услуг, причиняет моральный вред. В связи с нарушением срока исполнения договора и прав потребителя ответчик обязан уплатить неустойку и компенсацию морального вреда, штраф.

Представитель истца ФИО1 подтвердила факт исполнения ответчиком обязательства 14.03.2025 года, на исковых требованиях настаивала по изложенным основаниям.

Истец, представитель ответчика, третье лицо ФИО3 в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены в установленном законом порядке.

Письменные возражения ответчика приобщены к материалам дела.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ суд определил возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статей 307 - 310 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Федеральным законом от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства РФ N 861 от 27 декабря 2004 года утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (далее – Правила), пунктом 9 которых установлено, что договор технологического присоединения является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации.

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя. Сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем), по условиям которого сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения). Процедура технологического присоединения завершается фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне договора неустойку.

Судом установлено, что ФИО2 являясь собственником земельного участка по адресу: ///, 20 декабря 2023 года заключил с ПАО «Россети Сибирь» типовой договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор), по условиям которого ответчик принял на себя обязательство в течение 6 месяцев со дня заключения договора осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца., в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединениею энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристики: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

ФИО2, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в размере 45777,15 рублей. Договором определено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения расположенного объекта строительства (индивидуального жилого дома/садового/дачного дома), расположенного на принадлежащем истцу земельном участке.

Согласно п.5 указанного договора срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п.21).

Пунктом 17 договора определено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушени срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно п.18 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании договора ответчиком разработаны технические условия ....

ФИО2 20.12.2023 произвел оплату по договору в размере 45777,15 рублей, что подтверждается копией платежного поручения.

На основании договора купли-продажи от 25.12.2023 г. земельный участок перешел в собственность ФИО3

Сведений об изменении условий договора и замене стороны договора отсутствуют.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, с учётом вышеприведённого договора истек 20.12.2024 года.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Доказательства отсутствия вины в неисполнении обязательств, наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению обязательств, ПАО «Россети Сибирь» при рассмотрении дела не представлены.

11 декабря 2024 года заместителем руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю вынесено постановление о назначении административного наказания по делу ... об административном правонарушении, которым подтвержден факт неисполнения в предусмотренный договором срок обязательств ПАО «Россети Сибирь» по договору.

Из пояснений представителя истца и уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетевым следует, что обязательства ответчиком исполнены 14 марта 2025 года, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям принадлежащего истцу объекта не имеется.

Согласно подпункту "в" пункта 16 Правил N 861 договор должен содержать положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и названными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В пункте 17 Договора стороны согласовали такой же порядок определения размера неустойки, ее размер.

Поскольку вопросы о взыскании неустойки регулируются специальными нормами, к правоотношениям между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 при расчете неустойки подлежат применению специальные нормы, указанные в подпункте "в" пункте 16 вышеприведенных Правил.

Ответчиком доказательства несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды потребителя не представлены.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым взыскать с сетевой компании в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 21 июня 2024 года по 14 марта 2025 года в размере 30556 рублей 25 копеек, исходя из расчета: 45777,15х0,25%х267 дн.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При определении размера компенсации морального вреда судом учитывается, что до истечения срока исполнения договора истцом земельный участок был реализован, до обращения в суд ФИО2 не интересовался исполнением договора, что подтверждается неоднократным направлением в адрес исполнителя претензий после осуществления технологического подключения, доказательства нравственных страданий истца по поводу нарушения срока выполнения обязательств ответчиком не представлены, с учетом требований разумности и справедливости суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 1000 рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Установив факт допущенного нарушения ПАО «Россети Сибирь» прав истца, как потребителя услуг, с учетом обстоятельств рассматриваемого спора, объема и периода нарушения ответчиком прав истца, принимая во внимание период допущенного ответчиком нарушения, суд определяет размер штрафа в сумме 15778 рублей 13 копеек исходя из расчета:(30556 рублей 25 копеек+1000)х50%

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход бюджета муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования ФИО2 (СНИЛС ...) удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору от 20 декабря 2023 года за период с 21 июня 2024 года по 14 марта 2025 года в размере 30556 рублей 25 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 1000 рублей, штраф в размере 15778 рублей 13 копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход бюджета городского округа – города Барнаула Алтайского края государственную пошлину в размере 7000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Дата принятия решения в окончательной форме 26 декабря 2025 года

Судья Н.В. Яньшина