ВЕРХОВНЫЙ СУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 301-ЭС19-26359

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва16 июля 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив  кассационную жалобу администрации муниципального образования  Второвское Камешковского района Владимирской области на решение  Арбитражного суда Владимирской области от 01.08.2019 по делу  № А11- 4355/2018, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от  25.10.2019 и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от  12.03.2020 по тому же делу 

по иску общества с ограниченной ответственностью «ПГС Сервис»  (далее - общество) к администрации муниципального образования Второвское  Камешковского района Владимирской области (далее - администрация) о  взыскании 1 535 943, 82 руб. неустойки (с учетом уточнения требований),  

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Владимирской области от 01.08.2019,  оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного  апелляционного суда от 25.10.2019 и постановлением Арбитражного суда  Волго-Вятского округа от 12.03.2020, исковые требования удовлетворены. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, администрация просит отменить обжалуемые судебные акты,  ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права,  направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным  основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, суд пришел к  выводу, что они не являются достаточным основанием для пересмотра  судебных актов в кассационном порядке. 

Разрешая спор, суды, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 330, 702,  708, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации,  разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011  № 81 «О некоторых  вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации» и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016  № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств», установив, что по заключенному между  администрацией (заказчик) и обществом (подрядчик) муниципальному  контракту на выполнение работ по строительству объекта «Водопроводные  сети и артскважины с. Второво и пос. Мирный Камешковского района»  подрядчиком выполнены работы в соответствии с проектно-сметной  документацией и условиями контракта, принимая во внимание расторжение  контракта заказчиком и взыскание по делу  № А11-12555/2014 задолженности за  выполненные по контракту работы, учитывая имеющуюся на стороне  администрации просрочку оплаты выполненных по контракту работ, пришли к  выводу об обоснованности иска о взыскании неустойки за нарушение  заказчиком сроков оплаты выполненных работ, не усмотрев оснований для ее  снижения в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Доводы администрации о несоразмерности взыскиваемой неустойки, о  расторжении контракта заказчиком в связи с нарушением подрядчиком сроков  выполнения работ, об отказе заказчика от подписания актов по мотивам  некачественности работ, а также ссылка на длительность просрочки в оплате  выполненных работ, обусловленную необходимостью определения в судебном  порядке фактической стоимости выполненных работ, и иные доводы жалобы,  сводятся к несогласию с принятыми по делу судебными актами, выводы судов  не опровергают, ранее заявлялись в судах нижестоящих инстанций и получили  надлежащую правовую оценку с обоснованием мотивов отклонения. 

Поскольку существенных нарушений судами норм материального права и  (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, доводы жалобы  не подтверждают, оснований для передачи жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации не имеется. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6,  291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы администрации  муниципального образования Второвское Камешковского района  Владимирской области для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного СудаРоссийской Федерации Е.Е. Борисова