ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 № 305-ЭС24-10912 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва 30 сентября 2024 г.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С.,  рассмотрев кассационную жалобу акционерного общества «Авиакор –  авиационный завод» на решение Арбитражного суда города Москвы от  13.10.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от  20.12.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от  22.03.2024 по делу № А40-83228/2023,  

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Авиакор – авиационный завод» (далее – АО «Авиакор  – авиационный завод», Завод, истец, заявитель) обратилось в Арбитражный суд  города Москвы с исковым заявлением к публичному акционерному обществу  «Туполев» (далее – ПАО «Туполев», Общество, ответчик) о взыскании  денежных средств за выполненные работы в сумме 24 559 299,84 руб. по  следующим дополнительным соглашениям к контракту от 10.10.2016   № 9302/С:  

от 06.11.2019 № 1719187323411442208195462/109/154/13917,  от 20.05.2019 № 1719187323411442208195462/94/154/13035,  

от 20.05.2019 № 1719187323411442208195462/95/154/13036.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2023,  оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного  апелляционного суда от 20.12.2023, в удовлетворении исковых требований  отказано.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2024  указанные судебные акты оставлены без изменения.  

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся судебные акты, ссылаясь  на существенное нарушение норм материального и процессуального права.  

В числе прочих доводов заявитель жалобы указывает, что условие  дополнительных соглашений об оплате выполненных работ после поступления  денежных средств от государственного заказчика и головного исполнителя  приобрело неопределенный характер и не отвечает признакам неизбежности.  

Заявитель полагает, что если соответствующее условие не наступает и  для участников рассматриваемых отношений очевидно, что оно не наступит в  течение разумного срока, кредитор вправе требовать встречного исполнения по  правилам пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ).  

Работы выполнены истцом более 4 лет назад, однако суды не исследовали  обстоятельства неполучения ответчиком окончательного расчета от головного  исполнителя, равно как не исследовали вопрос о том, предпринимал ли  ответчик меры, направленные на получение окончательного расчета для  последующего расчета с истцом.  

В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей  291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  АПК РФ), кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых  невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов  заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы  кассационной жалобы заявителя, материалы истребованного дела, суд не  находит оснований для ее передачи на рассмотрение в Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из  следующего.  

Как следует из обжалуемых актов, между Обществом (Заказчик) и  Заводом (Исполнитель) был заключен контракт № 9302/С от 10.10.2016 на  выполнение работ в рамках сервисного обслуживания самолетов марки «Ту»  (далее – Контракт).  

Наименование, объем работ, количество, цена и сроки выполнения работ  указываются в спецификациях, введенных дополнительными соглашениями к  Контракту.  

Основания для выполнения работ оговариваются в дополнительных  соглашениях и в спецификациях, введенных дополнительными соглашениями и  подписанных сторонами (пункт 2.2 Контракта).  

Цена Контракта определяется суммой всех спецификаций введенных  Контрактом и дополнительными соглашениями к нему и подписанных  

сторонами. При согласовании сторонами ориентировочной (предельной) цены  работы, цена подлежит переводу в фиксированную (твердую) по результатам  проверки экономической обоснованности, в т.ч. и по основным соисполнителям  и поставщикам ПКИ, в соответствии с требованиями нормативно-правовых  документов, регламентирующих ценообразование. Фактическая себестоимость  работ представляется Заказчику не позднее 30 дней со дня окончания  выполненных работ (пункт 4.4 Контракта).  

Для согласования протокола фиксированной (твердой) цены Контракта  (единицы Работы, этапа Работы), Исполнитель не позднее одного месяца до дня  сдачи работ предоставляет в установленном порядке Заказчику протокол  согласования фиксированной (твердой) цены работ, согласованный с ВП  Исполнителя, с приложением расчетно-калькуляционных материалов и  заключения ВП Исполнителя по фиксированной (твердой) стоимости работ.  Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения документов,  подтверждающих выполнение работ, рассматривает предоставленные  документы и согласовывает Протокол фиксированной (твердой) цены, либо  возвращает его с указанием мотивированного отказа (пункт 4.5 Контракта).  

В соответствии с условиями дополнительного соглашения №  1719187323411442208195462/109/154/13917 от 06.11.2019 (далее - ДС1),  Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по  продлению назначенного срока службы на 1 календарный год, на самолете типа  Ту-154 № 79А360, в части выполнения работ по «Программе работ....» ПАО  «Туполев». Срок выполнения работ 01.10.2019.  

Срок выполнения работ действителен при условии прибытия самолета на  территорию Исполнителя не позднее 01.08.2019. Ориентировочная стоимость  работ по ДС1 составляет 6 366 090,98 руб., в т.ч. НДС 20%.  

В соответствии с пунктом 5 ДС1 Заказчик производит авансирование  Исполнителя в размере 30,8% от цены ДС1, в течение 10 банковских дней с  момента получения счета от Исполнителя.  

Доавансирование до 80% производится в течение 10 банковских дней с  момента поступления денежных средств от головного исполнителя и в  соответствии с объемом поступления.  

20.11.2019 Исполнитель направил в адрес Заказчика отчетные документы,  подтверждающие факт выполнения работ по ДС1 и выставил Заказчику счет №  345 от 28.11.2019 на уплату аванса в размере 1 960 756,02 руб., в т.ч. НДС 20%.  

Платежным поручением № 28 от 20.01.2020 Заказчик осуществил оплату  авансового платежа на сумму 1 960 756,02 руб.  

19.11.2019 Исполнителем совместно с представителями 610 ВП МО РФ  (ВП Исполнителя) и войсковой части 13641 составлен и подписан технический  акт № 154-95-25 на выполненные работы по ДС1, Исполнителю выдано  удостоверение № 9302/С/108, подтверждающее факт выполнения работ по ДС1,  в адрес Заказчика направлено Заключение 610 ВП МО на проект цены  выполнения работ с приложением плановой калькуляции затрат и  расшифровками затрат.  

Дополнительным соглашением № 158/ТФЦ от 23.06.2022 введен в  действие протокол согласования фиксированной (твердой) цены № 109/154,  сторонами согласован акт № 1/154/360/ТФЦ от 23.06.2022 о переводе  ориентировочной (уточняемой) цены ДС1 в фиксированную, согласно  которому общая стоимость выполненных по ДС1 работ составила 8 375 367,96  руб., сумма окончательного расчета 6 414 611,94 руб., на основании указанных  документов в адрес Заказчика направлены корректировочные счет-фактура №  ААЗ-000537 от 23.06.2022 и счет № ААЗ-00187 от 23.06.2022.  

20.05.2019 в рамках Контракта сторонами заключено дополнительное  соглашение № 1719187323411442208195462/94/154/13035 (далее - ДС2), в  соответствии с которым Исполнитель принял на себя обязательства выполнить  комплекс работ, утвержденных спецификацией № 94/154, срок выполнения  работ 01.09.2019.  

Ориентировочная стоимость работ по ДС2 составляет 27 800 624,74 руб.,  в т.ч. НДС 20%.  

В соответствии с пунктом 5 ДС2 Заказчик производит авансирование  Исполнителя в размере 30,8% от цены ДС2, в течение 10 банковских дней с  момента получения счета от Исполнителя.  

Доавансирование до 80% производится в течение 10 банковских дней с  момента поступления денежных средств от головного исполнителя и в  соответствии с объемом поступления.  

Платежным поручением № 949 от 10.07.2019 Заказчик осуществил оплату  авансового платежа в размере 8 562 592,42 руб.  

05.02.2020 Исполнителем совместно с представителями 610 ВП МО РФ и  войсковой частью 83123 составлен технический акт № 154-95-1 выполненных  работ на самолете Ту-154Б-2 борт № 82А559. 06.02.2020 610 ВП МО РФ выдало  Исполнителю удостоверение № 9302/С/116, подтверждающее факт выполнения  работ по ДС2.  

10.02.2020 Заказчиком согласован и подписан акт № 1/154/559/ОЦ сдачи-приемки выполненных работ по ДС2, в соответствии с которым окончательный  расчет будет осуществлен Заказчиком после утверждения фиксированной  (твердой) стоимости работ.  

06.02.2020 Исполнителем направлены (исх. № 112/111) в адрес Заказчика  отчетные документы по ДС2, подтверждающие факт выполнения работ по ДС2,  которые были получены Заказчиком 19.02.2020.  

Исполнителем в адрес ПАО «Туполев» был направлен протокол  фиксированной (твердой) цены по ДС2 (исх. № 140/210 от 27.10.2020), который  был получен Заказчиком 18.11.2020.  

29.06.2022 в адрес Заказчика Исполнитель направил (исх. № 112/316) на  подписание акт № 1/154/559/ТФЦ от 23.06.2022, корректировочную счет- фактуру № ААЗ-000536 от 23.06.2022, счета № ААЗ-00183 от 23.06.2022,  дополнительное соглашение № 155/ТФЦ от 23.06.2022, которые были  получены Заказчиком 03.08.2022, подписанный акт возвращен Исполнителю.  

В соответствии с актом № 1/154/559/ТФЦ от 23.06.2022 и введенным в  действие дополнительным соглашением № 155/ТФЦ от 23.06.2022 протоколом  

согласования фиксированной (твердой) цены № 94/154, общая стоимость  выполненных Исполнителем по ДС2 работ составила 23 235 187,27 руб., в т.ч.  НДС, окончательный расчет за выполненные работы составляет 14 675 594,85  руб., в т.ч. НДС.  

20.05.2019 в рамках Контракта сторонами было заключено  дополнительное соглашение № 171917323411442208195462/95/154/13036 (далее  - ДСЗ), в соответствии с которым Исполнитель принял на себя обязательства  выполнить работы в соответствии со спецификацией № 95/154, срок  выполнения 01.09.2019.  

Ориентировочная стоимость работ по ДС3 составляет 15 199 383,01 руб.,  в т.ч. НДС 20%.  

В соответствии с пунктом 5 ДСЗ Заказчик производит авансирование  Исполнителя в размере 30,8% от цены ДСЗ, в течение 10 банковских дней с  момента получения счета от Исполнителя.  

Доавансирование до 80% производится в течение 10 банковских дней с  момента поступления денежных средств от головного исполнителя и в  соответствии с объемом поступления.  

Платежным поручением № 951 от 10.07.2019 Заказчик осуществил  авансовый платеж в размере 4 681 409,96 руб.  

26.08.2019 Исполнителем совместно с представителями 610 ВП МО РФ и  войсковой частью 83123 был составлен технический акт № 154-95-18  выполненных работ на самолете Ту-154Б зав. № 82А534.  

04.09.2019 610 ВП МО РФ выдал Исполнителю удостоверение №  9302/С/102, подтверждающее выполнения работ по пункту 4.1.7.1.5.14 ДСЗ.  

05.09.2019 в адрес ПАО «Туполев» (исх. № 112/874) были направлены  отчетные документы, подтверждающие выполнение работ в полном объеме,  которые были получены Заказчиком 11.09.2019, 16.10.2019.  

Заказчиком согласован и подписан Акт № 2/154/534/ОЦ сдачи-приемки  выполненных работ по пункту 4.1.7.1.5.14 ДСЗ.  

14.11.2019 Исполнителем совместно с представителями 610 ВП МО РФ и  войсковой частью 83123 был составлен технический акт № 154-95-23  выполненных работ на самолете Ту-154Б зав. № 80А426.  

15.11.2019 610 ВП МО РФ выдал Исполнителю удостоверение №  9302/С/107, подтверждающее факт выполнения работ по пункту 4.1.7.1.5.13  ДСЗ и в адрес Заказчика направлены отчетные документы, подтверждающие  выполнение работ в полном объеме.  

15.11.2019 Заказчиком согласован и подписан Акт № 3/154/426/ОЦ сдачи-приемки выполненных работ по пункту 4.1.7.1.5.13 ДСЗ.  

01.06.2020 Исполнителем совместно с представителями 610 ВП МО РФ и  войсковой части 83123 был составлен технический акт № 154-95-5  выполненных работ на самолете Ту-154Б зав. № 82А555.  

03.06.2020 610 ВП МО РФ выдало Исполнителю удостоверение №  9302/С/120, подтверждающее факт выполнения работ по пункту 4.1.7.1.5.15  ДСЗ и в адрес Заказчика направлены отчетные документы, подтверждающие  выполнение работ в полном объеме.  

03.06.2020 Заказчиком согласован и подписан Акт № 4/154/555/ОЦ сдачи-приемки выполненных работ по пункту 4.1.7.1.5.15 ДСЗ.  

В адрес Заказчика направлены протоколы фиксированной (твердой) цены  по ДСЗ (исх. № 140/277 от 02.10.2019, 140/368 от 26.12.2019, 140/158 от  24.07.2020, а также акты № 2/154/534/ТФЦ, 3/154/426/ТФЦ, 4/154/555/ТФЦ,  ААЗ-000533, ААЗ000534, ААЗ-000535 от 23.06.2022, счета № ААЗ-00184, ААЗ- 00185, ААЗ-00186 от 23.06.2022, дополнительное соглашение № 156/ТФЦ от  23.06.2022).  

Акты № 2/154/534/ТФЦ, 3/154/426/ТФЦ, 4/154/555/ТФЦ от 23.06.2022  подписаны и возвращены Заказчиком.  

В соответствии с пунктом 9 акта № 2/154/534/ТФЦ от 23.06.2022  окончательный расчет за выполненные работы по ДС3 составляет 864 595,13  руб., в т.ч. НДС.  

В соответствии с пунктом 9 акта № 3/154/426/ТФЦ от 23.06.2022  окончательный расчет за выполненные работы по ДС3 составляет 1 303 401,40  руб., в т.ч. НДС.  

В соответствии с пунктом 9 акта № 4/154/555/ТФЦ от 23.06.2022  окончательный расчет за выполненные работы составляет 1 304 096,52 руб., в  т.ч. НДС.  

Дополнительным соглашением № 156/ТФЦ от 23.06.2022 введены в  действие протоколы согласования фиксированной (твердой) цены № 95/154/2,  95/154/3, 95/154/4.  

Общая сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем за  выполненные работы в рамках ДС3 составляет 3 472 093,05 руб., в т.ч. НДС.  

В связи с отсутствием оплаты за выполненные Исполнителем по ДС1,  ДС2, ДС3 к Контракту работам, в адрес Заказчика были направлены претензии  от 21.12.2022 № 123/488, № 123/489, неисполнение которых послужило  основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых  согласился суд округа, исследовав и оценив по правилам статей 9, 65, 68, 71  АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь  статьями 702, 711, 740, 746, 763 ГК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №  275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», постановлениями  Правительства Российской Федерации от 11.08.1995 № 804 «О военных  представительствах Министерства обороны Российской Федерации», от  02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию,  поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении  изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства  Российской Федерации», отказали в иске.  

При этом судебные инстанции исходили из того, что окончательный  расчет за выполненные работы по контракту и дополнительным соглашениям  возможен только после перевода ориентировочной цены в фиксированную, а  также поступления от государственного заказчика денежных средств на суммы,  признанные обоснованными после перевода цены работ в окончательную.  

Поскольку на дату вынесения решения протоколы уполномоченного  органа об утверждении фиксированной цены отсутствовали и соответственно  выделение бюджетных средств не произведено, суды пришли к выводу о том,  что обязательства Заказчика по проведению окончательного расчета по  дополнительным соглашениям не наступили.  

Заявитель не лишен права на судебную защиту и при наступлении  определенных обстоятельств вправе обратиться в суд с соответствующим  иском.  

Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных  нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших  на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для  передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации.  

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы акционерного общества «Авиакор –  авиационный завод» для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.  

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Н.С. Чучунова