ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 № 309-ЭС15-10298 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва 13 ноября 2015 г.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив по  материалам истребованного дела кассационную жалобу муниципального  учреждения «Управление капитального строительства» (Пермский край,  заявитель) на решение Арбитражного суда Пермского края от 11.11.2014,  постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2015  и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.05.2015 по делу   № А50-17401/2014 по иску общества с ограниченной ответственностью  «Сарко» (Пермский край, далее – истец, общество «Сарко», общество) к  муниципальному учреждению «Управление капитального строительства»  (далее – учреждение «Управление капитального строительства», учреждение) о  взыскании 174 099 рублей 07 копеек неустойки, предусмотренной пунктом 7.5  муниципального контракта от 27.11.2012 № 0156300046612000414-0206949- 03/27-12, и 7 515 812 рублей 53 копеек убытков (с учетом заявления об  увеличении размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации),  

установил:

общество «Сарко» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым  заявлением к учреждению «Управление капитального строительства» о  взыскании 174 099 рублей 07 копеек неустойки за нарушение сроков оплаты  выполненных по муниципальному контракту от 27.11.2012 №  0156300046612000414-0206949-03/27-12 работ, а также 7 515 812 рублей 53  копеек убытков, понесенных в связи с уплатой неустойки за просрочку оплаты  товара поставщикам строительных материалов.  

Решением Арбитражного суда Пермского края от 11.11.2014, которое  оставлено без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 09.02.2015 и постановлением Арбитражного суда  Уральского округа от 14.05.2015, исковые требования удовлетворены в части  взыскания 174 099 рублей 07 копеек неустойки и 6 373 584 рублей 43 копеек  убытков; в остальной части иска отказано.  

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, учреждение, не согласившись с судебными актами в части  удовлетворения требования общества о взыскании убытков в размере  6 373 584 рублей 43 копеек, со ссылкой на существенные нарушения судами  норм материального права, просит отменить состоявшиеся судебные акты и  принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в  обжалуемой им части.  

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная  жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней  доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального  права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без  устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и  законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной  экономической деятельности.  

Изучив кассационную жалобу, приложенные к ней документы, по  материалам дела № А50-17401/2014, суд усматривает основания для передачи  кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, 27.11.2012 между учреждением  (заказчиком) и обществом (подрядчиком) заключен муниципальный контракт  

 № 0156300046612000414-0206949-03/27-12, в соответствии с которым  подрядчик принял на себя обязательства по заданию заказчика выполнить  работы по реконструкции здания МБДОУ «Детского сада № 125»,  расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, д. 27.  

Цена контракта составила 42 900 000 рублей. Цена контракта включала в  себя: стоимость работ, материалов и оборудования, стоимость погрузочно- разгрузочных работ и транспортных затрат, уплату налогов и другие  обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, а также иные  расходы, связанные с выполнением работ по контракту.  

Срок выполнения работ установлен с 27.11.2012 до 01.07.2012. 

Согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справкам  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за период с 14.02.2013  по 28.05.2014 подрядчиком выполнены работы, а заказчиком принят и оплачен  их результат на общую сумму 42 900 000 рублей.  

В целях исполнения обязательств по муниципальному контракту  общество (покупатель) заключило с обществом с ограниченной  

ответственностью «УралБизнесСнаб», обществом с ограниченной  ответственностью «Кама-Групп» и обществом с ограниченной  ответственностью «Торговый дом «Сарко» (поставщики) договоры от  28.12.2012, 09.01.2013, 22.02.2013 на поставку строительных материалов, по  условиями которых покупатель обязан уплатить аванс в размере 30% от  стоимости строительных материалов и произвести последующую оплату товара  в течение 3 рабочих дней после сдачи работ по муниципальному контракту;  дата сдачи работ в договорах определена календарной датой – 23.07.2013).  

В рамках заключенного между обществом и поставщиками договоров  поставки истец в добровольном порядке уплатил своим поставщикам 7 515 812  рублей 53 копеек неустойки за нарушение срока оплаты поставленных  строительных материалов.  

Ссылаясь на то, что истец понес убытки, связанные с выплатой неустоек  своим контрагентам за несвоевременное исполнение обязательств по оплате  товара, приобретенного для выполнения работ по контракту, убытки понесены  в связи с невозможностью завершить работы в установленный в контракте срок  по не зависящим от истца и возникшим по вине ответчика причинам,  ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по оплате, общество  «Сарко» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.  

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом  положений статьи 393 того же Кодекса основанием для удовлетворения  требования о взыскании убытков является доказанность совокупности условий:  наличия убытков, их размера, неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, причинной связи между понесенными убытками и нарушением.  

Удовлетворяя требования в части взыскания 6 373 584 рублей 43 копеек  убытков, суды исходили из того, что возникновение у подрядчика убытков  вызвано ненадлежащим исполнение заказчиком обязательств по  муниципальному контракту.  

При этом оспариваемые судебные акты мотивированы тем, что  несвоевременное предоставление учреждением качественной проектно-сметной  документации привело к невозможности выполнения истцом работ в срок,  установленный в муниципальном контракте, в то время как для выполнения  работ по контракту подрядчик обязан был приобрести строительные  материалы, для надлежащего исполнения своих обязанностей по контракту им  заключены договоры на поставку материалов, а своевременная оплата  поставленных материалов не произведена в связи с ненадлежащим  исполнением заказчиком обязательств по контракту, ввиду чего покупатель  был вынужден уплатить неустойку, при этом необходимость уплаты неустойки  в сумме 6 373 584 рублей 43 копейки вызвана действиями заказчика.  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

Согласно пункту 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа  выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и  средствами. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек  подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2 статья 709  Гражданского кодекса Российской Федерации). Цена работ определяется путем  составления сметы.  

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что по  условиям договора подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные  муниципальным контрактом лично, и подрядчик не вправе привлекать к  исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), за исключением  привлечения по договору организации, имеющей право выполнения работ по  монтажу, ремонту по обслуживаю средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений на основании лицензии МЧС; при этом подрядчик несет  полную ответственность за результат работ данной организации (пункт 2.1.3  контракта). Подрядчик самостоятельно на основании проекта, локальных  сметных расчетов приобретает материалы, необходимые для выполнения работ  по контракту, при этом, компенсация таких расходов включена в цену  контракта (пункты 2.1.3, 4.1 контракта).  

В жалобе заявитель указывает, что не является стороной в договорах на  поставку строительных материалов, заключенных покупателем (подрядчиком  по муниципальному контракту) со своими поставщиками, обязательства по  приобретению строительных материалов и их оплата, а также уплата неустойки  не является обязательствами заказчика по муниципальному контракту, наличие  обстоятельств, с которыми связана уплата неустойки в связи с нарушением  истцом обязательств по договорам, стороной которых ответчик не является, не  связана с увеличением срока выполнения работ в рамках исполнения  муниципального контракта; невыполнение договорных обязательств – это риск  предпринимательской деятельности, который истец должен осознавать и нести,  как хозяйствующий субъект при заключении гражданско-правовых договоров.  

Заявитель полагает, что суды пришли к ошибочному выводу о  совокупности условий, необходимых для возложения на заказчика гражданско- правовой ответственности в виде возмещения убытков, поскольку  невыполнение договорных обязательств не является обстоятельством,  свидетельствующим о вине ответчика в нарушении истцом обязательств по  договорам, стороной которых ответчик не является, и не находится в причинно- следственной связи между действиями заказчика, выразившимися в длительном  согласовании проектно-сметной документации, и неоплатой строительных  материалов.  

В рассматриваемом случае с учетом статей 15, 393, 702-704 Гражданского  кодекса Российской Федерации доводы жалобы учреждения заслуживают  внимания и являются основанием для передачи кассационной жалобы вместе с  делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 291.6, 291.9 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья  

определил:

кассационную жалобу муниципального учреждения «Управление  капитального строительства» на решение Арбитражного суда Пермского края  от 11.11.2014, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  от 09.02.2015 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от  14.05.2015 по делу № А50-17401/2014 передать для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации.  

Назначить рассмотрение кассационной жалобы на 08 декабря 2015 года  в 10 час. 30 мин. в помещении Верховного Суда Российской Федерации по  адресу: ул. Поварская, д. 15, г. Москва, зал № 3048 (подъезд 5).  

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Е.Н.Золотова