ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 309-ЭС19-17885

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

11 октября 2019 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Оберег» (далее – общество «Оберег») на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19.11.2018, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.06.2019 по делу № А47-3781/2017 по иску общества «Оберег» к обществу с ограниченной ответственностью «ОрскСнаб» (далее - общество «ОрскСнаб») о взыскании долга, договорной неустойки, процентов,  по встречному иску о взыскании предоплаты, стоимости работ по устранению недостатков, договорной неустойки, расходов,  

установил:

решением суда первой инстанции от 19.11.2018, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 12.02.2019, в первоначальном иске отказано; встречный иск удовлетворен частично и с общества «Оберег» в пользу общества «ОрскСнаб» взыскано 1 500 000 руб. аванса, 1 000 000 руб. неустойки, 1 293 459 руб. 36 коп. расходов на устранение недостатков работ, 14 000 руб. расходов на оплату досудебной экспертизы,     распределены судебные расходы, в остальной части встречного иска отказано. 

Постановлением суда округа от 20.06.2019 названные судебные акты изменены в части удовлетворения встречного иска и распределения судебных расходов, в первоначальном иске отказано; встречный иск удовлетворен частично, с общества «Оберег» в пользу общества «ОрскСнаб» взыскано        400 560 руб. неосновательного обогащения, 1 000 000 руб. неустойки, 1 307 459 руб. 36 коп. убытков.  Распределены судебные расходы.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами норм права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Как следует из судебных актов, первоначальный иск мотивирован ненадлежащим исполнением обществом «ОрскСнаб» (заказчик) обязательств по договору подряда от 01.11.2016 № 45 в части оплаты выполненных обществом «Оберег» (подрядчик) работ. 

Встречный иск обоснован некачественным выполнением обществом «Оберег» работ, не устранением недостатков работ, выявленных в результате проведения досудебной экспертизы, нарушением сроков выполнения работ.   

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом результатов проведенных судебных экспертиз, суды первой и апелляционной инстанций установили факт существенного нарушения подрядчиком договорных обязательств в части качества выполненных работ, несоответствие результата работ требованиям договора и непригодность их к использованию, неисполнение требования заказчика об устранении в разумный срок недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока.

Руководствуясь статьями 309, 314, 702, 711, 720, 721, 722, 723, 724 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), признав правомерным отказ заказчика в одностороннем порядке от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 статьи 723 ГК РФ, суды пришли к выводам о наличии оснований для возврата заказчику уплаченного по договору аванса, возмещения понесенных им убытков в виде затрат на устранение допущенных подрядчиком недостатков работ и оплаты стоимости досудебной экспертизы, об отсутствии у заказчика обязанности по оплате работ и отказали в удовлетворении первоначального иска.

Учитывая не представление подрядчиком доказательств надлежащего выполнения работ и отсутствия его вины в нарушении сроков выполнения работ, руководствуясь статьями 15,  330, 333, 393, 453, 723, 1102 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций снизили начисленный в соответствии с пунктом 5.8 договора размер неустойки в связи с несоразмерностью штрафной санкции последствиям нарушения подрядчиком обязательств и удовлетворили встречный иск частично.

Суд округа согласился с выводами судов по первоначальному иску и изменил принятые по делу судебные акты в части удовлетворения встречного иска о взыскании аванса и распределения судебных расходов, исходя из несоответствия выводов судов об отсутствии оснований для оплаты всего объема выполненных подрядчиком работ, в том числе соответствующих требованиям проекта, фактическим обстоятельствам дела и положениям статей 711, 743 ГК РФ. 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, установлены судами первой и апелляционной инстанций и не требуют дополнительного исследования, суд округа, сделав вывод об отсутствии у общества «Оберег» оснований для удержания 400 560 руб., полученных в составе перечисленных заказчиком 1 500 000 руб., скорректировав судебные расходы по оплате государственной пошлины и экспертиз пропорционально размеру удовлетворенных требований, частично удовлетворил встречный иск.

Изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ,

судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Оберег» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда

Российской Федерации     Р.А. Хатыпова