ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 305-ЭС20-12310

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва24.09.2020 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев  кассационную жалобу публичного акционерного общества  

«Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – общество) на решение  Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2019, постановление Девятого  арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019 и постановление  Арбитражного суда Московского округа от 04.06.2020 по делу  

 № А40-70047/2019

по иску корпорации к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Строй Групп» (далее – компания) о взыскании  13 621 470 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору  от 22.09.2016  № 5/734, 

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2019, оставленным  без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда  от 13.12.2019 и постановлением Арбитражного суда Московского округа  

от 04.06.2020, с компании в пользу общества взыскано 1 500 000 руб.  неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, общество, ссылаясь на нарушение судами норм материального  

и процессуального права, просит отменить указанные судебные акты и принять  новый судебный акт об удовлетворении иска. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная  жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной  

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные  

в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм  материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших  

на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита  нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Между тем таких оснований по результатам изучения состоявшихся  по делу судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено. 

Удовлетворяя иск в части, суды первой и апелляционной инстанций,  руководствуясь статьями 307, 309, 310, 329, 330, 333, 401, 405, 406, 716, 719,  740 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями,  приведенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016  № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  

за нарушение обязательств», установив факт нарушения компанией  предусмотренных договором (в редакции дополнительного соглашения) сроков  выполнения работ, пришли к выводу о наличии оснований для взыскания  

с нее неустойки, уменьшив при этом ее размер ввиду несоразмерности  последствиям нарушения обязательств, а также с учетом того, что нарушение  сроков частично вызвано ненадлежащим исполнением обществом встречных  обязательств, в связи с чем компанией были приостановлены работы  

на объекте.С указанными выводами впоследствии согласился суд округа.

Доводы заявителя о нарушениях судом норм процессуального права,  выразившихся в отказе в удовлетворении ходатайств о приобщении  доказательств и назначении экспертизы, были предметом рассмотрения судов  

и получили правовую оценку.

Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы судов,  не подтверждают существенных нарушений судами норм материального  

и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются  достаточным основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 291.6  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья  Верховного Суда Российской Федерации 

определил:

отказать в передаче кассационной жалобы публичного акционерного  общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» для рассмотрения  

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Н.С. Чучунова