79073_1211439  

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 № 305-ЭС18-25787 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

г. Москва 29 января 2019 г.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Реставрационно-строительная компания Возрождение» (далее – общество) на  решение Арбитражного суда города Москвы от 20.04.2018, постановление  Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2018 и постановление  Арбитражного суда Московского округа от 25.10.2018 по делу № А40- 232845/17 по иску Федеральной службы по труду и занятости Российской  Федерации (далее - служба) к обществу о взыскании неустойки,  

установил:

решением суда первой инстанции от 20.04.2018, оставленным без  изменения постановлением апелляционного суда от 31.07.2018 и  постановлением суда округа от 25.10.2018, с общества в пользу службы  взыскано 33 512 824 руб. 91 коп. неустойки.  

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение  судами норм права.  

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если  изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм  материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на  исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных  

актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят  подтверждения в материалах дела.  

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты,  судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии  оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по  которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации.  

Как следует из судебных актов, 12.08.2016 между службой (заказчик) и  обществом (подрядчик) был заключен государственный контракт № 59-юр на  выполнение работ.  

Иск мотивирован нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по  контракту.  

Исследовав фактические обстоятельства дела, оценив представленные по  делу доказательства и степень влияния всех имевших место факторов на  просрочку исполнения сторонами взаимных обязательств, установив факт  нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, суды руководствовались  статьями 329, 330, 401, 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации  и, применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, пришли к выводу о наличии оснований для частичного  удовлетворения иска.  

Довод заявителя о наличии обстоятельств, повлекших нарушение сроков  выполнения работ по вине заказчика, рассмотрен судами и оценен.  

Полномочиями по изменению данной судами оценки с целью изменения  сделанных ими выводов по обстоятельствам спора судебная коллегия  кассационной инстанции в силу части 3 статьи 291.14 АПК РФ не наделена.  

Изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают  существенных нарушений судами норм материального и процессуального  права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются  основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ,  судья Верховного Суда Российской Федерации  

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Реставрационно- строительная компания Возрождение» в передаче кассационной жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации.  

Судья Верховного Суда  Российской Федерации Р.А. Хатыпова