ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 307-ЭС17-2646

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

05 апреля 2017 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВиГ» на решение Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2016, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2016  и  постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.12.2016  по делу № А56-81276/2015 по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВиГ» (далее – общество)  к Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию «Ленсвет»   (далее – предприятие)

о признании незаконными действий, выразившихся в одностороннем расторжении государственного контракта от 09.06.2015 № 59/2015-ОКС-Л  на реконструкцию наружного освещения парков, садов и скверов с внедрением энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования сада «Василеостровец» (далее − контракт), об обязании предприятия исполнить условия контракта и взыскании 129 541,58 руб. задолженности,

установил:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2016  и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.12.2016, требование о взыскании задолженности оставлено без рассмотрения,  в остальной части в иске отказано.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение арбитражным судом норм права в части отказа в признании незаконными действий государственного заказчика и обязании исполнить условия государственного контракта.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших  на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса  о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство  в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения  в материалах дела. 

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ,  по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения  в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как установлено судами, в связи с нарушением обществом промежуточных сроков выполнения работ предприятие (заказчик) 28.10.2015 приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем уведомило общество (подрядчика) письмом от 29.10.2015 № 0700/10876.

Общество, полагая отказ незаконным и ссылаясь на обязанность  предприятия оплатить фактически выполненные работы, обратилось в суд с иском, мотивируя тем, что просрочка при выполнении работ произошла по вине заказчика, который только 10.08.2015  предоставил дополнительные документы, необходимые для получения разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и ордера Государственной административно-технической инспекции.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили факт нарушения обществом сроков выполнения работ; достаточность переданных предприятием доверенностей для получения в государственных органах документов, необходимых для начала работ; отсутствие доказательств уведомления обществом заказчика в соответствии с пунктом 4.2.12 контракта о наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение сроков выполнения работ,  и, руководствуясь статьями 309, 310, 708, 715, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о правомерности одностороннего отказа предприятия от исполнения контракта. 

Изложенные в кассационной жалобе доводы не опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения  в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ВиГ» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения  в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации

Р.А. Хатыпова