ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 № 304-ЭС19-13754

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

16 августа 2019 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» на решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-11226/2018  от  02.11.2018, постановление  Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2019, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.05.2019 по тому же делу

   по иску администрации Новосибирского района Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» о взыскании неустойки в размере 16 327 600 руб., признании дополнительного соглашения недействительным,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: публичное акционерное общество «СеверГазБанк»,

УСТАНОВИЛ:

администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» (далее -  общество) о взыскании неустойки в размере 16 327 600 руб.

В рамках дела № А45-19790/2018 истец обратился к ответчику с иском о признании дополнительного соглашения от 21.11.2016 № 145 к муниципальному контракту на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирского района Новосибирской области от 08.09.2016 №Ф.2016.236805 недействительным. 

Определением от 06.08.2018  указанные дела объединены с присвоением делу номера № А45-11226/2018.

Решением  Арбитражного суда Новосибирской области от 02.11.2018 исковые требования удовлетворены в части: с общества в пользу администрации взыскано 8 734 918,80 руб., дополнительное соглашение признано  недействительным, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлениями  Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2019 и  Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.05.2019 по тому же делу решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество просит отменить принятые по делу судебные акты, направить дело на новое рассмотрение. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Удовлетворяя частично  иск администрации, суды, руководствуясь положениями статей  330, 432, 708, 763, 767,  положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установили  факт просрочки выполнения работ ответчиком и отсутствие законных оснований для заключения дополнительного соглашения об изменении срока выполнения работ.

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, аналогичны доводам, заявлявшимся в судах нижестоящих инстанций, которым дана надлежащая правовая оценка, выводов судов не опровергают, свидетельствуют не о нарушениях судами норм материального права, повлиявших на исход дела, а о несогласии с установленными по делу фактическими обстоятельствами, были проверены судами и признаны необоснованными, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что не входит в компетенцию Верховного Суда Российской Федерации. 

Поскольку существенных нарушений судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, доводы жалоб не подтверждают, оснований для передачи жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не имеется.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда

Российской Федерации

                 Е.Е. Борисова

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Борисова Е. Е.